- 2019. 12. 30.기준 -

민선7기 시장공약사항  관리카드

	(기획감사실)

목    차

Ⅰ. 풍요로운 미래를 선도하는 활력 있는 경제도시	5

Ⅱ. 역사와 문화가 살아 숨 쉬는 세계적인 문화ㆍ관광도시	31

Ⅲ. 개발과 보존이 조화를 이루는 따뜻한 친환경 복지도시	55

Ⅳ. 살기좋고 경쟁력을 갖춘 부자 농ㆍ어촌	79

Ⅴ. 건강하고 활기찬 시민중심의 안전도시	107

Ⅵ. 편리한 사통팔달 교통거점도시	133

Ⅶ. 미래교육을 선도하는 명품교육도시	155

Ⅰ. 풍요로운 미래를 선도하는            활력 있는 경제도시

Ⅰ		풍요로운 미래를 선도하는 활력있는 경제도시

공약현황

관리 번호	공약사업명	추진상황				추진율 (%)	추진부서
		완 료		추진중	보류
		종료	이행후계속추진
Ⅰ. 풍요로운 미래를 선도하는 활력 있는 경제도시		1	-	10	-	40.9
1	ㆍ우량기업 유치			○		60	지 역 경제과
2	ㆍ다양한 시책발굴을 통한 청년 일자리 창출			○		59	지역 경제과
3	ㆍ기업투자유치기금 100억원 조성			○		50	지역 경제과
4	ㆍ소상공인, 청년 창업가 지원 통합시스템 구축			○		73	지역 경제과
5	ㆍ문화의 전당에 문화 발전소 조성			○		10	문화 새마을과
6	ㆍ「3색5미」 전통시장 활성화			○		50	지역 경제과
7	ㆍ경찰서 이전부지 복합 업무타운 건립			○		8	도시 재생과
8	ㆍ쇗개포구 관광야시장 개설			○		-	지역 경제과
9	ㆍ보령항 개항지정에 따른 정부기관 유치	○				100	해양 정책과
10	ㆍ보령신항 다기능 복합항만 건설			○		10	해양 정책과
11	ㆍ건설기계 공영주기장 조성			○		30	교통과

재원계획

(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
계	443,188	2,500	4,971	13,676	29,327	40,401	34,413	317,900
국비	350,329	2,000	2,784	2,779	13,875	25,992	16,329	286,570
도비	12,479	-	114	1,070	4,142	3,200	3,253	700
시비	80,279	500	2,072	9,827	11,210	11,209	14,831	30,630
기타	101	-	1	-	100	-	-

Ⅰ-1		우량기업 유치

완료시기별	유 형 별	예산별		사업기간		사업주체		추진율
임기내 ․ 임기후	신규 ․ 지속	예산 ․ 비예산		2018 ~ 2022		국가ㆍ도ㆍ자체		60%
주관부서	협조부서	시민소통 방법
		설명회, 공청회 등	만족도 조사		민간전문가(대표자) 자문		언론 방송보도 기타
지역경제과	전부서	○			○		○

□ 정책목표

□ 우량기업 유치에 전행정력을 집중하여 고용창출 및 인구 유입

□ 웅천일반산업단지 등 100% 조기 분양으로 지역경제 활성화

□ 사업개요

□ 기업유치․일자리창출 목표: 50개 기업 / 1,500개 일자리 창출

□ 웅천일반산단 준공 및 조기분양: 686천㎡(총 207천 평, 산업용지 151천 평)

- 2020. 2. 부분준공 / 3.3㎡당 46만 원 / 건폐율70%(용적률 250%)

□ 청라농공단지 조성공사 추진: 67천㎡(20천 평)

- 총사업비 100억 원 / 2020.1. ~ 2021. 12.

□ 관창일반산업단지 관산지구 활성화: 294천㎡(88천 평)

- 근로자 주거 및 상업 → 공업용지 전환(용역 중단중), 입주기업 유치활동 중

□ 기업유치를 위한 홍보 및 활동 강화, 전 행정력 집중

- 전 직원 및 시민이 함께 기업유치 활동 적극 추진 / 유치성과포상제 실시

- 수도권 등 전광판 옥외광고, 온라인 배너광고, SNS 활용 홍보 등

□ 「보령시 기업 및 투자유치 촉진 등에 관한 조례」에 의거 보조금 지원

□ 연도별 추진계획

연도별	추진계획
추진계획	2018	2019	2020	2021	2022.6월	임기후
	·기업유치: 6 ·일자리 창출 180명	·기업유치: 12 ·일자리 창출 360명	·기업유치: 13 ·일자리 창출 390명	·기업유치: 13 ·일자리 창출 390명	·기업유치: 6 ·일자리 창출 180명
비율	12%	36%	62%	88%	100%	%

□ 연도별 예산확보(계획) 현황

(단위: 백만 원)

구 분	계	기투자	연도별 투자계획
			소계	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22.6월	임기 후
계	24,450		24,450	600	1,650	6,000	9,000	7,200
국 비	12,000		12,000			3,000	5,000	4,000
도 비	4,020		4,020		320	1,000	1,500	1,200
시 비	8,430		8,430	600	1,330	2,000	2,500	2,000

□ 그간 추진사항

[2018년]

□ 기업유치 실적(2018. 7. 1. ~ 12. 31.): 14개 기업 / 82명

- 기업유치․입주: 8개 기업 / 투자협약(MOU) 체결: 6개 기업

□ 기업유치 활동: 서울 및 수도권 등 타․시도 기업 방문․상담

- 상담기업의 입주의향 시 산업단지 현장 수시 안내

[2019년]

□ 기업유치 실적(2019. 1. 1. ~ 11. 30.): 28개 기업 / 458명

- 기업유치․입주: 23개 기업 / 투자협약(MOU) 체결: 5개 기업

□ 산업단지별 투자 대화 진행 상황

(웅천일반산단) 5개 업체

① 전기자동차  ② 가드레일지지 보강재 ③ 에너지 신소재 ④ 소스류

⑤ 풍력발전기 구조물 제조업체

(관창산단) 2개 업체 / ① 자동차부품 ②  발전업

(관창산단 관산지구) 2개 업체 / 정제 식용소금 제조업체, 인삼가공 등

※ 자동차 튜닝(특화) 산업단지 조성 추진 중 (90천㎡)

(청소농공단지) 1개 업체 / 즉석식품 제조업체

추진실적

※

※ 투자유치 협약 체결

갓바위식품㈜와 투자유치 협약 체결	KJC(케이제이씨)와 투자유치 협약 체결
Protix, ㈜두비원과 투자유치 협약 체결	㈜KDF, ㈜대신축로엔지니어링과 협약체결

□ 2020년 상반기 추진계획

□ 투자협의중인 기업과 지속적 협의 및 지원으로 적극 유치 노력

□ 전 직원 및 시민이 함께하는 기업유치 전개

- 기업유치 유공자 인센티브 제공: 포상금 지급 및 특별 승진

□ 수도권 공단 주변 산업단지공단 방문 및 홍보물 비치

□ 보령시, 충남도, 충남개발공사 등 연계 합동 기업유치 활동 전개

□ 충남개발공사 웅천일반산단 분양사 선정 분양 대행 추진

□ 기대효과

□ 지방세 확충, 고용창출 등을 통한 지역경제 활성화

□ 우량기업 유치를 통한 좋은 일자리 제공으로 인구증가에 기여

지역경제과장 복규범 / 기업유치팀장 김계환 / 담당자 전장수  ☎ 3721

Ⅰ-2		다양한 시책발굴을 통한 청년일자리 창출

완료시기별	유 형 별	예산별		사업기간		사업주체		추진율
임기내 ․ 임기후	신규 ․ 지속	예산 ․ 비예산		2018.~2022.		국가ㆍ도ㆍ자체		59%
완료시기별	유 형 별	예산별
		설명회, 공청회 등	만족도 조사		민간전문가(대표자) 자문		언론 방송보도 기타
지역경제과					○

□ 정책목표

□ 청년일자리 협의회 구축을 통한 지역 특색을 반영한 시책 발굴·추진

□ 일하고 싶은 고용환경 조성 등 지역청년 육성 정착을 통한 지역경제 활성화

□ 사업개요

□ 사업기간: 2018년 ~ 2022년

□ 사업범위: 보령시에 주소를 두고 있는 청년

□ 소요예산: 2,658백만 원

□ 사업내용

- 청년일자리협의회 구성 및 반기별 회의를 통한 청년시책 발굴

- 지역주도형 청년일자리사업 지속 발굴·추진(행정안전부 공모사업)

- 산·학·관 연계 기업맞춤형 인재육성 및 정착을 위한 노력

* 특성화고 학생 대상 취업캠프 운영, 원산도 대명리조트 준공(2021년도)에 따른 맞춤형 인력수급 준비 등

□ 연도별 추진계획

연도별	추진계획
추진계획	2018	2019	2020	2021	2022.6월	임기후
	·일자리 창출 9명	·일자리 창출 53명	·일자리 창출 69명	·일자리 창출 80명	·일자리 창출 90명
비율	9%	59%	76%	89%	100%

□ 연도별 예산확보(계획) 현황

(단위: 백만 원)

구 분	계	기투자	연도별 투자계획
			소계	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22.6월	임기 후
계	6,311		6,311	123	852	1,542	1,786	2,008
국 비	3,016		3,016	59	396	740	857	964
도 비	1,485		1,485	24	185	369	427	480
시 비	1,810		1,810	40	271	433	502	564

□ 그간 추진사항 (2018~2019)

사 업 명	참여 기업	인원	사업비 (백만 원)				비고
			계	국	도	시
총 계	35	53	974	454	209	311
마을청년활동가 지원사업	17	21	551	255	127	169	2018~19년
청년 중소기업 채용 지원사업	10	10	86	45	19	22	2019년
청년 상생고용 지원사업	3	3	25	13	5	7	2019년
청년창업지원사업	-	12	190	80	40	70	2019년
사회적경제 청년도제사업	5	7	122	61	18	43	2018~19년

□ 2020년 상반기 추진계획

□ 지속 가능한 일자리 모델 발굴·정립 ⇨ 지역의 특성‧자원‧기술‧공간 활용

□ 지역주도형 청년 일자리 공모사업 적극 발굴 신청 확보

□ 기대효과

□ 일하고 싶은 고용환경 조성 등 지역 청년 육성·정착을 통한 지역경제 활성화

지역경제과장 복규범 / 일자리정책팀장 김성환 / 담당자 김유미 ☎930-3726

Ⅰ-3		기업투자유치 기금 100억원 조성

완료시기별	유 형 별	예산별		사업기간		사업주체		추진율
임기내 ․ 임기후	신규 ․ 지속	예산 ․ 비예산		2018 ~ 2022		국가ㆍ도ㆍ자체		50%
주관부서	협조부서	시민소통 방법
		설명회, 공청회 등	만족도 조사		민간전문가(대표자) 자문		언론 방송보도 기타
지역경제과	기획감사실	○			○		○

□ 정책목표

□ 웅천산단 본격 입주 시 기업 보조금 지급 등 재정압박 해소

□ 보조금 즉시 지원체계 구축으로 기업인에게 믿음과 신뢰 회복

□ 사업개요

□ 조성근거:「보령시 기업 및 투자유치 촉진 등에 관한 조례」

□ 조성방식: 2018년부터 매년 15 ~ 25억 원씩 시비 출연

- 재  원: 시 출연금, 기금 운용발생 수익금, 그 밖의 출연금

□ 활    용: 관련법령, 조례 등에 근거한 입주기업 보조

- 이전기업 투자보조, 입주기업 고용·교육·이주정착, 전세금 등

- 기금의 지속적인 확보 노력 및 기금활용 대상사업 발굴

□ 기금조성에 대한 홍보활동으로 관외기업 유인

□ 연도별 추진계획

연도별	추진계획
추진계획	2018	2019	2020	2021	2022.6월	임기후
	투자유치 기금 1,300백만 원	투자유치 기금 3,700백만 원	투자유치 기금 1,700백만 원	투자유치 기금 1,700백만 원	투자유치 기금 1,600백만 원
비율	13%	50%	67%	84%	100%	%

□ 연도별 예산확보(계획) 현황

(단위: 백만 원)

구 분	계	기투자	연도별 투자계획
			소계	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22.6월	임기 후
계	10,000	500	9,500	800	3,700	2,000	1,500	1,500
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-
시 비	10,000	500	9,500	800	3,700	2,000	1,500	1,500

□ 그간 추진사항

□ (2018년) 투자유치기금 13억 원 조성

□ (2019년) 투자유치기금 37억 원 조성: 현재까지 50억 원 확보

※ 2020년 본예산 편성 시 20억 원 추가 확보

□ 2020년 상반기 추진계획

□ 2020년 추경예산 편성 시 15억 원 추가 확보 추진

□ 정기예금 예탁 및 관리로 기금운용 수익 극대화

□ 기금조성에 대한 적극홍보를 통하여 투자 유인

□ 웅천산단 입주기업 등에게 보조금 지원 필요 시 기금확보 예산 집행

- 보조금 지원 규모에 따라 일반예산과 병행 확보·집행

□ 기대효과

□ 2020년 웅천산단 본격 입주 시 보조금 확보 등 시 재정압박 해소

□ 보조금 즉시지원체계 구축으로 기업인에게 믿음과 신뢰 확보

지역경제과장 복규범 / 기업유치팀장 김계환 / 담당자 전장수  ☎ 3721

Ⅰ-4		소상공인, 청년창업가지원 통합시스템 구축

완료시기별	유 형 별	예산별		사업기간		사업주체		추진율
임기내 ․ 임기후	신규 ․ 지속	예산 ․ 비예산		2018 ~ 2022		국가ㆍ도ㆍ자체		73%
주관부서	협조부서	시민소통 방법
		설명회, 공청회 등	만족도 조사		민간전문가(대표자) 자문		언론 방송보도 기타
지역경제과

□ 정책목표

□ 소상공인 및 청년 창업가 지원시스템 구축을 통한 간접 취업지원

□ 지역 소상공인 및 청년들의 어려움을 해소하여, 일하기 좋은 지역환경 구현

□ 사업개요

□ 사업기간: 2018 ~ 2022

□ 사업범위: 소상공인 및 청년(만18세~45세) 예비 창업가

□ 사 업 비: 6,832백만 원

□ 사업내용

- 예비 청년창업가 대상 창업실무교육 및 맞춤형 컨설팅 지원(개별 15시간 이상)

- 경영·마케팅 등 분야별 사업화 및 임차료, 인테리어, 홍보비용 용도 창업자금 지원

- 정부 두루누리사업 참여 소상공인 사업주부담 사회보험료 지원

- 소상공인 특례보증 및 이차보전지원(기존 확대)

* 특례보증은 융자금 100% 전액 보증, 보증수수료 1.0% 고정, 이자지원 이율은 2%, 2년

□ 연도별 추진계획

연도별	추진계획
추진계획	2018	2019	2020	2021	2022.6월	임기후
	228건	732건	850건	900건	1,000건
비율	22%	73%	85%	90%	100%

□ 연도별 예산확보(계획) 현황

(단위: 백만 원)

구 분	계	기투자	연도별 투자계획
			소계	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22.6월	임기 후
계	11,619		11,619	300	1,854	3,155	3,155	3,155
국 비	498		498		93	135	135	135
도 비	4234		4,234	0	565	1,223	1,223	1,223
시 비	6887		6,887	300	1,196	1,797	1,797	1,797

※창업지원+소상공인 특례보증,이차보전,사회보험료

□ 그간 추진사항

[2018년~2019년]

- 예비 청년창업가 창업지원(창업실무교육 및 컨설팅제공)

사 업 명	참여 기업	인원	사업비 (백만 원)				비고
			계	국	도	시
총 계	3	15	215	93	45	77
청년 상생고용 지원사업	3	3	25	13	5	7	2018년
청년창업지원사업	-	12	190	80	40	70	2018년

- 소상공인 특례보증 및 이차보전 지원실적

(단위: 업체수/ 백만원)

구 분	계	2018년	2019년
특례보증	305 / 7,202	108 / 2,402	197 / 4,800
이차보전	270 / 220	120 / 100	105 / 120

- 소상공인 사회보험료 지원실적

(단위: 업체수/ 백만원)

구 분	계	2019년	비고
소상공인 사회보험료	418 / 931	418 / 931	2019년부터 시행 ‘19. 4분기 ‘20. 2. 지급예정

□ 2020년 상반기 추진계획

□ 소상공인지원 특례보증 및 이차보전 업무 위탁 협약

□ 소상공인 특례보증 지원계획 공고

□ 소상공인 사회보험료 지원 접수 및 지원

□ 기대효과

□ 신규 고용 창출 및 취업 간접지원을 통한 경제성장의 긍정적 동력 제공

□ 아이디어 창업이 일자리창출로 이어지는 소상공인, 청년창업 생태계 선순환

지역경제과장 복규범 / 일자리정책팀장 김성환 / 담당자 김유미 ☎930-3726

/지역경제팀장   고준웅  / 담당자 이혁재 ☎930-3713

Ⅰ-5		문화의 전당에 문화발전소 조성

완료시기별	유 형 별	예산별		사업기간		사업주체		추진율
임기내 ․ 임기후	신규 ․ 지속	예산 ․ 비예산		2019. ~ 2021		국가ㆍ도ㆍ자체		10%
주관부서	협조부서	시민소통 방법
		설명회, 공청회 등	만족도 조사		민간전문가(대표자) 자문		언론 방송보도 기타
문화새마을과					〇		〇

□ 정책목표

□ 문화의 전당 시설과 연계 자투리 공간 활용 복합 문화예술 공간 구성

□ 다양한 장르의 문화와 예술이 공존하는 지역명소로 부각

□ 사업개요

□ 사업기간: 2019 ~ 2020년 (2년간)

□ 사업범위: 문화의 전당

□ 사 업 비: 2,000백만 원 (시비 1,900 , 기타 100)

□ 사업내용

- 야외공연장 개선 게릴라(버스킹) 공연장으로 조성

- 문화의 전당 주변 야외공연을 위한 장비 구입

- 문화활동 지원 사업을 통한 지역주민의 예술활동 지원

► 지역 생활문화 동호회 지원 (연습공간 공유 등)

► 찾아가는 문화활동 지원       ► 보령예술제 지원

□ 연도별 추진계획

연도별	추진계획
추진계획	2018	2019	2020	2021	2022.6월	임기후
		야외공연장 개선	장비구입 및 예술활동 지원	예술활동 지원
비율	%	50%	80%	100%	%	%

□ 연도별 예산확보(계획) 현황

(단위: 백만 원)

구 분	계	기투자	연도별 투자계획
			소계	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22.6월	임기 후
계	2,000		2,000		50	1,870	40	40
국 비
도 비
시 비	1,900		1,900		50	1,770	40	40
기 타	100		100			100

□ 그간 추진사항

[2018년~2019. 12월]

❍ 야외공연장 조성계획 수립 (2019. 01. 23)

❍ 의원 간담회 및 주민설명회 (2월, 3월)

❍ 설치공사 설계비 49백만원 제1회 추경 예산 편성 (4월)

❍ 광장형 야외공연장 조성 공사 기본설계 용역 (20백만원)

- 계약 5. 29. , 착공 5. 31. , 준공 8. 28.

□ 2020년 상반기 추진계획

□ 2020년 광장형 야외공연장 조성 공사비 본예산 편성 추진

□ 기대효과

□ 전시와 공연을 아우르는 복합 문화예술 공간 조성을 통한 이미지 쇄신

□ 문화의 전당 명성에 걸 맞는 문화 발전소로서의 역할 수행으로 지역주민 참여를 통한 문화예술 향유기회 확대

문화새마을과장 이병윤  / 문화의전당팀장 복천규  ☎ 930-3404

Ⅰ-6		「3색 5미」전통시장 활성화

완료시기별	유 형 별	예산별		사업기간		사업주체		추진율
임기내 ․ 임기후	신규 ․ 지속	예산 ․ 비예산		2018. ~ 2022.		국가ㆍ도ㆍ자체		50%
주관부서	협조부서	시민소통 방법
		설명회, 공청회 등	만족도 조사		민간전문가(대표자) 자문		언론 방송보도 기타
지역경제과	-	◯	-		◯		◯

□ 정책목표

□ 3색(色) 사람 냄새나고 문화가 함께하는 자연친화적인 다시 찾고 싶은 전통시장

□ 5미(味) 단만, 짠맛, 신맛, 쓴맛, 감칠맛을 느낄 수 있는 맛있는 전통시장

□ 사업개요

□ 사업기간: 2018. ~ 2022.

□ 사업범위: 관내 전통시장(중앙, 한내, 웅천, 동부, 현대, 대천항종합수산물시장)

□ 사 업 비: 1,890백만 원(국 615, 도 240, 시 1,034, 기타 1)

□ 사업내용

- 중앙시장 ⇒ 문화관광형 특화 시장 조성

․빈 점포 활용 수공예품 및 김 가공 체험장 조성

․휴게공간 조성(청소년 쉼터, 키즈카페) ⇒ 젊은 고객층 유입

․특화메뉴 및 한입먹거리 개발 ⇒ 김(해장)국, 광어(치즈)가스, 김 장아찌 등

- 한내시장 ⇒ 먹거리 테마거리 조성

․특산물을 이용한 특화상품 개발(파래김, 반건조 생선 등)

․청년상인 및 핵점포 육성

․특성화시장 육성사업 및 주차장 조성사업

- 대천항종합수산물시장 ⇒ 건어물 및 수산물 특화거리 조성

․아케이드 설치 / 바닥트릭아트 및 벽화조성

․청년상인 및 핵점포 육성

․시장매니저, 배송서비스 및 콜센터 운영

- 웅천시장

․주차장 조성사업 추진

□ 연도별 추진계획

연도별	추진계획
추진계획	2018	2019	2020	2021	2022.6월	임기후
	·한내시장 특화상품개발 및 청년점포 육성(2개)	·중앙시장 휴게공간 조성 (청소년쉼터, 키즈까페)	·중앙시장 특화메뉴 개발 (한입 먹거리)	·대천항종합 수산물시장 ( 건어물 특화거리 조성)	·대천항종합 수산물시장 ( 건어물 특화거리 조성)
비율	25%	50%	75%	85%	100%	%

□ 연도별 예산확보(계획) 현황

(단위: 백만 원)

구 분	계	기투자	연도별 투자계획
			소계	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22.6월	임기 후
계	1,890		1,890	630	780	160	160	160
국 비	615		615	225	390
도 비	240		240	90		50	50	50
시 비	1,034		1,034	314	390	110	110	110
기 타	1		1	1

□ 그간 추진사항

□ 중앙시장 문화관광형 특화시장 육성사업 추진: 860백만 원

- 시장특화상품 개발메뉴 판매장 조성, 야시장 운영 등

□ 한내시장 특성화 첫걸음(기반조성) 사업 추진: 280백만 원

- 3대 서비스역량 및 2대 조직역량 강화, 특성화시장 도약 등

□ 한내시장 스타점포 육성 2개 점포 완료: 10백만 원

□ 2020년 상반기 추진계획

□ 전통시장 활성화 행사 추진

□ 시장경영바우처 지원사업 추진: 시장매니저, 배송서비스 등

□ 시설현대화 사업 추진

□ 웅천시장 주차장 조성사업 추진

□ 기대효과

□ 특색 있는 볼거리, 먹거리 개발을 통하여 보령시민 및 관광객 유입 기대

□ 전통시장 이용객 증가로 침체된 지역상권 활성화 도모 기대

지역경제과장 복규범 / 지역경제팀장 고준웅 / 담당자 이용환  ☎ 930-3713

Ⅰ-7		경찰서 이전부지 복합 업무타운 건립

완료시기별	유 형 별	예산별		사업기간		사업주체		추진율
임기내 ․ 임기후	신규 ․ 지속	예산 ․ 비예산		2018. ~ 2024.		국가ㆍ도ㆍ자체		8%
주관부서	협조부서	시민소통 방법
		설명회, 공청회 등	만족도 조사		민간전문가(대표자) 자문		언론 방송보도 기타
도시재생과	보건소,대천1동 회계과,수도과, 문화새마을과	〇			〇		〇

□ 정책목표

□ 원도심 공공기능 회복 및 시민편의 제공 등 주민생활복지 강화

□ 사업개요

□ 사업기간: 2019. 1. ~ 2024. 6.

□ 사업위치: 대천동 170-1, 171번지(7,325㎡)

□ 사 업 량: 지하 2층 / 지상 4층, 연면적 17,478㎡

□ 사 업 비: 50,500백만 원(국 4,100 도 1,000, 시 45,400)

□ 사업내용: 보건소, 대천1동사무소, 대천1동 주민자치센터, 주민문화교실, 지하주차장, 휴게공원

□ 연도별 추진계획

연도별	추진계획
추진계획	2018	2019	2020	2021	2022.6월	임기후
	-추진계획 수립	-지방재정투자 심사 진행	-지방재정투자 심사 완료 -설계공모 착수	-설계공모 완료(공정률: 20%)	-공사착공 -사업추진 (공정율:30%)	-사업완료 (24년6월)
비율	5%	20%	50%	70%	100%

□ 연도별 예산확보(계획) 현황

(단위: 백만 원)

구 분	계	기투자	연도별 투자계획
			소계	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22.6월	임기 후
계	50,500		50,500		190	1,500	4,360	10,250	34,200
국 비	4,100		4,100					1,230	2,870
도 비	1,000		1,000					300	700
시 비	45,400		45,400		190	1,500	4,360	8,720	30,630

□ 그간 추진사항

[2018~2019년]

□ 2018. 06.: 원도심 복합업무타운 건립 실과 협의

□ 2018. 06.: 원도심 복합업무타운 건립 계획 보고(1차)

□ 2019. 01.: 중앙투자심사서 제출을 위한 타당성조사용역 착수

□ 2019. 08.: 한국지방행정연구원 타당성 조사 의뢰서 제출

□ 2019. 10.: 한국지방행정연구원 타당성 조사서 적정성검토 업무수행 약정서 체결

추진실적

※

- 한국지방행정연구원 타당성 조사서 적정성검토 업무수행 약정서 체결

□ 2020년 상반기 추진계획

□ 2020. 03.: 한국지방행정연구원 타당성 조사서 적정성검토 완료

□ 2020. 04.: 행정자치부 중앙투자심사서 제출

□ 2020. 05.: 중앙투자심사 승인

□ 기대효과

□ 공공기관 이전에 따른 원도심 공동화 현상 예방 및 전통시장 활성화

□ 근린 공공시설 원도심 조성으로 행정편의성 제공 및 지하주차장 조성으로  주차난 해소(250대)

도시재생과장 문홍배 / 도시재생사업팀장 신광호 / 담당자 이상섭  ☎ 930-3871

Ⅰ-8		쇗개포구 관광야시장 개설

완료시기별	유 형 별	예산별		사업기간		사업주체		추진율
임기내 ․ 임기후	신규 ․ 지속	예산 ․ 비예산		2018. ~ 2022.		국가ㆍ도ㆍ자체		-
주관부서	협조부서	시민소통 방법
		설명회, 공청회 등	만족도 조사		민간전문가(대표자) 자문		언론 방송보도 기타
지역경제과	도시재생과				◯		◯

□ 정책목표

□ 쇗개포구 명소화 조성사업으로 조성 될 수변 보행 공간 및 친수공간에 원도심  활성화를 위한 4개 전통시장 연합 관광야시장 개설 추진

□ 사업개요

□ 사업기간: 2020년 ~ 2022년

□ 사업범위: 대천천 쇗개포구 일원

□ 사 업 비: 300백만 원(시비 300)

□ 사업내용

- 쇗개포구 명소화 조성사업 완료 후(2020년) 대천시내 4개 전통시장 연합  관광야시장 조성 추진 ⇒ 먹거리 포차운영 및 버스킹 공연 등

- 상춘객, 피서객을 대상으로 시범운영 후 확대추진 검토

□ 연도별 추진계획

연도별	추진계획
추진계획	2018	2019	2020	2021	2022.6월	임기후
			관광야시장 개설 2회	관광야시장 개설 2회	관광야시장 개설 2회
비율			100%	100%	100%	%

□ 연도별 예산확보(계획) 현황

(단위: 백만 원)

구 분	계	기투자	연도별 투자계획
			소계	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22.6월	임기 후
계	300		300			100	100	100
국 비
도 비
시 비	300		300			100	100	100
기 타

□ 그간 추진사항

□ 쇗개포구 명소화 조성사업 기본 및 실시설계용역 추진 중: 도시재생과 사업(행정절차 이행중)

※ 쇗개포구 명소화 조성사업: 6,000백만 원(도 3,000, 시 3,000)

□ 2020년 상반기 추진계획

□ 도시재생과의 쇗개포구 명소화 조성사업 추진현황에 맞춰 관광야시장 세부 추진계획 수립

□ 기대효과

□ 보령지역 활성화의 신 성장거점 구축을 위한 쇗개포구 명소화 사업과 연계 추진하여 보령시민 및 관광객 유입 기대

지역경제과장 복규범 / 지역경제팀장 고준웅 / 담당자 이용환  ☎ 930-3713

Ⅰ-9		보령항 개항 지정에 따른 정부기관 유치

완료시기별	유 형 별	예산별		사업기간		사업주체		추진율
임기내 ․ 임기후	신규 ․ 지속	예산 ․ 비예산		2018. ~ 2019.		국가ㆍ도ㆍ자체		100%
주관부서	협조부서	시민소통 방법
		설명회, 공청회 등	만족도 조사		민간전문가(대표자) 자문		언론 방송보도 기타
해양정책과							○

□ 정책목표

□ 보령항 개항 지정(2018. 5. 8.)에 따른 관련 국가기관 유치로 수요자 중심의

관세행정 수행

□ 사업개요

□ 사업기간: 2018 ~ 2019년

□ 사업범위: 보령시

□ 사 업 비: 비예산

□ 사업내용: 군산세관 보령세관비즈니스센터 기관 유치(8명)

□ 연도별 추진계획

연도별	추진계획
추진계획	2018	2019	2020	2021	2022.6월	임기후
	정원, 조직, 예산 승인	개청(완료)
비율	50%	100%

□ 연도별 예산확보(계획) 현황

(단위: 백만 원)

구 분	계	기투자	연도별 투자계획
			소계	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22.6월	임기 후
계				비	예	산
국 비
도 비
시 비
기 타

□ 그간 추진사항

[2018~2019년]

□ 2018.  5.: 보령항 개항 지정

□ 2018.  9.: 보령세관비즈니스센터 신설 정원 승인(행안부, 기재부)

□ 2018. 11.: 사무실 사용 허가(보령우체국 4층, 충청우정청)

□ 2019. 2.: 사무실(보령우체국 4층 130㎡) 인테리어 및 전산․통신 구축

□ 2019. 3.: 개청완료

추진실적

※

대전일보 (2018-05-10)

□ 2020년 상반기 추진계획

□ 해당없음

□ 기대효과

□ 보령항의 개항 지정에 이어 수요자 중심의 관세행정 시스템 구축

□ 보령항 개발과 보령신항 건설의 촉매제 역할

해양정책과장 한상범 / 해양정책팀장 신명섭  ☎ 930-6501

Ⅰ-10		보령신항 다기능 복합항만 건설

완료시기별	유 형 별	예산별		사업기간		사업주체		추진율
임기내 ․ 임기후	신규 ․ 지속	예산 ․ 비예산		2018. ~ 2030.		국가ㆍ도ㆍ자체		10%
주관부서	협조부서	시민소통 방법
		설명회, 공청회 등	만족도 조사		민간전문가(대표자) 자문		언론 방송보도 기타
해양정책과		○			○		○

□ 정책목표

□ 신해양시대 대중국 물동량 및 관광잠재력을 수용할 서해안 관문항 육성

□ 『마리나+관광+화물』을 함께 수용하는 다기능 복합항만 건설

□ 사업개요

□ 사업기간: 2018 ~ 2030년

□ 사업범위: 보령시 천북면 학성리

□ 사 업 비: 330,109백만 원(국비)

□ 사업내용

- 항만시설부지(준설토 투기장), 다목적 부두, 마리나항, 배후단지(시설) 등

□ 연도별 추진계획

연도별	추진계획
추진계획	2018	2019	2020	2021	2022.6월	임기후
	항만시설부지 실시설계	항만시설부지 타당성 재조사	항만시설부지 착공	항만시설부지 공사(공정률60%)	항만시설부지 완공	복합항만 신항건설
비율	10%	25%	45%	70%	100%

□ 연도별 예산확보(계획) 현황

(단위: 백만 원)

구 분	계	기투자	연도별 투자계획
			소계	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22.6월	임기 후
계	330,100	2,000	328,100	2,500	1,900	10,000	20,000	10,000	283,700
국 비	330,100	2,000	328,100	2,500	1,900	10,000	20,000	10,000	283,700
도 비
시 비
기 타

□ 그간 추진사항

[2018~2019년]

□ 2018. 7.: 항만시설용부지(준설토투기장) 조성 기본 및 실시설계 완료(대산청)

□ 2019. 6.: 항만시설용부지(준설토투기장) 타당성재조사 착수(기재부)

□ 2019. 8.: 제2차 신항만건설 기본계획(항만시설용부지, 관리부두 반영)

□ 2020년 상반기 추진계획

□ 2020. 1.: 보령신항만 사전기반 조성 연구용역 착수(자체)

□ 2020. 3.: 항만시설용부지(준설토투기장) 타당성재조사 완료(기재부)

□ 2019.˜2022.: 항만부지 공사시행

□ 기대효과

□ 서해안 중부지역 물류 거점항만으로서 국토 균형발전 도모

□ 서해안 관광벨트, 대중국 교역, 레저가 함께하는 서해안의 명문항

해양정책과장 한상범 / 해양정책팀장 신명섭  ☎ 930-6501

Ⅰ-11		건설기계 공영주기장 조성

완료시기별	유 형 별	예산별		사업기간		사업주체		추진율
임기내 ․ 임기후	신규 ․ 지속	예산 ․ 비예산		2019 ~ 2021		국가ㆍ도ㆍ자체		30%
주관부서	협조부서	시민소통 방법
		설명회, 공청회 등	만족도 조사		민간전문가(대표자) 자문		언론 방송보도 기타
교통과	도시재생과 도로과, 대천5동	○

□ 정책목표

□ 건설기계 공영주기장의 조성을 통해 건설기계의 무분별한 주정차로 인한 대형사고를 미연에 방지하고 원활한 도로소통을 도모코자 함

□ 사업개요

□ 사업기간: 2019년 ~ 2021년

□ 사업위치: 내항동 254 일원(27필지 20,259㎡)

- 시유지: 6필지 3,044㎡ / 사유지: 21필지 17,215㎡

□ 소요예산: 6,000백만 원

□ 사업내용: 건설기계 공영주기장(대형163대) 및 관리동, 가로등, CCTV 등

□ 연도별 추진계획

연도별	추진계획
추진계획	2018	2019	2020	2021	2022.6월	임기후
	기본계획	도시관리계획 변경결정	보상 및 공사추진 (공정률: 60%)	사업완료
비율	10%	30%	80%	100%

□ 연도별 예산확보(계획) 현황

(단위: 백만 원)

구 분	계	기투자	연도별 투자계획
			소계	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22.6월	임기 후
계	6,000		6,000		2,700	3,000	300
국 비
도 비	1,500		1,500			1,500
시 비	4,500		4,500		2,700	1,500	300
기 타

□ 그간 추진사항

[2018년~2019년]

□ 2018. 03. 26.: 건설기계 공영주기장 조성 검토(방침결재)

□ 2018. 06. 07.: 충청남도 도로교통과 방문 협의

□ 2018. 06. ~ 09.: 공영주기장조성 기본계획 수립 용역

□ 2018. 11월중: 지방재정투자심사 및 공유재산심의 등 행정절차 이행

□ 2018. 11. 29.: 건설기계 공영주기장 조성 협의(대천5동, 내항1통장)

□ 2019. 01. 14.: 세부추진계획 수립

□ 2019. 02. 15.: 주민설명회 개최(내항1통 녹문마을회관)

□ 2019. 02. 26.: 보상계획 공고

□ 2019. 04. 25.: 감정평가 실시

□ 2019. 05. 31.: 손실보상금 결정(1차)

□ 2019. 06. 27.: 도시계획시설 변경결정용역 착수

□ 2019. 10.  7.: 도시관리계획(주차장) 변경결정 입안

□ 2019. 10. ~ 12. 현재: 관련실과 협의 및 조치계획 수립

주민설명회 (‘19. 2. 15. / 내항1통 녹문마을회관)		감정평가 (‘19. 4. 25.)

추진실적

※

□ 2020년 상반기 추진계획

□ 도시계획시설(주차장) 결정 및 지형도면 고시

□ 실시설계 용역(도시계획시설 실시계획 인가 포함) 및 보상 추진

□ 기대효과

□ 무분별한 주정차에 따른 교통사고 예망 및 원활한 도로소통 도모

□ 공회전 소음 및 매연 등 주민 민원의 해소와 안전사고 방지

교통과장 허도욱 / 교통지도팀장 이승기 / 담당자 김종국  ☎ 3973

Ⅱ. 역사와 문화가 살아 숨 쉬는          세계적인 문화ㆍ관광도시

Ⅱ		역사와 문화가 살아 숨 쉬는 세계적인 문화․관광도시

공약현황

관리 번호	공약사업명	추 진 상 황				추진율 (%)	추진부서
		완 료		추진중	보류
		종료	이행후계속추진
Ⅱ. 역사와 문화가 살아 숨 쉬는 세계적인 문화ㆍ관광도시		-	-	10	-	29.5
1	ㆍ2022보령해양머드박람회 성공 개최			○		40	박람회지원단
2	ㆍ국제수준의 해양레저 복합단지 조성			○		10	해양 정책과
3	ㆍ원산도 해양레저관광 거점 조성			○		20	미래 사업과
4	ㆍ서해낙조전망대 건립, 야경명소 개발			○		-	해수욕장경영과
5	ㆍ성주산 모노레일 설치			○		25	미래 사업과
6	ㆍ성주산 숲 하늘길 걷기 체험시설			○		30	미래 사업과
7	ㆍ성주산 캠핑시설 설치			○		50	산림 공원과
8	ㆍ원산도 주변 5개 도서 관광테마 용역			○		70	해양 정책과
9	ㆍ무창포 ~ 석대도 관광케이블카 설치			○		-	해수욕장경영과
10	ㆍ성주산 낙조전망대 설치			○		50	관광과

재원계획

(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
계	175,180	0	160	2,774	13,766	17,280	21,600	119,600
국비	53,500	-	-	200	1,650	9,350	5,000	37,300
도비	8,350	-	-	25	1,325	2,900	2,000	2,100
시비	27,220	-	160	2,549	10,711	4,500	4,100	5,200
기타	86,110	-	-	-	80	530	10,500	75,000

Ⅱ-1		2022보령해양머드박람회 성공 개최

완료시기별	유 형 별	예산별		사업기간		사업주체		추진율
임기내 ․ 임기후	신규 ․ 지속	예산 ․ 비예산		2018∼2022		국가ㆍ도ㆍ자체		40%
주관부서	협조부서	시민소통 방법
		설명회, 공청회 등	만족도 조사		민간전문가(대표자) 자문		언론 방송보도 기타
박람회지원단	전부서	○			○		○

□ 정책목표

□ 2022보령해양머드박람회 국제행사 승인 ※ 승인: 2018. 8. 3.

□ 박람회 성공 개최 준비(조례 제정, 운영조직 구성, 실행계획 수립, 행사장 조성)

□ 사업개요

□ 기    간: 2022. 7. 16. ∼ 8. 15.

□ 사 업 비: 14,550백만 원

□ 주요내용: Public전시, Biz전시, 비즈니스 상담/미팅, 학술대회 등

□ 주최/후원: 충남도·보령시 / 해양수산부

□ 연도별 추진계획

연도별	추진계획
추진계획	2018	2019	2020	2021	2022.6월	임기후
	국제행사 승인	박람회 홍보 운영 조직 설립	기반시설 구축	Pre 박람회 개최	개최 홍보 및 행사장 조성
비율	20%	40%	60%	80%	100%	%

□ 연도별 예산확보(계획) 현황

(단위: 백만 원)

구 분	계	기투자	연도별 투자계획
			소계	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22.6월	임기 후
계	14,550		14,550			2,300	6,750	5,500
국 비	4,350		4,350				4,350
도 비	2,900		2,900			1,000	1,400	500
시 비	2,900		2,900			1,300	1,000	600
기 타 (자체수익)	4,400		4,400					4,400

□ 그간 추진사항

[2018년~2019년]

□ 2022보령해양엑스포 국제행사 신청(보령시·충남도⇒해수부⇒기재부 / '18. 2.)

□ 2022보령해양머드박람회 국제행사 개최 승인(기재부, 국제행사심사위원회 / '18. 8.)

□ 보령해양머드박람회 국제머드 포럼 개최(독일·일본·한국 해양치유 전문가 초청/ '18. 11.)

□ 보령해양머드박람회조직위원회 설립 ('19. 5.)

□ 보령해양머드박람회 캐릭터 개발(3종 /토니, 꾸니, 자리 / '19. 6.)

□ 보령해양머드박람회 지원단 구성 운영(3팀 / '19. 10.)

□ 해양레저·산업 관련 국제협력 추진(미국, 캐나다 / '19. 10.)

□ 보령해양머드박람회 연계사업 추진('19. 12.)

□ (재)보령해양머드박람회조직위원회 이사회 개최('19. 12.)

□ 2019 해양치유 국제머드포럼 개최(독일·한국 해양치유 전문가 초청/ '19. 12.)

추진실적(주요 보도현황)

※

□ 2020년 상반기 추진계획

□ 2022 보령해양머드박람회 연계사업 발굴 추진

□ 보령해양머드박람회 조직위원회 사무처 파견 협의(충남도)

□ 머드 산업 연합체 구성 운영

□ 국내·외 대형 행사장 박람회 홍보(홍보부스 운영, 홍보물 배부 등)

□ 파워유튜버 활용, 애니메이션 제작 등 온라인 홍보 확산

□ 세계머드도시연합 구성을 위한 국제협력 구축

□ 보령해양머드박람회 조직위원회 사무실 증축

□ 박람회 개최 관련 교통영향조사로 주차 시스템 도입 등 마련

□ 박람회장 인근 기반시설 조성을 위한 국도비 확보 추진

□ 기대효과

□ 해양자원 머드 활용 해양신산업의 글로벌 모멘텀 마련

□ 해양레저 관광의 대중화·산업화 선도

□ 서해안 해양관광 거점도시 조성

□ 보령-태안 연육교 건설에 따른 잠재적 관광수요 흡수

□ 경제적 효과 1,464억원    □ 고용창출 1,462명

박람회지원단장 현종훈  /  행정지원팀장 김영섭  / 담당자 안오순   ☎ 3061

Ⅱ-2		국제수준의 해양레저 복합단지조성

완료시기별	유 형 별	예산별		사업기간		사업주체		추진율
임기내 ․ 임기후	신규 ․ 지속	예산 ․ 비예산		2018. ~ 2030.		국가ㆍ도ㆍ자체		10%
주관부서	협조부서	시민소통 방법
		설명회, 공청회 등	만족도 조사		민간전문가(대표자) 자문		언론 방송보도 기타
해양정책과					○

□ 정책목표

□ 국민소득 증대와 해양 여가문화 확산에 대한 고 부가가치 창출

□ 4계절 해양관광체험 여건 마련을 통한 해양 신성장 동력 확충

□ 서해안 최대 해양레저 거점항 개발을 통한 해양관광 활성화

□ 사업개요

□ 사업기간: 2018 ~ 2030년

□ 사업범위: 보령시 신흑동 대천항 수역 (70,000㎡)

□ 사 업 비: 100,000백만원

- 국비 30,000, 기타(민자) 70,000

□ 사업내용

- 대천항 준설 및 매립

- 계류장(요트, 레저보트 등), 호텔, 상업시설, 클럽하우스 등

□ 연도별 추진계획

연도별	추진계획
추진계획	2018	2019	2020	2021	2022.6월	임기후
	제4차(2021~2030) 전국 연안항 기본계획 수립 용역 및 기본계획 반영				국비예산 확보	사업 추진
비율	10%	20%	30%	70%	100%

□ 연도별 예산확보(계획) 현황

(단위: 백만 원)

구 분	계	기투자	연도별 투자계획
			소계	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22.6월	임기 후
계	100,000	-	100,000	-	-	-	-	-	100,000
국 비	30,000	-	30,000	-	-	-	-	-	30,000
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기 타	70,000	-	70,000	-	-	-	-	-	70,000

□ 그간 추진사항

[2018~2019년]

□ 해양수산부, 충청남도: 제4차 전국항만 기본계획, 제2차 마리나항만 기본계획 반영 협조

□ 해양레저 복합단지조성 사업 타당성 조사 용역비 2019년 본예산 반영 요구

□ 타당성 조사용역 착공

□ 2020년 상반기 추진계획

□ 제2차 마리나항만 기본계획 용역 준공 및 사업지 발표

□ 타당성 조사용역 완료

□ 기대효과

□ 해양레저 관광 활성화를 통한 지역경제 활성화

해양정책과장 한상범 / 해양환경항만팀장 오보형 / 담당자 진승종 ☎930-6514

Ⅱ-3		원산도 해양레저관광 거점 조성

완료시기별	유 형 별	예산별		사업기간		사업주체		추진율
임기내 ․ 임기후	신규 ․ 지속	예산 ․ 비예산		2020. ~ 2024.		국가ㆍ도ㆍ자체		20%
주관부서	협조부서	시민소통 방법
		설명회, 공청회 등	만족도 조사		민간전문가(대표자) 자문		언론 방송보도 기타
미래사업과		○

□ 정책목표

□ 해양레저관광 수요 증가에 부응하여 해양관광 자원을 연계한 4계절 해양레저·관광·수상안전 확보를 통해 서해안 해양레저관광 거점 지역 조성

□ 사업개요

□ 사업기간: 2020년 ~ 2024년 (5년)

□ 사업위치: 보령시 오천면 원산도 일원 [사창해수욕장]

□ 사 업 비: 39,140백만 원[국비18,300 도비 5,400 시비 15,440]

□ 사업내용: 해양레저관광 거점 조성(A=63,745㎡)

□ 연도별 추진계획

연도별	추진계획
추진계획	2018	2019	2020	2021	2022.6월	임기후
		타당성조사용역	실시설계 사업착공	사업추진 (공정률30%)	사업추진 (공정률60%)	사업완료 시설운영
비율	%	20%	30%	55%	65%	100%

□ 연도별 예산확보(계획) 현황

(단위: 백만 원)

구 분	계	기투자	연도별 투자계획
			소계	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22.6월	임기 후
계	39,140	-	-	-	140	4,400	10,000	10,000	14,600
국 비	18,300	-	-	-	-	1,000	5,000	5,000	7,300
도 비	5,400	-	-	-	-	300	1,500	1,500	2,100
시 비	15,440	-	-	-	140	3,100	3,500	3,500	5,200
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 그 간 추진사항

[2018년~2019년]

□ 2019. 3.: 타당성조사 용역 착수(협상에 의한 계약)

□ 2019. 5. ~ 7.: 관계부처 협의 [충남도청, 기획재정부, 해양수산부 등]

□ 2019. 7.: 지방재정 영향평가 승인

□ 2019. 7.: 보령시·한국농어촌공사 해양 분야 업무 협약 체결

□ 2019. 8.: 해양레저 안전 체험장 운영에 따른 보령해양경찰서 협조

□ 2019.11.: 공약사항 변경 통보

[공약명: 원산도 산림해양치유센터 조성 → 원산도 해양레저관광 거점 조성]

□ 2019. 11.: 공모사업 신청(11.15.)/ 대면평가(11.22.)

□ 2019. 12: 현장평가(12. 6.)/ 종합평가 및 최종 사업대상지 선정(12.20.예정)

추진실적

※

보령시·한국농어촌공사 업무협약서		한국해양구조협회 공문	보령해양경찰서 공문

□ 2020년 상반기 추진계획

□ 2020. 1.: 지방재정투자심사 신청[행정안전부]

□ 2020. 2. ~ 2021. 1.: 기본 및 실시설계용역 추진

□ 기대효과

□ 원산도의 풍부한 자연환경과 해양레포츠 관광자원을 전국적으로 발산하여 관광객을 유치함으로써 해양레저 진흥 및 지역경제 활성화에 이바지 함

미래사업과장 이수형 / 해양관광개발팀장 유재선 / 담당자 김희진  ☎ 930-6731

Ⅱ-4		서해낙조 전망대 건립, 야간명소 개발

완료시기별	유 형 별	예산별		사업기간		사업주체		추진율
임기내 ․ 임기후	신규 ․ 지속	예산 ․ 비예산		2020∼2023		국가ㆍ도ㆍ자체		0
주관부서	협조부서	시민소통 방법
		설명회, 공청회 등	만족도 조사		민간전문가(대표자) 자문		언론 방송보도 기타
해수욕장경영과	-	○	-		-		-

□ 정책목표

□ 낙조전망대를 개발하여 새로운 관광명소 개발(민간투자개발사업)

□ 사업개요

□ 사업기간: 2020.∼2023

□ 사업범위: 관광호텔 옥상에 전망대 시설/민간투자방식

□ 소요예산: 1,630백만원(민간투자)

□ 사업내용: 낙조전망대 1식

□ 연도별 추진계획

연도별	추진계획
추진계획	2018	2019	2020	2021	2022.6월	임기후
	-	-	-	타당성조사용역	사업착공 사업완료	-
비율	0%	0%	%	10%	90%	%

□ 연도별 예산확보(계획) 현황

(단위: 백만 원)

구 분	계	기투자	연도별 투자계획
			소계	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22.6월	임기 후
계	1,630		1,630				30	1,600
국 비
도 비
시 비
기 타	1,630		1,630				30	1,600

□ 그간 추진사항

[2018~2019년]

□ 2018.12.: 서해낙조전망대 설치 타당성조사 용역비 2019년 본예산 신청(미반영)

□ 2019. 1.: 2019년 제1회 추경예산 타당성조사 용역비(20백만원)신청→삭감

□ 2019. 7.: 민선7기 시장 공약사항 추진부서 변경[미래사업과 → 해수욕장경영과]

□ 2019. 10.: 호텔 용지 조성계획(변경)을 위한 입안제안 상담

- 지정용도변경: 관광숙박 ⇒ 일반 및 생활숙박

- 층수변경(10층 ⇒ 25층 이하)

□ 2020년 상반기 추진계획

□ 관광호텔부지 조성계획(변경) 입안 제안시 적극검토

□ 관계기관 등 업무협의

□ 기대효과

□ 서해낙조의 아름답고 새로운 관광명소 개발

□ 지역경제 활성화에 기여

해수욕장경영과장 전근성 / 팀장 조병주 / 담당자 권장군    ☎ 930-6841

Ⅱ-5		성주산 모노레일 설치

완료시기별	유 형 별	예산별		사업기간		사업주체		추진율
임기내 ․ 임기후	신규 ․ 지속	예산 ․ 비예산		2017.~ 2021.		국가ㆍ도ㆍ자체		25%
주관부서	협조부서	시민소통 방법
		설명회, 공청회 등	만족도 조사		민간전문가(대표자) 자문		언론 방송보도 기타
미래사업과	산림공원과충청남도 산림자원연구소						◯

□ 정책목표

□ 낙후된 폐광지역의 관광객 유입시설 설치로 지역경제 활성화

□ 내륙관광 시설확충으로 해양관광과 균형있는 관광기반시설 추축

□ 사업개요

□ 사업기간: 2017. 1. ~ 2021. 12.

□ 사업범위: 명천동 777-33번지 일원

□ 소요예산: 6,000백만 원(폐광지역 개발기금)

□ 사업내용: 모노레일 설치(L=3.6km, 차량10대, 기타부대시설(매표소 등))

□ 연도별 추진계획

연도별	추진계획
추진계획	2018	2019	2020	2021	2022.6월	임기후
	타당성조사 및 기본설계	실시설계용역	실시설계완료 및 공사시행	공사준공 및 운행
비율	3%	25%	60%	100%	%	%

□ 연도별 예산확보(계획) 현황

(단위: 백만 원)

구 분	계	기투자	연도별 투자계획
			소계	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22.6월	임기 후
계	6,000		6,000	60	500	5,440
국 비
도 비
시 비	6,000		6,000	60	500	5,440
기 타

□ 그 간 추진사항

□ 2018. 3. : 정책협의회

□ 2018. 4. : 최종보고회 개최

□ 2019. 2. : 타당성 조사 및 기본계획 완료

□ 2019. 3. : 지방재정투자심사 수행

□ 2019. 6. : 실시설계용역착수

추진실적

※

↳ 노선선정

□ 2020년 상반기 추진계획

□ 2020. 1. : 도유재산 사용협의

□ 2020. 5. : 실시설계용역 완료

□ 2020. 6. : 공사발주

□ 기대효과

□ 내륙관광 산업의 활성화로 해양관광과 균형있는 관광보령 조성

□ 낙후된 폐광지역에 관광기반시설 확충, 관광객 유입으로 지역경제 활성화

미래사업과장 이수형 / 전략사업팀장 이인행 / 담당자 윤영선  ☎ 930-6712

Ⅱ-6		성주산 숲 하늘길 걷기 체험시설

완료시기별	유 형 별	예산별		사업기간		사업주체		추진율
임기내 ․ 임기후	신규 ․ 지속	예산 ․ 비예산		2018.~ 2020.		국가ㆍ도ㆍ자체		30%
주관부서	협조부서	시민소통 방법
		설명회, 공청회 등	만족도 조사		민간전문가(대표자) 자문		언론 방송보도 기타
미래사업과	산림공원과						◯

□ 정책목표

□ 낙후된 폐광지역의 관광시설 설치를 통한 지역경제 활성화

□ 무궁화수목원과 연계 내륙관광 시설확충으로 균형있는 관광자원 개발

□ 사업개요

□ 사업기간: 2018. 1. ~ 2020. 4.

□ 사업범위: 보령시 성주면 성주리 251-8번지 일원(무궁화수목원 내)

□ 소요예산: 2,000백만 원(폐광지역 개발기금)

□ 사업내용: 숲 하늘길 걷기체험시설 L=172m, H=15m(최대)

□ 연도별 추진계획

연도별	추진계획
추진계획	2018	2019	2020	2021	2022.6월	임기후
	실시설계	실시설계완료 및 공사착공	공사준공
비율	10%	30%	100%	%	%	%

□ 연도별 예산확보(계획) 현황

(단위: 백만 원)

구 분	계	기투자	연도별 투자계획
			소계	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22.6월	임기 후
계	2,000		2,000	100	1,654	246
국 비
도 비
시 비	2,000		2,000	100	1,654	246
기 타

□ 그 간 추진사항

□ 2018. 11. : 실시설계용역 착수

□ 2019.  6. : 기술자문심의위원회 개최

□ 2019. 10. : 공법 및 자재선정 위원회 개최

□ 2019. 11. : 실시설계용역 완료

□ 2019. 12. : 공사발주 및 착공

추진실적

※

↳ 디자인 선정

□ 2020년 상반기 추진계획

□ 2020. 1.~ 3. : 교량 하부 공사 추진

□ 2020. 3 ~ 5. : 교량 상부공사 추진

□ 2020. 6. : 사업완료

□ 기대효과

□ 무궁화수목원과 연계된 관광자원 조성으로 수목원 활성화

□ 폐광지역 내 내륙관광자원개발로 균형있는 관광개발 및 지역경제 활성화

미래사업과장 이수형 / 전략사업팀장 이인행 / 담당자 윤영선  ☎ 930-6712

Ⅱ-7		성주산 캠핑시설 설치

완료시기별	유 형 별	예산별		사업기간		사업주체		추진율
임기내 ․ 임기후	신규 ․ 지속	예산 ․ 비예산		2018~2021		국가ㆍ도ㆍ자체		50%
주관부서	협조부서	시민소통 방법
		설명회, 공청회 등	만족도 조사		민간전문가(대표자) 자문		언론 방송보도 기타
산림공원과			○

□ 정책목표

□ 성주산 산림자원 활용 가족단위 캠핑 힐링 문화 공간 조성

□ 성주산 자연휴양림 캠핑장 보완 ․ 개선 통한 관광객 만족도 제고

□ 사업개요

□ 사업기간: 2019년 ~ 2021년

□ 사업범위: 성주산자연휴양림 일원

□ 사업비: 200백만원

□ 사업내용

- 노후 야영데크 등 시설물 교체 및 요철부 평탄작업

- 샤워시설 및 배수시설 정비

□ 연도별 추진계획

연도별	추진계획
추진계획	2018	2019	2020	2021	2022.6월	임기후
		노후시설물 교체 및 정비	시설물 보완
비율	%	50%	100%	%	%	%

□ 연도별 예산확보(계획) 현황

(단위: 백만 원)

구 분	계	기투자	연도별 투자계획
			소계	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22.6월	임기 후
계	200		200		100	100
국 비	100		100		50	50
도 비	50		50		25	25
시 비	50		50		25	25
기 타

□ 그간 추진사항

[2018~2019년]

□ 2019년 노후 야영데크 등 시설물 교체 보완사업 완료

□ 2019년 보완사업 완료

- 물놀이장 바닥 에폭시 도장 1,374㎡

- 야영장 노후 데크 12개 철거, 10개 신설

- 개수대 1개소, 식수대 1개소 정비 및 안내판 설치 2개소

- 제2야영장 샤워장 및 화장실 정비

추진실적

※

야영장 데크 교체 및 물놀이장 에폭시 작업

□ 2020년 상반기 추진계획

□ 성주산자연휴양림 캠핑장 보완·개선

□ 샤워시설 및 배수시설 정비

□ 기대효과

□  캠핑족(Camping族) 유입 통한 관광객 증가 및 지역경제 활성화

□  캠핑장 이용객 만족도 제고 및 성주산 일원 산림관광 문화 확산 기여

산림공원과장 김구연 / 산림휴양팀장 양우성 / 담당자 김태수  ☎ 930-4082

Ⅱ-8		원산도 주변 5개 도서 관광테마 용역

완료시기별	유 형 별	예산별		사업기간		사업주체		추진율
임기내 ․ 임기후	신규 ․ 지속	예산 ․ 비예산		2019		국가ㆍ도ㆍ자체		70%
주관부서	협조부서	시민소통 방법
		설명회, 공청회 등	만족도 조사		민간전문가(대표자) 자문		언론 방송보도 기타
해양정책과					○

□ 정책목표

□ 국도77호 개통에 따른 원산도 인근 도서의 접근성 강화에 따라 도서관광객

유치를 위한 도서별 특화관광 테마개발

□ 사업개요

□ 사업기간: 2019년(1년)

□ 사업범위: 보령시 오천면 도서일원

□ 사 업 비: 80백만 원(시비 80)

□ 사업내용

- 어촌뉴딜 300사업 공모신청방식으로 수립 사업 변경

□ 연도별 추진계획

연도별	추진계획
추진계획	2018	2019	2020	2021	2022.6월	임기후
		용역착수 용역완료
비율	%	100%	%	%	%	%

□ 연도별 예산확보(계획) 현황

(단위: 백만 원)

구 분	계	기투자	연도별 투자계획
			소계	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22.6월	임기 후
계	80		80		80
국 비
도 비
시 비	80		80		80
기 타

□ 그간 추진사항

[2018~2019년]

□ 2018.12.: 원산도 주변 5개 도서 관광테마 용역비(80백만 원) 확보

□ 2019. 1.: 원산도 주변 5개 도서 관광테마 용역 수행 방침 결정

◇ 사업 효과 극대화 및 실현성 확보를 위해 해양수산부 주관 「어촌

뉴딜300사업」공모 신청방식으로 관광테마 용역 수립 사업을 변경

□ 2019. 3.: 원산도 주변 주요도서 어촌뉴딜 300사업 계획 수립용역 발주

구분	도서명	주요 사업 내용	비고
계	5개 지역
1	고대도	□선교테마 문화관광자원 개발
2	장고도	□명장해수욕장 관광개발 및 전통문화복원
3	삽시도	□둘레길등 해안경관 관광자원화 개발
4	효자2리	□5개섬 권역별 관광자원 개발
5	효자도	□어촌 민속마을을 테마 관광자원개발	2019년 선정

□ 2020년 상반기 추진계획

□ 2020. 1.: 공모선정결과에 따라 본사업 추진

- 녹도 사업선정(2020~2023 / 총사업비 30억원 / 국비 24, 도비 3, 시비 3)

- 효자도, 장고도, 삽시도 공모 사업 추진중

□ 기대효과

□ 도서별 테마를 활용한 세부추진과제를 도출하여 실현 가능한 도서관광개발

사업추진

□ 각 도서의 테마별 사업타당성 검토 및 수지 분석 후 재정투자심사 등 행정절차

이행 자료 활용

해양정책과장 한상범 / 섬자원개발팀장 김양집   ☎930-6502

Ⅱ-9		무창포∼석대도 간 관광케블카 설치

완료시기별	유 형 별	예산별		사업기간		사업주체		추진율
임기내 ․ 임기후	신규 ․ 지속	예산 ․ 비예산		2020∼2023		국가ㆍ도ㆍ자체		-
주관부서	협조부서	시민소통 방법
		설명회, 공청회 등	만족도 조사		민간전문가(대표자) 자문		언론 방송보도 기타
해수욕장경영과	-	○	-		-		-

□ 정책목표

□ 석대도지구 관광지 개발과 연계한 새로운 관광명소 개발(민간투자개발사업)

□ 사업개요

□ 사업기간: 2020년∼2023년

□ 사업범위: 무창포해수욕장과 석대도지구를 연결하는 게이블카시설

□ 소요예산: 10,080백만원(민간투자)

□ 사업내용: 케이블카 1식

□ 연도별 추진계획

연도별	추진계획
추진계획	2018	2019	2020	2021	2022.6월	임기후
	-	-	민간시행자 타당성분석	실시설계 사업착공	사업추진 (공정률40%)	사업완료
비율			20%	40%	70%	100%

□ 연도별 예산확보(계획) 현황

(단위: 백만 원)

구 분	계	기투자	연도별 투자계획
			소계	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22.6월	임기 후
계	10,080		10,080			80	500	4,500	5,000
국 비
도 비
시 비
기 타	10,080		10,080			80	500	4,500	5,000

□ 그간 추진사항

[2018~2019년]

□ 2018. 8. : 무창포해수욕장 관광지(석대도지구) 조성계획(변경) 입안 제안

□ 2019. 7. : 민선7기 시장 공약사항 추진부서 변경 [미래사업과 → 해수욕장경영과]

□ 2019. 9. : 관광지(석대도지구) 조성계획(변경) 입안 제안 반려처분

□ 2019. 11.: 행정심판청구(청구자/(주)태림디앤씨)

▶ 2019. 12. 23.(18:10): 행정심판 심리 및 재결

□ 2020년 상반기 추진계획

□ 2019. 12. 23. 행정심판 처분결과에 따라 행정절차 이행

□ 관계기관 등 업무협의

□ 기대효과

□ 무창포만의 차별화한 새로운 관광명소 개발

□ 지역경제 활성화에 기여

해수욕장경영과장 전근성 / 팀장 조병주 / 담당자 권장군    ☎ 930-6841

Ⅱ-10		성주산 낙조전망대 설치

완료시기별	유 형 별	예산별		사업기간		사업주체		추진율
임기내 ․ 임기후	신규 ․ 지속	예산 ․ 비예산		2019. ~ 2020.		국가ㆍ도ㆍ자체		50%
주관부서	협조부서	시민소통 방법
		설명회, 공청회 등	만족도 조사		민간전문가(대표자) 자문		언론 방송보도 기타
관광과	산림공원과 충청남도 산림자원연구소				◌		◌

□ 정책목표

□ 내륙지역 관광자원 개발

□ 관광자원 간 연계를 통한 지역경제 활성화

□ 사업개요

□ 사업기간: 2019~2020(2년간)

□ 사업범위: 보령시 성주면 개화리 114-22 일원(패러글라이딩 활공장)

□ 소요예산: 1,500백만 원(국비 750, 시비 750)

□ 사업내용: 낙조전망대(B=25.0m, H=6.9m) 1식, 화장실 1식

□ 연도별 추진계획

연도별	추진계획
추진계획	2018	2019	2020	2021	2022.6월	임기후
		실시설계용역 및 사업 착수	사업완료	사업완료
비율	%	50%	100%	100%	%	%

□ 연도별 예산확보(계획) 현황

(단위: 백만 원)

구 분	계	기투자	연도별 투자계획
			소계	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22.6월	임기 후
계	1,500				300	1,200
국 비	750				150	600
도 비
시 비	750				150	600
민 간
기 타

□ 그간 추진사항

[2018년~2019년]

□ 2018. 12. 21.: 사용 도유림, 시유림 교환 계획 방침 결정

□ 2018. 12. 31.: 도유림, 시유림 교환 협의 요청(도 산림자원연구소)

□ 2019.  2. 18.: 도유재산 교환 결정 알림(도 산림자원연구소)

□ 2019.  4.  2.: 감정평가 완료

□ 2019.  4.  4.: 실시설계용역 착수

□ 2019.  4. 18.: 성주산 낙조전망대 디자인용역 완료

□ 2019.  5.  1.: 토지교환 공유재산심의회 원안가결

□ 2019.  5. 17.: 분할측량 완료

□ 2019.  5. 21.: 토지교환 공유재산관리계획 변경 의회 승인

□ 2019.  9.  4.: 교환토지 등기이전 완료

□ 2019. 11. 12.: 실시설계용역 완료

□ 2019. 11. 27.: 공사 착공

추진실적

※

※ 토지교환 자료 등

□ 2020년 상반기 추진계획

□ 2020. 6.: 공사 준공

□ 기대효과

□ 보령을 대표하는 랜드마크로 조성하여 시민의 휴게장소 제공 및 관광객 유치

□ 신규관광객 유치를 위해 주변관광지와 연계한 다원화된 관광전략 수립으로

지역경제 활성화

※ 주변관광지: 오석테마거리, 석탄박물관, 자연휴양림, 개화예술공원, 무궁화수목원 등

관광과장 이선규 / 관광개발팀장 이윤영 / 담당자 이재용  ☎ 930-6571

Ⅲ. 개발과 보존이 조화를 이루는          따뜻한 친환경 복지도시

Ⅲ		개발과 보존이 조화를 이루는 따뜻한 친환경 복지도시

공약현황

관리 번호	공약사업명	추진상황				추진율 (%)	추진부서
		완 료		추진중	보류
		종료	이행후계속추진
Ⅲ. 개발과 보존이 조화를 이루는 따뜻한 친환경 복지도시		-	3	6	-	50
1	ㆍ전세대 및 기업용 전기요금 지원		○			100	지역 경제과
2	ㆍ대천해수욕장 및 대천항 도시가스 공급지역 확대			○		10	지역 경제과
3	ㆍ시민 힐링 대규모 도시공원 조성			○		10	산림 공원과
4	ㆍ보령시립도서관 건립			○		15	교육 체육과
5	ㆍ가족지원센터 건립(여성ㆍ어린이회관 기능 수행)			○		15	사회 복지과
6	ㆍ치매안심센터ㆍ치매병원 운영		○			100	보건소 (건강증진과)
7	ㆍ종합복지타운 건립			○		50	사회 복지과
8	ㆍ청정바다 가꾸기 프로젝트			○		50	해양 정책과
9	ㆍ경로당 운영지원 확대		○			100	사회 복지과

재원계획

(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
계	172,485	1,000	10,202	32,190	27,518	33,078	52,897	15,600
국비	39,349	-	3,674	18,478	5,266	5,997	5,934	-
도비	9,573		374	721	1,500	5,909	1,069	-
시비	117,597	1,000	6154	12,991	15,786	20,172	45,894	15,600
기타	5,966	-	-	-	4,966	1,000	-	-

Ⅲ-1		전 세대 및 기업용 전기요금 지원

완료시기별	유 형 별	예산별		사업기간		사업주체		추진율
임기내 ․ 임기후	신규 ․ 지속	예산 ․ 비예산		2019. ~ 2022.		국가ㆍ도ㆍ자체		100%
주관부서	협조부서	시민소통 방법
		설명회, 공청회 등	만족도 조사		민간전문가(대표자) 자문		언론 방송보도 기타
지역경제과							○

□ 정책목표

□ 화력발전소로 인해 고통과 불편을 감수해야 하는 시민과 기업게 전기요금의

일부를 지원함으로써 주민 생활안정과 기업 상생제고 기여

□ 사업개요

❍ 현행

- 지원범위: 발전소로부터 반경 5㎞이내 지역(주포, 주교, 오천, 천북)

- 소요예산: 1,900백만 원(보령발전본부 부담)

∘ 주택(9,108가구): 1,140백만 원, 가구당 월 최고 200kwh( 17,690원 상당)

∘ 기업(  364업체):  760백만 원, 기업당 월 최고 200kw (500,000원 상당)

❍ 확대

- 지원범위: 발전소주변지역 외 지역(주변지역 지원액의 50%범위내)

- 지원방식: 한전에서 대상자에게 지원금액 감액후 고지서 발송(보령시 지원 표시)후

감면금액 보령시에서 한전에 일괄납부

- 소요예산: 6,785백만 원(시 재정 부담)

∘ 주택(39,417가구): 4,184백만 원 가구당 월 최고 100kwh( 8,845원 상당)

∘ 기업(   867업체): 2,601백만 원 기업당 월 최고 100kw(250,000원 상당)

□ 연도별 추진계획

연도별	추진계획
추진계획	2018	2019	2020	2021	2022.6월	임기후
	지원조례제정	시행규칙제정 시스템 구축 전기요금지원 협약체결	전기요금지원	전기요금지원	전기요금지원
비율	5%	100%	100%	100%	100%	%

□ 연도별 예산확보(계획) 현황

(단위: 백만 원)

구 분	계	기투자	연도별 투자계획
			소계	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22.6월	임기 후
계	22,604		22,604	-	2,249	6,785	6,785	6,785
국 비
도 비
시 비	22,604		22,604	-	2,249	6,785	6,785	6,785
기 타

□ 그간 추진사항

[2018년~2019년]

□ 보령시 시민 및 기업 전기요금 일부지원 조례 제정(2018.12..)

□ 보령시 시민 및 기업 전기요금 일부지원 규칙 제정(2019.3.)

□ 한전과 전기요금 보조사업 지원시행 협약 체결(2019.5.)

□ 전기요금 보조사업 시스템 개발(2019.6.)

□ 전기요금 보조사업 추진(2019. 7월 ~   )

추진실적

※

□ 2020년 상반기 추진계획

□ 전기요금 보조사업 지속 계속 추진

□ 기대효과

□ 살기좋은 보령시 건설을 통한 시 이미지 제고

□ 보령시 전 시민 대상 보편적 복지 실현으로 인구증가에 기여

지역경제과장 복규범 / 에너지산업팀장 최승연 / 담당자 이종우  ☎ 930-3741

Ⅲ-2		대천해수욕장 및 대천항 도시가스 공급지역 확대

완료시기별	유 형 별	예산별		사업기간		사업주체		추진율
임기내 ․ 임기후	신규 ․ 지속	예산 ․ 비예산		2020. ~ 2021.		국가ㆍ도ㆍ자체		10 %
주관부서	협조부서	시민소통 방법
		설명회, 공청회 등	만족도 조사		민간전문가(대표자) 자문		언론 방송보도 기타
지역경제과	국토관리청 도로과, 교통과	o

□ 정책목표

□ 대천해수욕장 및 대천항 일원 도시가스 공급으로 보령시 도시가스 보급률 제고 (43% → 52%)

□ 사업개요

□ 위    치: 대천해수욕장 및 대천항 일원

□ 사 업 량: 주관로 매설 L=21.2km, 도시가스공급: 940세대

□ 사업기간: 2020년 ∼ 2021년

□ 총사업비: 8,800백만 원(시비 2,834,  JB(주) 5,966))

□ 연도별 추진계획

연도별	추진계획
추진계획	2018	2019	2020	2021	2022.6월	임기후
	지원방안 검토등	타당성용역및투융자심사등 행정절차이행	관로매설=15.4KM 가스공급 681세대 예산확보및지원 (보급률: 48%)	관로매설=5.2KM 가스공급249세대 예산확보및지원 (보급률: 50%)	공급지원 시행 (보급률: 52%)
비율	10%	20%	80%	90%	100%	%

□ 연도별 예산확보(계획) 현황

(단위: 백만 원)

구 분	계	기투자	연도별 투자계획
			소계	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22.6월	임기 후
계	8,800		8,800			6,866	1,934
국 비
도 비
시 비	2,834		2,834			1,900	934
기 타	5,966		5,966			4,966	1,000

□ 그간 추진사항

[2018년~2019년]

□ 사업 추진계획 및 재정지원 여부 방침결정 : 2018. 10. 26.

□ 중기지방재정계획 반영 : 2018. 11. 20.

❍ 충남도 예산담당관실 및 에너지과 방문 2019. 03. 12.

❍ 국회의원 사무실(김태흠) : 2019. 04. 12

❍ 충남도 의원(이영우, 김한태) : 2019. 04. 24.

❍ 지방재정투자심사를 위한 타당성 용역 완료(20백만 원) : 2019. 04. 26.

□ 업무협약체결(보령시 → JB주식회사) : 2019. 07. 18.

□ 충남도 지방재정투자심사 완료 : 2019. 09. 20.

□ 실시설계 용역 완료[JB(주)]: 2019. 11. 30.

□ 2020년 상반기 추진계획

❍ 대천역 ~ 시민탑 광장 간 중․저압배관 매설(JB(주))

□ 기대효과

□ 도시가스 미 공급지역에 대한 공급확대로 지역물가 안정기여 및 주민들의

숙원사업 해소

지역경제과장 복규범 / 지역경제팀장 고준웅 / 담당자 선우사라  ☎ 930-3712

Ⅲ-3		시민 힐링 대규모 도시공원 조성

완료시기별	유 형 별	예산별		사업기간		사업주체		추진율
임기내 ․ 임기후	신규 ․ 지속	예산 ․ 비예산		2018~2023		국가ㆍ도ㆍ자체		10%
주관부서	협조부서	시민소통 방법
		설명회, 공청회 등	만족도 조사		민간전문가(대표자) 자문		언론 방송보도 기타
산림공원과	도시재생과	○	○		○		○

□ 정책목표

□ 쾌적하고 아름다운 대규모 공원조성으로 시민들에게 힐링공간 조성

□ 사업개요

□ 사업기간: 2018년∼2022년

□ 사업범위: 90,000㎡

□ 소요예산: 47,000백만원(시비)

□ 사업내용: 공원 부지매입, 공원 조성

- 주요시설 : 중앙광장, 산책로, 생태연못, 운동시설, 관리사무소, 전망쉼터등

□ 연도별 추진계획

연도별	추진계획
추진계획	2018	2019	2020	2021	2022.6월	임기후
		기본계획수립 및 타당성조사용역	타당성조사 및 지방재정투자심사	행정절차추진 -도시관리계획결정등	부지매입	사업완료
비율		10%	30%	50%	80%	100%

□ 연도별 예산확보(계획) 현황

(단위: 백만 원)

구 분	계	기투자	연도별 투자계획
			소계	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22.6월	임기 후
계	47,000		47,000	0	70	100	1,030	30,200	15,600
국 비
도 비
시 비	47,000		47,000	0	70	100	1,030	30,200	15,600
기 타

□ 그간 추진사항

[2018년~2019. 12월]

□ 공원조성 추진계획 수립               2018. 08. 09.

□ 타당성 조사 및 기본계획수립용역      2019. 03. 25. - 2019. 09. 25.

□ 타당성 조사 심의 의뢰서 작성         2019. 12.

추진실적

※

도시공원 조성 추진계획 수립	타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 성과품

□ 2020년 이후 추진계획

□ 타당성 조사 심사의뢰(한국지방행정연구원)            2010.01-2020.07

□ 지방재정투자심사(행정안전부)                        2020.09-2020.10

□ 행정절차 이행                                      2020.11-2021.11

- 도시관리계획결정, 공원조성계획 입안·결정, 실시설계 등

□ 부지매입 및 공사시행                               2021.12

□ 기대효과

□ 도심 내 증가하는 휴식·휴양에 대한 시민 욕구 충족을 통한 삶의 질 향상

□ 가족단위 다양한 활동과 휴식공간이 가능한 대규모 공원 조성으로 가족친화도시로서의 보령시 이미지 제고

산림공원과장 김구연 / 공원팀장 박의석 / 담당자 박의석  ☎930-4054

Ⅲ-4		보령시립도서관 건립

완료시기별	유 형 별	예산별		사업기간		사업주체		추진율
임기내 ․ 임기후	신규 ․ 지속	예산 ․ 비예산		2018-2022		국가ㆍ도ㆍ자체		15%
주관부서	협조부서	시민소통 방법
		설명회, 공청회 등	만족도 조사		민간전문가(대표자) 자문		언론 방송보도 기타
교육체육과	자치행정과	○	○		○

□ 정책목표

□ 생활권에서 시민 누구나 편리하게 이용할 수 있는 공공도서관 건립으로  정보접근을 용이하게 하고 도서관 이용 활성화와 지역문화 발전 도모

□ 사업개요

□ 사업기간: 2018~2022

□ 사업범위: 명천동 203-2 외 6필지

□ 사 업 비: 17,400백만 원

- 재원별(국비5,556, 시비11,844)

□ 사업내용 : 부지7,735㎡, 연면적 3,430㎡(지하1·지상2)

- B1층: 기계, 전기실, 보존서고, 다목적실 등

- 1층: 유아·어린이자료실, 멀티미디어실, 강의실, 동아리방, 휴게공간 등

- 2층: 일반자료실, 학습공간, 회의실 등

□ 연도별 추진계획

연도별	추진계획
추진계획	2018	2019	2020	2021	2022.6월	임기후
	토지매입	국비신청	기본및실시설계	착공	준공
비율	10%	15%	45%	75%	100%	%

□ 연도별 예산확보(계획) 현황

(단위: 백만 원)

구 분	계	기투자	연도별 투자계획
			소계	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22.6월	임기 후
계	17,400	-	17,400	2,260	1,342	298	5,000	8,500	-
국 비	5,556	-	5,556	-	-	119	2,000	3,437	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시 비	11,844	-	11,844	2,260	1,342	179	3,000	5,063	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 그간 추진사항

[2018~2019년]

□ 2019. 1.: 편입토지 매입완료

□ 2019. 2.: 지방재정 투자심사 적정(충남)

□ 2019. 3.: 공공도서관 건립 타당성 검토 적정(문체부)

□ 2019. 11.: 기본 및 실시설계용역 설계공모

□ 2019. 12.: 특별교부세(1,000백만원) 및 2020년 균특예산(119백만원) 확보

□ 2020년 상반기 추진계획

□ 2020. 2.: 기본 및 실시설계용역 설계공모 완료

□ 2020. 3. ~ 9.: 기본 및 실시설계용역

□ 기대효과

□ 지역 중앙관으로서 전문적이고 광범위한 공공도서관 역할 수행으로,

□ 시민들에게 지속적이고 다양한 문화 정보서비스 제공과 독서문화 활성화로 시민 삶의 질 향상 기대

교육체육과장 여장현 / 도서관팀장 김완기 / 담당자 윤여정  ☎ 3320

Ⅲ-5		가족센터 건립(여성∙어린이회관 기능 수행)

완료시기별	유 형 별	예산별		사업기간		사업주체		추진율
임기내 ․ 임기후	신규 ․ 지속	예산 ․ 비예산		2018~2021년		국가ㆍ도ㆍ자체		15%
주관부서	협조부서	시민소통 방법
		설명회, 공청회 등	만족도 조사		민간전문가(대표자) 자문		언론 방송보도 기타
사회복지과		○			○		○

□ 정책목표

□ 여성의 능력개발로 사회참여 확대 및 인적자원 양성 등 평등과 상생의 새로운 지역 문화 창조

□ 어린이들이 항상 마음껏 뛰어놀 수 있는 쾌적한 놀이와 배움의 현대적 ㆍ 다목적 공간 조성

□ 다양한 가족 구성원의 욕구와 역할을 다할 수 있도록 돌봄, 상담, 교육 및 문화       프로그램이 결합된 맞춤형 통합서비스 제공

□ 사업개요

□ 사업기간: 2018년 ~ 2021년

□ 사업범위: 여성, 아동 등 가족지원

□ 소요예산: 12,500백만 원(국비 5,000 도비 3,000 시비 7,000)

□ 사업내용:

- 여성의 능력개발 및 복지증진 ⇨ 여성문화회관, 여성단체협의회

- 어린이들의 놀이와 배움의 공간 제공 ⇨ 장난감 도서관, 아이 돌봄

- 성·가정 폭력 피해자에 대한 전문 상담, 법률·의료 등 지원 ⇨ 가족 ․ 성통합상담센터

- 다양한 가족 구성원의 건강 가정생활 지원 ⇨ 건강가정지원센터, 다문화가족지원센터

- 취약계층 아동 및 청소년 보호 및 지원 ⇨ 드림스타트, 청소년방과후아카데미

□ 연도별 추진계획

연도별	추진계획
추진계획	2018	2019	2020	2021	2022.6월	임기후
	계획수립	토지매입	기본 및 실시설계, 착공	준공	운영	운영
비율	5%	15%	60%	100%

□ 연도별 예산확보(계획) 현황

(단위: 백만 원)

구 분	계	기투자	연도별 투자계획
			소계	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22.6월	임기 후
계	12,500		12,500		2,100	3,070	7,330
국 비	1,550		1,550			1,550
도 비	5,171		5,171			456	4,715
시 비	5,779		5,779		2,100	1,064	2,615
기 타

□ 그간 추진사항

[2018~2019년]

□ 가족지원센터 건립 계획을 위한 기초자료 수집

- 2017년도 국비 지원된 사례, 건립 계획 중인 인근 자치단체 방문

□ 국비 지원을 위해 중앙부처 방문 3회

□ 가족지원센터 건립 타당성 용역 시행 등 행정절차 이행

□ 19. 5. 28.(화) 지방재정투자심사를 위한 도 실무진 현지실사

□ 19. 6. 12.(수) 도 지방재정투자심사 조건부 승인

□ 부지 매입 완료

□ 실시설계용역 5억 원 반영

추진실적

※

□ 2020년 상반기 추진계획

□ 2020. 2월 기본 및 실시설계 용역 공모 완료

□ 2020. 9월 가족센터 건립 공사 착공

□ 기대효과

□ 잠재능력 개발 및 경제적 자립기반 조성으로 여성의 사회참여 확대와 삶의 질 향상

□ 가족 ․ 성폭력 피해자의 인권 보호 등 심신회복 서비스를 통한 사회 복귀 지원

□ 다양한 가족 구성원의 안정적인 삶 지원 및 사회 통합에 기여

사회복지과장 김선미 / 여성보육팀장 강춘아 / 담당자 임태준  ☎ 3621

Ⅲ-6		치매안심센터ㆍ치매병원 운영

완료시기별	유 형 별	예산별		사업기간		사업주체		추진율
임기내 ․ 임기후	신규 ․ 지속	예산 ․ 비예산		2018~2019		국가ㆍ도ㆍ자체		100%
주관부서	협조부서	시민소통 방법
		설명회, 공청회 등	만족도 조사		민간전문가(대표자) 자문		언론 방송보도 기타
보건소 (건강증진과)	건설과						○

□ 정책목표

□ 치매예방 및 조기발견을 위한 시설확충으로 치매책임제 강화

□ 치매통합관리 및 전문서비스 제공으로 환자 및 가족의 삶의 질 향상

□ 사업개요

1. 치매안심센터 설치 운영

□ 사업기간: 2018. 3월 ~ 8월

□ 사업범위: 신축(연면적 490.19㎡/2층)

□ 소요예산: 2,306백만 원(국1,245, 도47, 시1,014)

□ 사업내용: 치매조기검진 ․ 치료비지원 등 치매통합관리서비스 제공

2. 치매안심요양병원 운영

□ 사업기간: 2018. 3월 ~ 2019. 12월

□ 사업범위: 증축 및 리모델링(905.33㎡)

□ 소요예산: 2,070.4백만 원(국1,238, 시832.4)

□ 사업내용: 치매전문병동 확충

□ 연도별 추진계획

연도별		추진계획
		2018	2019	2020	2021	2022.6월	임기후
추진 계획	치매안심센터	설치·운영	운영	운영	운영	운영	운영
	치매안심요양병원	증축공사	공사완료(12월)	운영	운영	운영	운영
비율	치매안심센터	100%	-	-	-	-	-
	치매안심요양병원	70%	100%	-	-	-	-

□ 연도별 예산확보(계획) 현황

(단위: 백만 원)

구 분	계	기투자	연도별 투자계획
			소계	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22.6월	임기 후
계	12,653	-	12,653	4,905	3,587	1,387	1,387	1,387	-
국 비	7,535	-	7,535	2,952	2,234	783	783	783	-
도 비	248.7	-	248.7	61.7	67	40	40	40	-
시 비	4,869.3	-	4,869.3	1891.3	1,286	564	564	564	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 그간 추진사항

[2018~2019년]

□ 치매안심센터 설치: 2018. 8. 27. 정식개소

□ 치매안심요양병원 기능보강사업 설계완료: 2019. 1. 18.

□ 치매안심요양병원 기능보강공사 착공: 2019. 2. 20.

□ 치매안심요양병원 기능보강공사 관급자재 구입: 2019. 3. ~ 6.

□ 치매안심요양병원 기능보강공사 의료장비 구입: 2019. 9. 25.

추진실적

※

<치매안심센터>	<치매안심요양병원>

□ 2020년 상반기 추진계획

□ 치매안심센터(치매예방·상담·조기진단·자원연계·교육 등 치매통합관리서비스 제공)

□ 치매안심요양병원(가정에서 돌보기 어려운 환자 단기입원(6개월 이내) 후 지역사회 복귀)

□ 기대효과

□ 초기상담에서 중증치매까지 원스톱 서비스제공으로 환자와 가족의 부담경감

□ 치매전문병동 설치․운영으로 진단과 치료, 요양 등 전문 치매치료서비스 제공

건강증진과장 심기승 / 치매관리팀장 양정하 / 담당자 양정하  ☎ 5955

Ⅲ-7		종합복지타운 건립

완료시기별	유 형 별	예산별		사업기간		사업주체		추진율
임기내 ․ 임기후	신규 ․ 지속	예산 ․ 비예산		2018~2021년		국가ㆍ도ㆍ자체		50%
주관부서	협조부서	시민소통 방법
		설명회, 공청회 등	만족도 조사		민간전문가(대표자) 자문		언론 방송보도 기타
사회복지과	주민생활지원과 건축허가과				◯		◯

□ 정책목표

□ 급속한 고령화 및 사회변화에 따라 급증하는 복지욕구에 적극 대응하는

노인과 장애인 등을 아우르는 생애 주기별 맞춤형 복지서비스 제공

□ 공공실버주택 내 종합복지타운 건립으로 건강하고 행복한 명품 도시 이미지 제고

□ 사업개요

□ 사업기간: 2018 ~ 2021년

□ 사업범위: 공동주택(실버주택), 종합복지타운(실버ㆍ종합ㆍ장애인복지관)

□ 사 업 비: 22,130백만 원 [재원별(국비 14,430  시비 7,700)]

□ 사업내용

- 실버복지관, 종합사회복지관, 장애인복지관 통합 운영

- 공공실버주택(120세대)

□ 연도별 추진계획

연도별	추진계획
추진계획	2018	2019	2020	2021	2022.6월	임기후
	실시설계, 착공	건축공사 (진도율 30%)	건축공사 (진도율 70%)	준공, 위탁기관선정	운영	운영
비율	10%	50%	80%	100%

□ 연도별 예산확보(계획) 현황

(단위: 백만 원)

구 분	계	기투자	연도별 투자계획
			소계	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22.6월	임기 후
계	22,130	1,000	21,130		17,230	2,000	1,900
국 비	14,430		14,430		14,430
도 비
시 비	7,700	1,000	6,700		2,800	2,000	1,900
기 타

□ 그간 추진사항

[2018~2019년]

□ 복지타운 건립타당성 및 기본계획연구용역 추진

❍ 실버복지관(장애인기능) 규모 확대 및 사업계획 반영

❍ 종합복지타운건립 사업비(시비부담금) 협의

- 19년 20억(29.5%), 20년 26억(35.9%), 21년 21억(34.6%)

❍ 지방재정투자심사(총사업비 217억 원): 8월(승인완료)

❍ 중기지방재정계획 수립 및‘19년 본예산 사업비 반영(20억 원)

❍ 2019. 2.: 실시 설계완료

❍ 2019. 3.: 공공주택건설사업계획 최종승인(국토교통부)

❍ 2019. 4.~5: 착공 및 장애인복지관건립비 일부부담금(20억원) 지급(보령시→LH)

추진실적

※

□ 2020년 상반기 추진계획

□ 사업비 부담금 적기 지급 및 위․수탁 운영관리 절차 이행

□ 기대효과

□ 종합복지타운 건립으로 복지도시에 부응하는 One-Stop 복지서비스 제공

□ 생애주기별 통합운영에 따른 예산절감 및 장애인 인식개선 도모 등

사회복지과장 김선미 / 장애인지원팀장 강현자  ☎ 3604

Ⅲ-8		청정바다 가꾸기 프로젝트

완료시기별	유 형 별	예산별		사업기간		사업주체		추진율
임기내 ․ 임기후	신규 ․ 지속	예산 ․ 비예산		2018. ~ 2022.		국가ㆍ도ㆍ자체		50%
주관부서	협조부서	시민소통 방법
		설명회, 공청회 등	만족도 조사		민간전문가(대표자) 자문		언론 방송보도 기타
해양정책과		○					○

□ 정책목표

□ 해양쓰레기 정화 및 오염원 방지를 통한 깨끗한 해양환경 조성

□ 청정바다 가꾸기 운동 추진으로 글로벌 해양관광 명품도시 기반구축

□ 사업개요

□ 사업기간: 2018 ~ 2022

□ 사업범위: 해양쓰레기 정화 및 오염 방지대책 추진

□ 사 업 비: 19,971백만 원(국 8,094, 도 3,524, 시 8,353)

□ 사업내용

- 청정바다 수호 시민운동 전개

· 연안 대청소의 날 운영 및 해양쓰레기 버리지 않기 예방 교육(2회/년)

· 1사 1연안 가꾸기 운동 및 해양쓰레기 청소마을 운영(1회/월)

- 해양쓰레기 수거체계 확립

· 항포구 및 도서지역 해양쓰레기 정화사업 추진

· 침적 폐어구 수거 및 조업 중 인양쓰레기 수매

· 해양환경미화원 운영, 해양쓰레기 이동식집하장 설치 확대

- 해양환경 오염원 방지대책 추진

· 해양보호구역 지정 및 갯벌생태계 복원사업 추진

· 친환경 생분해성 어구 보급, 방조제 쓰레기 해양유입 사전 차단

· 항만, 어항 주변 불법 적치물 및 쓰레기 무단투기 단속 및 계도(연중)

□ 연도별 추진계획

연도별	추진계획
추진계획	2018	2019	2020	2021	2022.6월	임기후
	-청정바다가꾸기 프로젝트 기반구축	-청정바다가꾸기 프로젝트 사업추진	-청정바다가꾸기 프로젝트 사업추진	-청정바다가꾸기 프로젝트 사업추진	-청정바다가꾸기 프로젝트 사업완료
비율	20%	40%	60%	80%	100%	%

□ 연도별 예산확보(계획) 현황

(단위: 백만 원)

구 분	계	기투자	연도별 투자계획
			소계	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22.6월	임기 후
계	19,971	-	19,971	2,071	3,500	4,900	5,600	3,900	-
국 비	8,094	-	8,094	594	1,300	2,300	2,700	1,200	-
도 비	3,524	-	3,524	274	500	850	1,000	900	-
시 비	8,353	-	8,353	1,203	1,700	1,750	1,900	1,800	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 그간 추진사항

[2018~2019년]

□ 2019. 4.: 대천항 바다쓰레기 수거사업

□ 2019. 4.: 항포구 및 도서지역 쓰레기 수거

□ 2019. 5.: 해양쓰레기 정화사업

□ 2019. 5.: 도서지역 방치쓰레기 처리사업(사업위탁 체결: 한국어촌어항공단)

□ 2019. 5.: 무창포 닭벼슬섬 갯벌생태계 복원사업(사무위탁 체결: 해양환경공단)

□ 2019. 5.: 조업 중 인양쓰레기 수매사업(사업위탁 체결: 보령수산업협동조합)

□ 연안정화의 날 추진(3월∼6월/4회 추진)

□ 2020년 상반기 추진계획

□ 2020. 1.: 대천항 바다쓰레기 수거사업 등 각종 해양쓰레기 수거 사업 추진

□ 2020. 1.: 무창포 닭벼슬섬 갯벌생태계 복원사업 계속 추진(2년차)

□ 연안정화의 날 추진(1월∼12월/12회 추진)

□ 기대효과

□ 깨끗한 해양환경 조성을 통한 글로벌 해양관광 명품도시 기반구축

해양정책과장 한상범 / 해양환경항만팀장 오보형 / 담당자 김태훈 ☎930-6531

Ⅲ-9		경로당 운영 지원 확대

완료시기별	유 형 별	예산별		사업기간		사업주체		추진율
임기내 ․ 임기후	신규 ․ 지속	예산 ․ 비예산		2019~2022년		국가ㆍ도ㆍ자체		100%
주관부서	협조부서	시민소통 방법
		설명회, 공청회 등	만족도 조사		민간전문가(대표자) 자문		언론 방송보도 기타
사회복지과			◯

□ 정책목표

□ 경로당의 어르신 여가 ․ 문화공간으로의 기능 강화

□ 다양한 일자리 발굴과 수요처를 창출하여 사회참여 활동 기회 확대

□ 사업개요

□ 사업기간: 연중

□ 사업범위: 등록경로당 400개소

□ 사 업 비: 2,112백만 원

- 재원별 (국비 514 도비 154 시비 1,444 )

□ 사업내용

- 공익형 노인일자리사업 추진 (모범경로당 도우미지원사업)

- 경로당 배상책임 보험료 1개소 당 20만원 가입 지원

- 운영비 기존 월10만 원→ 변경 월 20만 원 증액 지원

□ 연도별 추진계획

연도별	추진계획
추진계획	2018	2019	2020	2021	2022.6월	임기후
	기본계획수립	사업추진	사업추진	사업추진	사업추진	사업추진
비율	20%	100%	%	%	%	%

□ 연도별 예산확보(계획) 현황

(단위: 백만 원)

구 분	계	기투자	연도별 투자계획
			소계	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22.6월	임기 후
계	9,414		9,414	966	2,112	2,112	2,112	2,112
국 비	2,184		2,184	128	514	514	514	514
도 비	654		654	38	154	154	154	154
시 비	6,576		6,576	800	1,444	1,444	1,444	1,444
기 타

□ 그간 추진사항

[2018~2019년]

□ 2019. 3월 경로당 385개소, 도우미 440명 노인일자리사업 참여

□ 2019. 1월 경로당 운영비 월 20만 원 지원

□ 2019. 5월 경로당 배상책임 보험료 가입을 위한 기초자료 수립

□ 2019. 7월 경로당 배상책임 보험료 가입 완료

추진실적

※

□ 2020년 상반기 추진계획

□ 공익형 노인일자리사업 참여자 근무상황관리 지속

□ 운영비, 경로당 배상책임 보험료 등 지원 지속

□ 기대효과

□ 노인의 사회참여활동 기회 제공을 통한 건강개선, 사회적 관계증진 및

소득 보충 등 활기찬 노후생활에 기여

□ 노인여가복지시설 환경 개선 및 운영지원 확대를 통한 노인복지증진 기여

사회복지과장 김선미 / 경로복지팀장 최  식 / 담당자 김혜경  ☎ 3612

Ⅳ. 살기좋고 경쟁력을 갖춘            살맛나는 부자 농ㆍ어촌

Ⅳ		살기좋고 경쟁력을 갖춘 살맛나는 부자 농ㆍ어촌

공약현황

관리 번호	공약사업명	추진상황				추진율 (%)	추진부서
		완 료		추진중	보류
		종료	이행후계속추진
Ⅳ. 살기좋고 경쟁력을 갖춘 살맛나는 부자 농ㆍ어촌		-	4	7	-	60
1	ㆍ보령 해삼특구 지정			○		30	수산과
2	ㆍ만세버섯산업특구 지원 활성화			○		30	농업기술센터 (친환경기술과)
3	ㆍ농산물 종합가공지원센터 건립			○		50	농업기술센터 (농업지원과)
4	ㆍ자연학습 식물원 조성			○		70	농업기술센터 (농업지원과)
5	ㆍ도서양식장 상시 감시단속체계 구축		○			100	수산과
6	ㆍ치어방류, 종패 보급 확대		○			100	수산과
7	ㆍ어민 그물 수선장(7만2천㎡) 조성			○		20	수산과
8	ㆍ연안여객선 이용 도서민 숙박비 지원		○			100	해양 정책과
9	ㆍ낙후된 여객선 접안시설 개선			○		25	해양 정책과
10	ㆍ농촌인력지원센터 설립운영		○			100	농업기술센터 (농업정책과)
11	ㆍ가뭄 극복 양수저류시설 설치			○		40	건설과

재원계획

(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
계	82,818	7,420	6,365	9,765	21,343	20,070	17,855
국비	25,770	217	848	2,383	7,610	7,620	7,092
도비	11,515	133	910	2,016	3,525	2,569	2,362
시비	18,938	440	980	2,458	5,408	5,201	4,451
기타	26,595	6,630	3,627	2,908	4,800	4,680	3,950

Ⅳ-1		보령 해삼특구 지정

완료시기별	유 형 별	예산별		사업기간		사업주체	추진율
임기내 ․ 임기후	신규 ․ 지속	예산 ․ 비예산		2018. ~ 2022.		국가ㆍ도ㆍ자체	30%
주관부서	협조부서	시민소통 방법
		설명회, 공청회 등	만족도 조사		민간전문가(대표자) 자문			언론 방송보도 기타
수산과	해양수산부 충남도	○						○

□ 정책목표

□ 도서지역 내 천혜의 해삼양식 적지 개발을 통한 특구지정 추진

□ 해삼 지역특화 발전계획 수립을 통한 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

□ 사업기간: 2018 ~ 2022

□ 사업범위: 해삼특구지정 및 해삼산업 발전사업 추진

□ 사 업 비: 30,200백만 원(국 18,000, 도 6,000, 시 6,200)

□ 사업내용: 해삼 충청남도 광역 특구(보령시,태안군) 지정

□ 연도별 추진계획

연도별	추진계획
추진계획	2018	2019	2020	2021	2022.6월	임기후
	-특구지정을 위한 연구용역	-공동 특구지정 신청(중기청)	-공동특구 지정	-해삼특구 관련 해삼산업 추진	-해삼특구 관련 해삼산업 추진	-해삼특구 관련 해삼산업 추진
비율	10%	20%	50%	100%	100%	100%

□ 연도별 예산확보(계획) 현황

(단위: 백만원)

구 분	계	기투자	연도별 투자계획
			소계	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22.6월	임기 후
계	30,200	200	30,000			10,000	10,000	10,000
국 비	18,000		18,000			6,000	6,000	6,000
도 비	6,000		6,000			2,000	2,000	2,000
시 비	6,200	200	6,000			2,000	2,000	2,000

□ 그간 추진사항

[2018년~2019년]

□ 중간보고회 개최(2018.2.28.)

□ 용역 일시 중지(2018.4.16.)

＊ 사유: 간척지 이용에 관한 계획 및 국비지원 사전협의(해수부)

□ 보령해삼 지역특화 발전 특구지정 연구용역 어업인 설명회 개최계획 수립(2019.5.31.)

□ 보령해삼 특구지정 추진 관련 중소벤처기업부 협의(2019.6.4.)

□ 보령해삼 지역특화 발전 특구지정 연구용역 어업인 설명회 개최(2019.8.19.)

□ 보령해삼 지역특화 발전 특구지정 연구용역 의회 설명(2019.9.9.)

□ 보령해삼 지역특화 발전 특구지정 연구용역 최종보고회 개최(2019.9.26.)

□ 보령해삼 지역특화 발전 특구지정 연구용역 충청남도 제출

□ 2020년 상반기 추진계획

□ 충청남도에서 중소벤처기업부에 광역 특구 신청

□ 기대효과

□ 해삼특구 지정을 통항 서해안 해삼산업 거점단지 기반 확충

□ 해삼산업 활성화를 통한 관내 수산업 발전 및 지역경제 활성화

수산과장  김왕주  /  수산행정팀장 이선용   ☎ 6751

Ⅳ-2		만세버섯산업특구 지원 활성화

완료시기별	유 형 별	예산별		사업기간		사업주체		추진율
임기내 ․ 임기후	신규 ․ 지속	예산 ․ 비예산		2018. ~ 2022.		국가ㆍ도ㆍ자체		30%
주관부서	협조부서	시민소통 방법
		설명회, 공청회 등	만족도 조사		민간전문가(대표자) 자문		언론 방송보도 기타
농업기술센터 (친환경기술과)	농업정책과 산림공원과	○	-		○		○

□ 정책목표

□ 최적의 버섯재배 환경을 자랑하는 자연자원과 사계절 축제 등 관광자원을 연계 융‧복합 버섯 Hub로 도약

□ 2016년 버섯산업특구로 지정됨에 따라 버섯산업의 환경변화 대응과 경쟁력 향상을 위한 체계적인 지원시스템 필요

□ 사업개요

□ 사업기간: 2018. ~ 2022.(5년간)

□ 사업범위: 보령시 만세 버섯산업특구 내(미산면 만수로 1097 외 643개 필지)

□ 소요예산: 24,095백만원

- 재원별: 국비 2,061, 도비 650, 시비 2,279, 기금 17,334, 기타 1,771

□ 사업내용

전략	특화사업	단위사업
효율적 재배 환경 조성	시설현대화 및 환경개선	재배시설 표준화 및 리모델링
	생산기반시설 지원	- 배지생산시설 지원 종균배양시설 지원
판로확대 및 브랜드파워 강화	브랜드마케팅 전략 강화	보령버섯브랜드 개발 포장재, 판촉물 개발‧보급
	유통지원 및 마켓 운영	공동선별‧출하 조직 지원 버섯마켓 운영(온‧오프라인)
생산기반 연구&교육	생산기반 연구&교육 생태계 조성	버섯산업학교 구축 및 운영 연구&교육 네트워크 운영

□ 연도별 추진계획

연도별	추진계획
추진계획	2018	2019	2020	2021	2022.6월	임기후
	재배시설 표준화 및 리모델링
		배지생산시설 지원(양송이, 느타리)
				종균배양시설 지원
	브랜드 개발
		포장재 및 판촉물 보급
				유통지원
				버섯마켓 운영
	버섯산업학교 구축 및 운영
비율	15%	30%	50%	80%	100%

□ 연도별 예산확보(계획) 현황

(단위: 백만 원)

구 분	계	기투자	연도별 투자계획
			소계	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22.6월	임기 후
계	31,315	7,220	24,095	4,205	3,875	5,440	5,940	4,635
국 비	2,278	217	2,061	368	563	410	660	60
도 비	783	133	650	110	168	122	233	17
시 비	2,519	240	2,279	260	396	288	547	788
기 타	3,572	1,801	1,771	767	64	20	900	20
기 금	22,163	4,829	17,334	2,700	2,684	4,600	3,600	3,750

□ 그간 추진사항

[2018년~2019년]

□ 2018. 01. ~ 2019. 12. 버섯시설 현대화 및 환경개선 지원: 2,099백만원

□ 2018. 05. ~ 06. 버섯산업학교 구축 공청회 및 부지매입: 870백만원

□ 2018. 07. 2019. 05. 버섯산업학교 사업단 구성 및 운영

□ 2018. 11. ~ 2019. 06. 지역창조농업 시범(가공) 공모선정 및 지원: 70백만원

□ 2019. 02. ~ 2019. 06. 생산기반 연구&교육 지원: 30백만원

□ 2019. 05. ~ 2019. 06. 버섯산업학교 추진계획 변경(포기)

추진실적

※

버섯재배시설 현대화 및 환경개선, 생력화 지원
친환경 신품종양송이 재배 시범	버섯학교 추진 변경(포기) 결재	양송이 재배 기술 교육

□ 2020년 상반기 추진계획

□ 버섯시설 현대화 및 환경개선 지원: 673백만원

□ 양송이 신품종 친환경재배기술 보급시범: 30백만원

□ 양송이버섯 재배용 자주식 배지교반기 시범: 70백만원

□ 양송이버섯 배지 입상장비 구입지원: 145백만원

□ 기대효과

□ 1차 산업에 머물러 있던 버섯산업을 체험 및 생산기반 융‧복합산업으로 연계하여 고부가가치를 창출할 수 있는 신산업화 전략 추진, 지역경제 활성화 도모

친환경기술과장 홍흥표 / 연구개발팀장 김태경 / 담당자 조준형·강지혜  ☎930-7982

Ⅳ-3		보령 농산물종합가공지원센터 건립

완료시기별	유 형 별	예산별		사업기간		사업주체		추진율
임기내 ․ 임기후	신규 ․ 지속	예산 ․ 비예산		2018~2020		국가ㆍ도ㆍ자체		50%
주관부서	협조부서	시민소통 방법
		설명회, 공청회 등	만족도 조사		민간전문가(대표자) 자문		언론 방송보도 기타
농업지원과	농업정책과	○			○		○

□ 정책목표

□ 농산물 가공으로 농가소득원 창출 및 판매처 다원화로 농가소득 증대

□ 사업개요

□ 사업기간: 2018 ~ 2020(3년)

□ 사업장소: 보령시농업기술센터

□ 소요예산: 3,526백만 원

□ 사업내용

- 농산물 종합가공 지원센터 구축·운영(1,000㎡/ 생산 500, 교육 500)

· 건식․습식 기자재 및 HACCP 라인 설치 등

- 창업보육과정 운영, 역량강화

· 단계별 전문가공교육 프로그램 연중 운영, 소규모 창업농 육성 등

□ 연도별 추진계획

연도별	추진계획
추진계획	2018	2019	2020	2021	2022.6월	임기후
	·농산물 가공 센터 구축 연구용역	ㆍ기본 및 실시설계 ㆍ건축 착공 ㆍ가공창업 교육	ㆍ건축물 준공 ㆍ기자재 설치 ㆍ가공창업 교육	ㆍ구축완료 후 본격운영 단계	· 성과 도출 단계
비율	10%	40%	100%

□ 연도별 예산확보(계획) 현황

(단위: 백만 원)

구 분	계	기투자	연도별 투자계획
			소계	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22.6월	임기 후
계	3,526		3,526	50	1,000	2,476
국 비	500		500		200	300
도 비	1,238		1,238		300	938
시 비	1,788		1,788	50	500	1,238
기 타

□ 그간 추진사항

❍ '17. 09.: 충청남도 제3기 균형발전 공모사업 선정

❍ '18. 02. ~ 11.:『농산물 가공지원센터 건립 및 장비 구축』연구용역

❍ '18. 08.: 농촌진흥청 농산물 종합가공 기술지원 공모사업 선정

❍ '19. 01. ~ 06.: 보령 농산물가공 지원센터 신축 실시설계 용역

❍ '19. 02. ~ 11.: 농산물가공 창업보육 과정 운영(기초반 2, 심화반 1)/ 103명

❍ '19. 04. ~ 06.: 계약심사, 일상감사, BF인증, 경관심의 등 행정절차 이행

❍ '19. 07.: 건축, 전기, 통신, 소방 착공 및 감리(건축, 전기, 소방) 착수

추진사진

※

농업인 공청회 장면 (7.25/ 농업기술센터)	농업인 단체 대표단 선진가공센터 견학 (9.10.~11./정선군 외 3개소)	농산물 가공창업교육(기초) (4.11./ 농업기술센터)

□ 2020년 상반기 추진계획

□ ʼ20. 3.: 농산물 가공연구회 조직

□ ʼ20. 3.: 보령시 농산물종합가공지원센터 운영 조례 제정

□ ʼ20. 10.: 보령시 농산물종합가공지원센터 건물 준공 및 가공장비 구입

□ ʼ20. 11.: 가공 시제품 제조

□ 기대효과

□ 소규모 가공품 대상 HACCP 의무적용 확대 등 법적 규제 강화에 선제적 대응

□ 농산물가공센터 가공시설 공동이용으로 농업인 및 예비창업자들의 실패 비용

감소 등 사업비의 효율적 운영

농업지원과장 강상희 / 생활자원팀장 김진희 / 담당자 한은정  ☎ 930-7677

Ⅳ-4		자연학습 식물원 조성사업

완료시기별	유 형 별	예산별		사업기간		사업주체		추진율
임기내 ․ 임기후	신규 ․ 지속	예산 ․ 비예산		2018~2020		국가ㆍ도ㆍ자체		70 %
주관부서	협조부서	시민소통 방법
		설명회, 공청회 등	만족도 조사		민간전문가(대표자) 자문		언론 방송보도 기타
농업지원과	건설과				○		○

□ 정책목표

□ 농업을 테마로 한 자연학습 식물원 조성을 통한 볼거리 및  휴식공간

조성으로 시민의 삶의 질 향상

□ 기후변화 및 미래대응 학습장 조성으로 지속가능한 농업 추진

□ 사업개요

□ 사업기간: 2018. ～ 2020.

□ 사업장소: 주포면 관산리 430일원

□ 규    모: 790㎡

□ 소요예산: 1,550백만원(국비600, 시비950)

□ 사업내용: 자연학습식물원: 무기둥 온실, 난방시설, 관수 자동제어시설

식 물 식 재: 온열대작목, 자생식물, 원예체험 식물 등

□ 연도별 추진계획

연도별	추진계획
추진계획	2018	2019	2020	2021	2022.6월	임기후
	부지조성 실시설계	식물원 신축	식물원 실내조경
비율	20%	70%	100%	%	%	%

□ 연도별 예산확보(계획) 현황

(단위: 백만 원)

구 분	계	기투자	연도별 투자계획
			소계	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22.6월	임기 후
계	1,550			50	1,000	500
국 비	600				500	100
도 비
시 비	950			50	500	400

□ 그간 추진사항

❍ (부지확보) 기후변화 대응작목개발 부지 매입(19,311㎡)

❍ (행정절차) 대상부지 인허가, 계약심사, 공유재산심의, 일상감사 추진

❍ (공사추진) 대상부지 토목공사 및 주차장 포장공사 완료(7,970㎡)

❍ (온실신축) 전기, 소방, 난방, 시스템공사, 유리온실 신축(790㎡)

추진실적(공정율 70%)

※

□ 22020년 상반기 추진계획

❍ (조경시설) 식물원 내부 조경시설물 설치, 체험공간 구성: 2020. 6월

❍ (식물식재) 온열대 작목, 원예체험 식물, 자생식물 등(50종): 2020. 6월

❍ (프로그램) 시민과 어린이들을 위한 체험+학습 프로그램 운영

□ 기대효과

□ 농업을 테마로 한 시민의 체험 및 휴식문화 공간 조성

□ 기후변화에 대응하는 작목개발과 미래형 현장실습 기반구축

농업지원과장 강상희 / 지도기획팀장 양기만 / 담당자 김경중  ☎ 7661

Ⅳ-5		도서양식장 상시 감시 단속체계 구축

완료시기별	유 형 별	예산별		사업기간		사업주체		추진율
임기내 ․ 임기후	신규 ․ 지속	예산 ․ 비예산		2018. ~ 2019.		국가ㆍ도ㆍ자체		100
주관부서	협조부서	시민소통 방법
		설명회, 공청회 등	만족도 조사		민간전문가(대표자) 자문		언론 방송보도 기타
수산과	보령2대대 보령해경	-	-		-		◯

□ 정책목표

□ 양식장 도난(절도) 사전방지로 어업인 양식물 안전관리 및 안정적 생산기반 구축

□ 전복, 해삼양식장 도난방지용 장비(레이더 등) 보급으로 도난방지 상시 감시체계 구축

□ 사업개요

□ 사업기간: 2018. ~ 2022.

□ 사업범위: 관내 도서 양식장 일원

□ 소요예산: 240백만원(도 72, 시 168)

□ 사업내용: 전복․해삼 등 도서양식장 도난방지 시스템 장비구입 지원 및
민․관․군 상시 감시 단속체계 구축 이행

□ 연도별 추진계획

연도별	추진계획
추진계획	2018	2019	2020	2021	2022.6월	임기후
	-레이다 등 설치 1개소 -민관군 감시체계 지속	-레이다 등 설치 1개소 -민관군 감시체계 지속	-민관군 감시체계 지속	-민관군 감시체계 지속	-민관군 감시체계 지속	-민관군 감시체계 지속
비율	100%	100%	100%	100%	100%	100%

□ 연도별 예산확보(계획) 현황

(단위: 백만 원)

구 분	계	기투자	연도별 투자계획
			소계	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22.6월	임기 후
계	240	-	240	120	120	-	-	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	72	-	72	36	36	-	-	-	-
시 비	168	-	168	84	84	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 그간 추진사항

[2018년~2019년]

□ 기 도난방지 시스템 장비구축 지원 도서(5개소)

- 장고도, 삽시도, 외연도, 호도, 녹도

□ 추가 도난방지 시스템 장비구축 지원 도서 선정(4개소, 240백만원)

- 원산도(선진), 호도, 녹도, 외연도

□ 민․관․군 상호 협력 감시체계 구축 이행 완료(2018.4.9./업무협약체결)

□ 추가 도난방지 시스템 장비구축 지원 도서 사업완료(4개소, 240백만원)

- 원산도(선진), 호도, 녹도, 외연도

추진실적

※

□ 2020년 상반기 추진계획

□ 지속적인 민․관․군 상호 협력 감시체계 이행 및 행정지원

□ 기대효과

□ 도서양식장 상시 감시체계 구축으로 양식장 도난방지 및 어업재산 보호

수산과장  김왕주  /  수산자원팀장 김영수 /  담당자  김병곤   ☎ 6771

Ⅳ-6		치어방류, 종패 보급 확대

완료시기별	유 형 별	예산별		사업기간		사업주체		추진율
임기내 ․ 임기후	신규 ․ 지속	예산 ․ 비예산		2018. ~ 2022.		국가ㆍ도ㆍ자체		100
주관부서	협조부서	시민소통 방법
		설명회, 공청회 등	만족도 조사		민간전문가(대표자) 자문		언론 방송보도 기타
수산과	-	-	-		-		◯

□ 정책목표

□ 수산자원 증가를 통한 어업인 소득증대

□ 사업개요

□ 사업기간: 2018. ~ 2022.

□ 사업범위: 관내 해상 일원

□ 소요예산: 7,300백만원(국 2,400 도 1,332 시 2,708 자담 860)

□ 사업내용: 치어, 종패 등 수산자원 종자방류 확대로 수산자원증강 및 어업인 소득증대 도모

□ 연도별 추진계획

연도별	추진계획
추진계획	2018	2019	2020	2021	2022.6월	임기후
	-종자살포 및 방류	-종자살포 및 방류	-종자살포 및 방류	-종자살포 및 방류	-종자살포 및 방류	-종자살포 및 방류
비율	100%	100%	100%	100%	100%	100%

□ 연도별 예산확보(계획) 현황

(단위: 백만 원)

구 분	계	기투자	연도별 투자계획
			소계	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22.6월	임기 후
계	7,300	-	7,300	1,400	1,400	1,500	1,500	1,500
국 비	2,400	-	2,400	480	480	480	480	480	-
도 비	1,332	-	1,332	252	252	276	276	276	-
시 비	2,708	-	2,708	508	508	564	564	564	-
기 타	860	-	860	160	160	180	180	180	-

□ 그간 추진사항

[2018년~2019년]

□ 2018년도 수산종자 매입방류 추진 완료

- 500백만원/ 경제성 어종(대하,꽃게,감성돔,넙치)/ 33,920천미

□ 2018년도 어촌계별 고부가가치 수산종자 방류(살포)지원(완료)

- 393백만원/ 해삼 종자/ 858,766마리/ 9개소(도서,육지)

- 292백만원/ 바지락 종패/ 104,200kg/ 4개소(도서,육지)

□ 2019년도 수산종자 매입방류 추진 완료

- 400백만원/ 경제성 어종(대하,꽃게,넙치)/ 31,097천미

□ 2019년도 어촌계별 고부가가치 수산종자 방류(살포)지원(완료)

- 268백만원/ 해삼 종자/ 584,239마리/ 5개소(도서,육지)

- 214백만원/ 바지락종패 47,489㎏, 전복종패104,828마리/ 8개소(도서,육지)

추진실적

※

□ 2020년 상반기 추진계획

□ 2020년도 고소득 수산자원(종자) 방류계획 수립 및 추진

- 수산종자 매입방류사업 등 7개 사업/ 1,498백만원/ 꽃게,대하,전복,해삼,바지락 등

□ 기대효과

□ 수산자원의 인위적 증가에 의한 어업인 소득증대 도모

수산과장  김왕주  /  수산자원팀장 김영수 /  담당자  김병곤   ☎ 6771

Ⅳ-7		어민 그물 수선장 조성

완료시기별	유 형 별	예산별		사업기간		사업주체		추진율
임기내 ․ 임기후	신규 ․ 지속	예산 ․ 비예산		2018 ~ 2022		국가ㆍ도ㆍ자체		20%
주관부서	협조부서	시민소통 방법
		설명회, 공청회 등	만족도 조사		민간전문가(대표자) 자문		언론 방송보도 기타
수산과	건축허가과	○

□ 정책목표

□ 대천항내 산재한 대형어구어망 작업장 통합관리 필요

□ 수선장 확대조성으로 민원해소 및 관광보령 이미지 제고

□ 사업개요

□ 사업기간: 2018. ~ 2022.

□ 사업범위: 보령시 신흑동 일원

□ 소요예산: 3,100백만 원

- 산출내역: 용역비(1억 원), 도지매입비(20억 원), 수선장 시설비(10억 원)

□ 사업내용: 대천항 어구‧어망 수선장 통합관리를 위한 어민 그물 수선장 조성

□ 연도별 추진계획

연도별	추진계획
추진계획	2018	2019	2020	2021	2022.6월	임기후
	- 대상 수요조사	-대상지 선정 및 타당성 용역	-예산확보 -기본설계용역 행정절차 이행 (투자심사 등)	-토지확보 -공사발주	-사업 준공 -어구어망 수선장 운영	-어구어망 수선장 운영
비율	10%	20%	50%	80%	100%	100%

□ 연도별 예산확보(계획) 현황

(단위: 백만 원)

구 분	계	기투자	연도별 투자계획
			소계	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22.6월	임기 후
계	3,100	-	3,100	0	0	100	2,000	1,000
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-
시 비	3,100	-	3,100	-	-	100	2,000	1,000

□ 그간 추진사항

[2018년~2019년 상반기]

□ 2018. 12. : 어민 그물 수선장 조성사업 타당성 용역 착공

□ 2019.  3. : 어민 그물 수선장 조성사업 타당성 용역 일시중지

- 추가 후보지에 대한 파악‧발굴 및 검토 필요

□ 2019. 12. :  타당성 용역 중지해제 및 대상지 결정

추진실적

※

※ 어민 그물 수선장 대상지 조사(타당성 용역)

타당성 용역 착수	그물 수선장 기본구상(안)

□ 2020년 상반기 추진계획

□ 2020. 3.: 충청남도 타당성 용역 결과보고 및 예산확보 노력

□ 2020. 6.: 기본설계용역 및 투자심사 등 행정절차 이행

□ 기대효과

□ 관광지 및 주거지와 분리된 어구 수선장 조성으로 환경 민원해소

□ 관광객의 대천항내 조망권 보호 및 관광 보령 이미지 제고

□ 어민 그물 수선장 조성으로 산재되어 있는 수선장 집결효과 및 어업 생계를 위한 토지 매입 등 어업 이외의 부수적인 고충 해소

수산과장  김왕주  /  어업지원팀장  윤기형 /  담당자  김광호   ☎ 6781

Ⅳ-8		연안여객선 이용 도서민 숙박비 지원

완료시기별	유 형 별	예산별		사업기간		사업주체		추진율
임기내 ․ 임기후	신규 ․ 지속	예산 ․ 비예산		2019. ~ 2022.		국가ㆍ도ㆍ자체		100%
주관부서	협조부서	시민소통 방법
		설명회, 공청회 등	만족도 조사		민간전문가(대표자) 자문		언론 방송보도 기타
해양정책과	오천면	○			○		○

□ 정책목표

□ 여객선 결항시 도서민 육지 숙박비 지원으로 경제적 부담 완화 및 생활여건 개선

□ 사업개요

□ 사업기간: 2019 ~ 계속

□ 사업범위: 여객선 결항시 미입도 도서민

□ 소요예산: 120백만원(연30백만원)

□ 사업내용: 여객선 결항시 미입도한 도서민의 숙박비 지원(실비 보상)

□ 연도별 추진계획

연도별	추진계획
추진계획	2018	2019	2020	2021	2022.6월	임기후
	지원계획수립, 조례 제정	사업 추진	사업 추진	사업 추진	사업 추진
비율	50%	100%	100%	100%	100%

□ 연도별 예산확보(계획) 현황

(단위: 백만 원)

구 분	계	기투자	연도별 투자계획
			소계	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22.6월	임기 후
계	120	-	120	0	30	30	30	30	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시 비	120	-	120	0	30	30	30	30	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 그간 추진사항

[2018~2019년]

□ 2018.  8.: 도서이장 간담회 개최

□ 2018.  9.: 도서민 숙박비 지원 계획 수립, 조례 법제 및 규제심사

□ 2018. 10.: ‘섬 발전협의회’ 국비 지원 안건 상정 및 중앙정부 국비 지원 의뢰

□ 2018. 11.: 조례 조례규칙심의회 심의 상정

□ 2018. 12.: ‘보령시 연안여객선 이용 도서민 숙박비 지원에 관한 조례’ 공포

□ 2019.  1.: 오천면 업무 협조 요청 및 숙박비 지원 사업 시행

□ 2019.  3.~12.: 도서민 숙박비 지원 사업 숙박비 지급(분기별 지급)

추진실적

※

□ 2020년 상반기 추진계획

□ 2020.  1.: 숙박비 서류 검토 및 지급(계속 추진)

□ 기대효과

□ 실비 지원을 통한 도서민 경제적 부담 완화

해양정책과장 한상범 / 섬자원개발팀장 김양집 / 담당자 김여름  ☎930-6522

Ⅳ-9		낙후된 여객선 접안시설 개선

완료시기별	유 형 별	예산별		사업기간		사업주체		추진율
임기내 ․ 임기후	신규 ․ 지속	예산 ․ 비예산		2018. ~ 2022.		국가ㆍ도ㆍ자체		25%
주관부서	협조부서	시민소통 방법
		설명회, 공청회 등	만족도 조사		민간전문가(대표자) 자문		언론 방송보도 기타
해양정책과			○		○		○

□ 정책목표

□ 낙후된 여객선 접안시설 보수․보강으로 대천-외연도 항로

차도선 운항 유도

□ 여객 및 차량의 승․하선 편의 도모

□ 사업개요

□ 사업기간: 2018 ~ 2022

□ 사업범위: 오천면 호도, 소도, 허육도

□ 소요예산: 2,830백만원

□ 사업내용

- 호도: 차도선 접안시설  *사업비 2,190백만원

- 소도, 허육도: 선착장 보수․보강  *사업비 소도350백만원, 허육도290백만원

□ 연도별 추진계획

연도별	추진계획
추진계획	2018	2019	2020	2021	2022.6월	임기후
	道 개발계획 변경 고시	공사추진 (소도, 허육도)	공사추진 (호도)	공사추진 (공정률70%)	준공
비율	18%	40%	54%	75%	100%	%

□ 연도별 예산확보(계획) 현황

(단위: 백만 원)

구 분	계	기투자	연도별 투자계획
			소계	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22.6월	임기 후
계	2,830	-	2,830	500	640	400	600	690	-
국 비	1,992	-	1,992	0	640	320	480	552	-
도 비	669	-	669	500	0	40	60	69	-
시 비	169	-	169	0	0	40	60	69	-
기 타

□ 그간 추진사항

[2018~2019년]

□ (호도) 충청남도 주관 「호도항 개발계획 변경 용역」추진중(‘19.11.까지)

- 2018.  1. : 제4차 도서종합개발사업중 호도항 접안시설 사업(17억원) 반영

- 2018. 12. : 해양수산부 어촌뉴딜300사업 호도항 접안시설 사업비 우선 반영(25억원)

□ (소도, 허육도) 접안시설 개선사업 시행 대산해양지방수산청에 건의

- 2018.  1. : 제4차 도서종합개발사업중 접안시설 개선 사업(소도 11.5억원) 반영

□ (호도) 어촌뉴딜300사업으로 일부 선정되어 어항구역 내 설치하려 하였으나, 주민 반대 및 사업비 과다로 신규대상지 선정 필요, 충남도에서 위치 재검토 중

추진실적

※

□ 2020년 상반기 추진계획

□ (소도, 허육도) 2020. 1.: 2020년 어촌뉴딜300사업 공모 선정결과에 따라

사업추진방안 마련

□ 기대효과

□ 접안시설 개선을 통한 차도선 운항 유도

□ 여객선 접안시 안전성 증진 및 이용객 편의 제공

해양정책과장 한상범 / 섬자원개발팀장 김양집 / 담당자 김여름  ☎6522

Ⅳ-10		농촌인력지원센터 설립 운영

완료시기별	유 형 별	예산별		사업기간		사업주체		추진율
임기내 ․ 임기후	신규 ․ 지속	예산 ․ 비예산		2018～2020		국가ㆍ도ㆍ자체		100%
주관부서	협조부서	시민소통 방법
		설명회, 공청회 등	만족도 조사		민간전문가(대표자) 자문		언론 방송보도 기타
농업기술센터 농업정책과							○

□ 정책목표

□ 도시에는 일자리 부족으로 애로를 겪고 있는데 반해 농가에서는 농번기 인력 부족 호소

□ 도․농간 협력을 통해 농촌일손 문제의 해결을 도시 유휴인력의 일자리 창출과 연계할 필요

⇒ 고질적인 농촌문제 해소 및 일자리 창출에 기여를 위한 정책 지원

□ 사업개요

□ 사업기간: 2018 ~ 2020

□ 사업장소: 농촌인력중개센터를 운영하고 있는 지역 농협

□ 사업내용: 농촌인력중개센터 운영을 위한 운영비(인건비 포함), 농기계작업비용                 농작업교육, 교통비(수송비), 간식비 등 경상적 경비 지원

□ 사업범위

-「농촌인력지원센터」설치 및 운영: 전담팀 구성

- 인력정보통합시스템 구축 및 운영

- 관련 조례 제정:「농촌인력지원센터 설치 및 운영 조례」제정

□ 사업비: 737백만원(도비 30%, 시비 70%)

□ 연도별 추진계획

연도별	추진계획
추진계획	2018	2019	2020	2021	2022.6월	임기후
	농촌인력지원단 육성계획 수립	전담팀 구성 시스템 구축 관련 조례 제정	구축 완료 및 운영
비율	100%	100%	100%	%	%	%

□ 연도별 예산확보(계획) 현황

(단위: 백만 원)

구 분	계	기투자	연도별 투자계획
			소계	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22.6월	임기 후
계	737		737	40	200	497
국 비
도 비	221.1		221.1	12	60	14
시 비	515.9		515.9	28	140	34
기 타

□ 그간 추진사항

[2018년] 남포농협

□ 전담인력을 통하여 사업활성화를 위한 홍보 및 사업 추진

□ 일반지원단을 통하여 농기계 임작업 대행 추진

□ ‘18. 12.: 일반지원단 농기계 지원: 남포(14농가, 16.6ha)

- 남포: 밭작물(콩, 보리 등  파종 ,수확 작업)

[2019년] 남포, 주산 농협

□‘19. 12.: 전문지원단 모집(지역자원봉사단): 주산(61명), 남포(77명)

□‘19. 12.: 일반지원단 모집(농기계작업자): 주산(92명), 남포(33명)

□‘19. 02.~12.: 일반지원단 농기계 지원: 주산(332농가, 91ha), 남포(26농가, 20ha)

- 주산: 밭작물(콩, 고추, 참깨, 마늘 등 경운·정지작업, 두둑성형작업)

- 남포: 밭작물(콩, 보리 등  파종 ,수확 작업)

□‘19. 02.~12.: 전문지원단 인력중개 지원: 주산(22농가, 3ha)

- 주산: 밭작물(토마토, 딸기, 강낭콩, 쪽파 하우스 정식, 곁순제거, 수확)

추진실적

※

보리 탈곡 작업(남포)	콩 탈곡시연회(남포)	일반지원단 농작업교육(남포)
경운··정지 작업(주산)	플랜카드 홍보(주산)	전문지원단 농작업교육(주산)

□ 2020년 상반기 추진계획

□ 2020. 1. : 농작업지원단 육성·운영홍보(공모, 이장회의, 플랜카드 등)

□ 2020. 2. : 일반지원단 및 전문지원단 모집, 구성

□ 2020. 3. : 일반지원단 및 전문지원단 교육 실시

□ 2020. 4. : 일손필요농업인 홍보 및 접수

□ 2020. 5. : 인력중개 참여자 비망 및 일정관리

□ 2020. 6. : 통계자료 및 사후관리

□ 기대효과

□ 농작업 적기에 인력제공을 통한 농촌 인력의 안정화로 농촌일손 부족 및        농번기 일시 인건비 상승 문제 해소

□ 귀농․귀촌인의 조기정착을 유도하고 농가에 숙련된 인력 제공

농업정책과장 윤병완 / 농산팀장 홍상기  / 담당자 곽미경  ☎ 7623

Ⅳ-11		가뭄극복 양수저류시설 설치

완료시기별	유 형 별	예산별		사업기간		사업주체		추진율
임기내 ․ 임기후	신규 ․ 지속	예산 ․ 비예산		2019~2020		국가ㆍ도ㆍ자체		40%
주관부서	협조부서	시민소통 방법
		설명회, 공청회 등	만족도 조사		민간전문가(대표자) 자문		언론 방송보도 기타
건설과		○

□ 정책목표

□ 최근 몇 년간 지속된 봄 가뭄을 인해 적기 농업용수 공급에 어려움 발생, 이를 극복하기 위한 양수저류시설 설치로 가뭄 사전 대비

□ 사업개요

□ 사업기간: 2019. 01 ~ 2020. 3.

□ 사업범위: 보령시 청라면 황룡리 및 장현리(186ha) 일원

□ 소요예산: 1,500백만원(도비 1,200백만원, 시비 300백만원)

□ 사업내용: 양수저류시설 2개소 설치(황룡저수지 L=7.5km, 장현저수지 L=2.7km)

□ 연도별 추진계획

연도별	추진계획
추진계획	2018	2019	2020	2021	2022.6월	임기후
	보조금 교부결정	보조금지급, 사업착공	사업완료
비율	10%	40%	100%	%	%	%

□ 연도별 예산확보(계획) 현황

(단위: 백만 원)

구 분	계	기투자	연도별 투자계획
			소계	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22.6월	임기 후
계	1,900		1,900		1,500	400
국 비
도 비	1,200		1,200		1,200
시 비	700		300		300	400
기 타

□ 그간 추진사항

[2018년~2019년]

□ 2018. 7.: 재난안전 특별교부세 사업건의

□ 2018. 8. 17.: 상습가뭄재해지역(186ha) 지정·고시(청라면 황룡리·장현리 일원)

□ 2018. 10. 8: 상습가뭄재해지역 중장기 대책수립 공고

□ 2018. 10. 25.: 가뭄극복 양수저류시설 설치사업(12억원) 보조금 교부결정

□ 2018년 3회추경 시 예산편성 및 공기관대행사업비(가뭄극복 양수 저류시설)       보조금 가내시(보령시→한국농어촌공사)

□ 2019. 1. 28.: 가뭄극복 양수저류시설 설치사업 공기관 대행사업비 보조금 지급(1차)

□ 2019. 5.: 가뭄극복 양수저류시설 설치사업 공기관 대행사업비 보조금 지급(2차)

□ 2019. 7.: 주민설명회 개최(청라면, 황룡리, 장현리)

□ 2019. 9.: 기술검토 완료 및 발주 준비(부족 예산 400백만원 추가 건의)

□ 2019. 10.: 사업발주

추진실적

※

보령시 공고  제 2018-1335호

상습가뭄재해지역 해소를 위한 중‧장기대책 수립 공고

자연재해대책법 시행령 제24조제2항의 규정에 의하여 아래와 같이 상습가뭄재해지역 가뭄해소를 위한 중·장기대책을 공고합니다.

지역명	위 치	현재 용수량 (㎥/일)		가뭄해소 중‧장기대책			비고 (수립일자)
		수요량	공급량	사업기간	소요사업비 (백만원)	용수확보 예 정 량 (㎥/일)
황룡장현	청라면 황룡리 장현리	3,084	1,689	2019	1,500	1,395	2018.10.2.

붙임: 상습가뭄재해지역 해소 중·장기대책 1부(건설과 비치).

2018년  10월  8일

보 령 시 장

※ 가뭄극복 양수저류시설 보조금 교부결정

□ 2020년 상반기 추진계획

□ 2020. 1.: 2020년도 본예산 공기관대행사업비 지급(400백만원)

□ 2020. 6.: 사업완료(준공)

□ 기대효과

□ 황룡·장현저수지는 186ha의 농경지에 농업용수를 공급하는 主수원공으로 매년 유역면적 부족에 따른 저수지 담수량 부족으로 가뭄시 피해가 심각한 상황임

□ 이에 수원이 풍부한 청천저수지를 이용한 양수저류시설을 설치하여 186ha의 농경지에 안정적인 농업용수 공급으로 선제적인 가뭄피해 예방 및 농민들의 고충 해소

□ 문제점 및 이후 조치계획

□ 당초 황룡리 및 장현리 일원에 대한 농업용수관로 공급을 계획하였으나, 실시설계용역 추진 결과 청천저수지에서 황룡저수지까지 19억원, 장현저수지까지 5억원의 예산이 필요한 사항임

□ 2020년도 본예산 사업비로 청천저수지에서 황룡저수지까지 관연결에 필요한 추가 부족분 건의(4억원)하여 우선확보 후, 장현저수지 연결에 필요한 사업비 5억원은 향후 확보 검토

건설과장 오갑석 / 농촌개발팀장 최인묵 / 담당자 황의범  ☎ 930-3823

Ⅴ. 건강하고 활기찬

시민중심의 안전도시

Ⅴ		건강하고 활기찬 시민중심의 안전도시

공약현황

관리 번호	공약사업명	추진상황				추진율 (%)	추진부서
		완 료		추진중	보류
		종료	이행후계속추진
Ⅴ. 건강하고 활기찬 시민중심의 안전도시		1	4	5	-	76.5
1	ㆍ경로당, 어린이집 공기청정기 보급	○				100	사회 복지과
2	ㆍ학교 공기청정기 보급		○			100	교육 체육과
3	ㆍ경유자동차 조기폐차 지원		○			100	환경 보호과
4	ㆍ전기자동차 보급 확대			○		35	환경 보호과
5	ㆍ도로변 흡입차량 운행 확대			○		40	환경 보호과
6	ㆍ응급환자 응급실 획기적 개선			○		55	보건소 (보건행정과)
7	ㆍ전문 소아청소년과 확충			○		55	보건소 (보건행정과)
8	ㆍ산후 조리비용 지원		○			100	보건소 (건강증진과)
9	ㆍ시민중심 조직개편		○			100	자치 행정과
10	ㆍ지역안전망 획기적 개선			○		80	안전 총괄과

재원계획

(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
계	32,400	940	2,694	4,687	8,513	7,783	7,783	-
국비	13,277	660	1,118	1,668	3,437	3,197	3,197	-
도비	5,424	87	659	760	1,306	1,306	1,306	-
시비	13,699	193	917	2,259	3,770	3,280	3,280	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

Ⅴ-1		경로당․어린이집 공기청정기 보급

완료시기별	유 형 별	예산별		사업기간		사업주체		추진율
임기내 ․ 임기후	신규 ․ 지속	예산 ․ 비예산		2018년도		국가ㆍ도ㆍ자체		100%
주관부서	협조부서	시민소통 방법
		설명회, 공청회 등	만족도 조사		민간전문가(대표자) 자문		언론 방송보도 기타
사회복지과			○

□ 정책목표

□ 미세먼지 취약계층이 이용하는 경로당, 어린이집 등에 공기청정기를 보급하여

쾌적하고 안전한 보육환경 조성 및 노인복지 증진

□ 사업개요

□ 사업기간: 연중

□ 사업범위: 등록경로당 400개소 및 어린이집 62개소

□ 사 업 비: 1,059백만 원

- 재원별 (국비 284  도비 262  시비 513)

□ 사업내용

- 경로당 공기청정기 구입비 지원: 400개소 714대

- 어린이집 공기청정기 구입비 지원: 62개소 316대

□ 연도별 추진계획

연도별	추진계획
추진계획	2018	2019	2020	2021	2022.6월	임기후
	계획수립 및 사업시행	사업시행
비율	50%	100%	%	%	%	%

□ 연도별 예산확보(계획) 현황

(단위: 백만 원)

구 분	계	기투자	연도별 투자계획
			소계	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22.6월	임기 후
계	1,059	-	1,059	1,059
국 비	284	-	284	284
도 비	262	-	262	262
시 비	513	-	513	513
기 타

□ 그간 추진사항

[2018~2019년]

□ 2018. 12월 어린이집 공기청정기 지원 완료 (62개소, 476대)

□ 2019. 4월 경로당 공기청정기 지원 완료 (393개소, 784대)

추진실적

※

□ 설치사진 (좌-어린이집, 우-경로당)

□ 2020년 상반기 추진계획

□ 공기청정기 지속적인 안전 점검 실시

□ 기대효과

□ 경로당 내 공기질을 개선하고 미세먼지로부터 안전한 쉼터 조성

□ 부모가 믿고 맡길 수 있는 안전한 보육환경 조성에 따른 출산분위기 유도

사회복지과장 김선미	경로복지팀장 최 식 / 담당자 김혜경 ☎ 3612
	여성보육팀장 강춘아 / 담당자 김진아 ☎ 3623

Ⅴ-2		학교 공기청정기 보급

완료시기별	유 형 별	예산별		사업기간		사업주체		추진율
임기내 ․ 임기후	신규 ․ 지속	예산 ․ 비예산		2019~2022		국가ㆍ도ㆍ자체		100%
주관부서	협조부서	시민소통 방법
		설명회, 공청회 등	만족도 조사		민간전문가(대표자) 자문		언론 방송보도 기타
교육체육과	충남교육청						O

□ 정책목표

□ 관내 학교 교실 내 공기청정기 보급으로 미세먼지 걱정 없는 학교 조성

□ 사업개요

□ 사업기간: 2019~2022(4년)

□ 사업범위: 당초: 관내 6개 고등학교 110학급

변경: 관내 유치원 및 초·중·고교 79개교

□ 소요예산: 1,004백만 원(보령시 전체)

□ 사업내용: 보령시 관내 유치원 및 초·중·고교 79개교 대상

천장형 공기청정기, 스탠드형 공기청정기 설치 확대

→ 충청남도 교육청 소요경비 전액부담

※ 당초 도 교육청 주관으로 유치원 및 초·중학교 공기청정기 보급사업 추진

중에 있어 시에서 고등학교 공기청정기 보급 추진하였으나, 지원 범위 확대로

도 교육청에서 유치원 및 학교 지원

□ 연도별 추진계획

연도별	추진계획
추진계획	2018	2019	2020	2021	2022.6월	임기후
		지속추진	지속추진	지속추진	지속추진	지속추진
비율		100%

□ 연도별 예산확보(계획) 현황

(단위: 백만 원)

구 분	계	기투자	연도별 투자계획
			소계	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22.6월	임기 후
계	1,208		1,208	204	251	251	251	251
국 비
도 비	1,208		1,208	204	251	251	251	251	-
시 비									-
기 타									-

□ 그간 추진사항

[2018 ~ 2019년]

□ 2018. 12. 각급 학교 공기청정기 설치 완료

□ 2020년 상반기 추진계획

□ 충청남도교육청 주관으로 전체 유치원 및 초·중·고교 공기청정기 보급

행정적 협조 요청 시 적극 지원

□ 기대효과

□ 공기청정기 보급으로 관내 학생 건강 증진, 쾌적한 환경에서 학습할 권리 보장

교육체육과장 여장현 / 평생교육팀장 황의승 / 담당자 이유석  ☎ 3313

Ⅴ-3		경유자동차 조기폐차 지원

완료시기별	유 형 별	예산별		사업기간		사업주체		추진율
임기내 ․ 임기후	신규 ․ 지속	예산 ․ 비예산		2018년~2022년		국가ㆍ도ㆍ자체		100%
주관부서	협조부서	시민소통 방법
		설명회, 공청회 등	만족도 조사		민간전문가(대표자) 자문		언론 방송보도 기타
환경보호과	민원지적과 (차량등록팀)						○

□ 정책목표

□ 운행 가능한 노후경유차에 대하여 조기폐차를 유도함으로서 도로이동

오염원에서 미세먼지 등 대기오염물질을 저감

□ 사업개요

□ 사업기간: 2018년 ~ 2022년

□ 사업범위: 노후 경유차 연 평균 400대 이상

□ 사 업 비: 6,913백만 원(국비 3,553, 도비 1,007, 시비 2.353)

□ 사업내용

- 노후 경유차를 2022년까지 연 평균 400대 이상 조기 폐차 유도를 위한 지원

□ 연도별 추진계획

연도별	추진계획
추진계획	2018	2019	2020	2021	2022.6월	임기후
	488	1,607	975	975	975
비율	9.7%	41.7%	61.2%	80.6%	100%

□ 연도별 예산확보(계획) 현황

(단위: 백만원)

구 분	계	기투자	연도별 투자계획
			소계	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22.6월	임기 후
계	7,089	176	6,913	562	1,527	1,608	1,608	1,608
국 비	3,641	88	3,553	281	860	804	804	804
도 비	1,034	27	1,007	84	200	241	241	241
시 비	2,414	61	2,353	197	467	563	563	563

□ 그간 추진사항

[2018~2019년]

❍ 2018년 노후경유차 488대 폐차 지원 완료

❍ 2019년 노후경유차 1,607대 폐차 지원 중

추진실적

※

- 노후 경유차 조기 폐차 최대 770만원 지원(2018.2.26. 충남일보 등 지방지)

- 2019년 (배출가스5등급) 경유차 폐차 지원 사업 대상자 선정(내부결재 문서/2019.4.1.)

- 2019년 하반기 경유차 폐차 지원 사업 상자 선정(내부결재 문서/2019.10.15.)

□ 2020년 상반기 추진계획

□ 2020년 노후경유차 975대 폐차 지원 대상자 선정(1,608,000천원)

□ 기대효과

□ 노후 운행 경유차의 운행중 직접 배출되는 오염물질 배출량을 원천 차단하여       깨끗한 대기환경을 유지

□ 대기오염으로 인한 시민건강이나 환경에 관한 위해(危害)를 예방하고 쾌적하게 보전

환경보호과장 신행철 / 대기환경팀장 김영규 / 담당자 최정은  ☎ 930-3667

Ⅴ-4		전기자동차 보급 확대

완료시기별	유 형 별	예산별		사업기간		사업주체		추진율
임기내 ․ 임기후	신규 ․ 지속	예산 ․ 비예산		2018년~2022년		국가ㆍ도ㆍ자체		35%
주관부서	협조부서	시민소통 방법
		설명회, 공청회 등	만족도 조사		민간전문가(대표자) 자문		언론 방송보도 기타
환경보호과							O

□ 정책목표

□ 운행 중 대기오염물질 및 CO2 오염물질이 없는 전기자동차 보급을 통하여 쾌적한 대기환경 조성

□ 사업개요

□ 사업기간: 2018년 ~ 2022년

□ 사업범위: 민간 + 공공부문

□ 사 업 비: 12,995백만원(국비 6.975, 도비 2.690, 시비 3.330)

□ 사업내용

- 환경부에서 지정한 보조금 지원 차량을 구입할 경우 구매보조금 지급

- 전기승용차 보조금은 전비와 저온성능, 배터리용량 등 자동차의 성능을 고려하여 차등(최대 1,700만원)하여 지원

□ 연도별 추진계획

연도별	추진계획
추진계획	2018	2019	2020	2021	2022.6월	임기후
	20대	62대	260대	260대	260대
비율	2.4%	9.5%	39.7%	69.8%	100%

□ 연도별 예산확보(계획) 현황

(단위: 백만 원)

구 분	계	기투자	연도별 투자계획
			소계	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22.6월	임기 후
계	13,313	318	12,995	360	935	3,900	3,900	3,900
국 비	7,213	238	6,975	240	495	2,080	2,080	2,080
도 비	2,740	50	2,690	75	275	780	780	780
시 비	3,360	30	3,330	45	165	1,040	1,040	1,040

□ 그간 추진사항

[2018~2019년]

□ 2018년 전기자동차 20대 구매 지원

□ 2019년 전기자동차 62대, 전기이륜차 11대 구매 지원

추진실적

※

- 2019년 전기이륜차 민간 보급사업 공고(2019.02.19.)

- 2019년 전기이륜차 지원사업 접수 현황 및 추후 계획(내부결재 문서/2019.03.24.)

- 2019년 전기자동차 민간보급 계획 공고(2019.02.20.) - 상반기

- 2019년 전기자동차 지원사업 접수 현황 및 추후 계획(내부결재 문서/2019.03.24.)

- 2019년 전기자동차 민간 보급사업 공고(2019.10.14.) - 하반기

- 2019년 전기자동차 보급사업 대상자 확정 결과보고(내부결재 문서/2019.10.29.)

□ 2020년 상반기 추진계획

□ 2020년 전기자동차 260대 구매 지원 대상자 선정(본예산: 60대, 1회 추경: 200대)

□ 기대효과

□ 자동차에서 배출되는 오염물질의 실질적인 저감으로 쾌적한 대기환경을 조성에 기여

환경보호과장 신행철 / 대기환경팀장 김영규 / 담당자 주용서  ☎ 930-3668

Ⅴ-5		도로변 흡입차량 운행 확대

완료시기별	유 형 별	예산별		사업기간		사업주체		추진율
임기내 ․ 임기후	신규 ․ 지속	예산 ․ 비예산		2018년~2022년		국가ㆍ도ㆍ자체		40%
주관부서	협조부서	시민소통 방법
		설명회, 공청회 등	만족도 조사		민간전문가(대표자) 자문		언론 방송보도 기타
환경보호과			○				○

□ 정책목표

□ 시가지 중심으로 운행하던 흡입차량을 읍․면지역까지 확대 운영

□ 이면도로, 주택가 소규모 도로용 흡입차량 구입․운행

□ 사업개요

□ 사업기간: 2018년 ~ 2020년

□ 사업범위: 보령시 관내 전역

□ 사 업 비: 880백만 원(국비50%, 시비50%)

□ 사업내용

- 소형 청소장비 2대 확보(200백만원): 2019년

- 청소차량 내구연한 도래에 따른 대체취득 국비신청: 480백만원/ 국비50% 시비50%

- 청소차량 전담 및 보조 인력 확보(2명)

□ 연도별 추진계획

연도별	추진계획
추진계획	2018	2019	2020	2021	2022.6월	임기후
		청소장비 2대 확보	차량대체구입
비율		50%	100%

□ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	기투자	연도별 투자계획
			소계	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22.6월	임기 후
계	880	50	830	50	200	480	50	50
국 비	240					240
도 비
시 비	640	50	590	50	200	240	50	50
기 타

□ 그간 추진사항

[2018~2019년]

□ 2018년 노면청소차량 읍·면지역 확대운영

□ 2019년 소형 전기노면 청소차량 구입

- 주요 시가지에 집중된 노면청소 구역을 이면도로, 소규모 도로 (주택가)까지 확대 운행

추진실적

※

- 미세먼지 저감을 위한 도로노면 청소차량 확대운영계획(내부결재 문서/2018. 10. 4.)

- 미세먼지 저감을 위한 전기노면청소차 구입(내부결재 문서/2019. 5. 30.)

□ 2020년 상반기 추진계획

□ 현재 운영 중인 내구연한이 경과된 차량의 대체 구입

- 잦은 고장으로 운행에 차질

□ 기대효과

□ 노면청소 확대 운영으로 도로변 미세먼지 재비산을 방지하여 시민의 건강과 쾌적하고 청결한 시가지 조성

환경보호과장 신행철 / 청소환경팀장 송병준 / 담당자 문지연  ☎ 930-3676

V-6		응급환자 응급실 획기적 개선

완료시기별	유 형 별	예산별		사업기간		사업주체		추진율
임기내 ․ 임기후	신규 ․ 지속	예산 ․ 비예산		2018.~2022		국가ㆍ도ㆍ자체		55%
주관부서	협조부서	시민소통 방법
		설명회, 공청회 등	만족도 조사		민간전문가(대표자) 자문		언론 방송보도 기타
보건소 (보건행정과)			○				○

□ 정책목표

□ 응급실에서 전문의가 24시간 진료체계 유지

□ 응급 수술실 가동 및 중증 응급환자 이송 수단(헬기) 확보

□ 사업개요

□ 사업기간: 2018년 ~ 2022년

□ 사업범위: 24시간 응급실 운영 병원급 의료기관

□ 소요예산: 5,100백만원(국비 1,000, 시비 4,100)

□ 사업내용

- 의료기관 재정지원 기준 마련: 조례제정

- 응급실(수술실) 전문의 인건비 및 시설(장비) 보강 지원

- 도서 및 병원 내 닥터헬기 착륙장 운영

□ 연도별 추진계획

연도별	추진계획
추진계획	2018	2019	2020	2021	2022.6월	임기후
	-전문의 지원 (1명/ 1개소) 닥터헬기 착륙장설치	-전문의 지원 (5명/1개소) -응급실기능 보강	-전문의 지원 (6명/1개소) -수술실운영	-전문의 지원 (6명/1개소) -수술실운영	-전문의 지원 (6명/1개소) -수술실운영	-전문의 지원 (6명/1개소) -수술실운영
비율	30%	100%

□ 연도별 예산확보(계획) 현황

(단위: 백만 원)

구 분	계	기투자	연도별 투자계획
			소계	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22.6월	임기 후
계	5,356	256	5,100	200	850	1,550	1,250	1,250
국 비	1,256	256	1,000	200	200	200	200	200
도 비
시 비	4,100		4,100		650	1,350	1,050	1,050

□ 그간 추진사항

[2018~2019년]

□ (2018.  8.) 효자도, 보령아산병원 내 닥터헬기 착륙장 조성

□ (2018. 12.) 응급의료 지원에 관한 조례 제정

□ (2019.  1.) 지역응급의료기관 재정지원 협약체결

□ (2019.  2.) 신경외과 개설

□ (2019.  3.) 상반기 분 전문의 인건비 및 이송처치료 지급 384백만 원

□ (2019.  5.) 취약지역 응급의료기관 운영비 지급 191백만 원

□ (2019.  6.) 하반기 분 전문의 인건비 및 이송처치료 지급 384백만 원

□ (2019.  6.) 보령시·보령아산병원 업무연찬(상반기)

□ (2019.  7.) 상반기 응급실 이용 고객만족도 조사 실시: 만족도 70.6%

□ (2019. 12.) 상반기 응급실 이용 고객만족도 조사 중

□ (2019. 12.) 보령시·보령아산병원 업무연찬(하반기)

□ 매월 지역응급의료기관 점검

추진실적

※

□ 응급환자 이송수단 확보를 위한 닥터헬기장 건설

<보령아산병원 내 헬기장>		<효자도 헬기장>

□ 지역의료 안전망 구축을 위한 업무협약 체결

<보령시·보령아산병원 업무협약식>

□ 보령시·보령아산병원 업무 연찬 및 보도자료 게재 현황

<보령시·보령아산병원 업무연찬>		<관련 보도자료>

□ 2020년 상반기 추진계획

□ 재활의학과 개설 및 신경외과 수술장비 구입 지원 등

□ 응급실 및 신경외과 전문의 인건비 지원

□ 매월 지역응급의료기관 점검

□ 기대효과

□ 응급의료 취약지역의 여건개선으로 응급의료 안전망 구축

□ 시민의 불안감 해소 및 신속하고 적절한 응급의료서비스 제공

보건소장 박 승 필  /  의약팀장 이 진 우  / 담당자  송 윤 혜 ☎ 930-5932

V-7		전문 소아청소년과 확충

완료시기별	유 형 별	예산별		사업기간		사업주체		추진율
임기내 ․ 임기후	신규 ․ 지속	예산 ․ 비예산		2018.~2022		국가ㆍ도ㆍ자체		55%
주관부서	협조부서	시민소통 방법
		설명회, 공청회 등	만족도 조사		민간전문가(대표자) 자문		언론 방송보도 기타
보건소 (보건행정과)			○				○

□ 정책목표

□ 종합병원급 의료기관에 소아전문 병실 설치 및 운영

□ 소아 응급환자 24시간 상시 진료

□ 사업개요

□ 사업기간: 2018년 ~ 2022년

□ 사업범위: 종합병원급 의료기관

□ 소요예산: 800백만원(시비 100%)

□ 사업내용

- 전문 소아청소년과 설치 지원 및 기준 마련

- 병원 내 전문의 확보 및 소아병실 시설기능 보강

- 소아청소년과 전용 병상 확보(15병상 이상 유지)

- 소아 응급환자 휴일 야간 등 24시간 상시 진료(Call 운영)

□ 연도별 추진계획

연도별	추진계획
추진계획	2018	2019	2020	2021	2022.6월	임기후
	의료기관 지원기준 마련	소아전문병동설치, 운영 전문의확보, 진료	소아전문병실운영 소아응급환자 상시 진료	소아전문병실운영 소아응급환자 상시 진료	소아전문병실운영 소아응급환자 상시 진료	소아전문병실운영 소아응급환자 상시 진료
비율	20%	100%

□ 연도별 예산확보(계획) 현황

(단위: 백만 원)

구 분	계	기투자	연도별 투자계획
			소계	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22.6월	임기 후
계	800		800		350	150	150	150
국 비
도 비
시 비	800		800		350	150	150	150

□ 그간 추진사항

[2018~2019년]

□ (2019.  8.) 보령시의회 간담회 개최

□ (2019. 12.) 응급의료 지원에 관한 조례 제정

□ (2019.  1.) 지역응급의료기관 재정지원 협약체결

□ (2019.  3.) 상반기 분 전문의 인건비 지급

□ (2019.  6.) 하반기 분 전문의 인건비 및 이송처치료 지급 384백만 원

□ (2019.  6.) 보령시·보령아산병원 업무연찬(상반기)

□ (2019. 10.) 소아병동 준공(15병상)

□ (2019. 12.) 보령시·보령아산병원 업무연찬(하반기)

□ 소아병동 운영 및 소아환자 24시간 상시 진료

□ 매월 지역응급의료기관 점검

추진실적

※

□ 지역응급의료기관 운영 활성화를 위한 간담회·연찬회 개최

<보령시의회 간담회>		<보령시·보령아산병원 업무연찬>

□ 지역응급의료기관 소아병동 준공

□ 보령시·보령아산병원 업무 연찬 및 보도자료 게재 현황

<보령시·보령아산병원 업무연찬>		<관련 보도자료>

□ 2020년 상반기 추진계획

□ 소아청소년과 전문의 인건비 지원 및 상시 call 시스템 운영 지속

□ 매월 지역응급의료기관 점검

□ 기대효과

□ 소아청소년 의료서비스 충족 및 의료취약 해소

□ 응급 소아환자 상시 진료로 안심하고 육아할 수 있는 환경 조성

보건소장 박 승 필  /  의약팀장 이 진 우  / 담당자  송 윤 혜 ☎ 930-5932

V-8		산후조리비용 지원

완료시기별	유 형 별	예산별		사업기간		사업주체		추진율
임기내 ․ 임기후	신규 ․ 지속	예산 ․ 비예산		2018~2022		국가ㆍ도ㆍ자체		100%
주관부서	협조부서	시민소통 방법
		설명회, 공청회 등	만족도 조사		민간전문가(대표자) 자문		언론 방송보도 기타
보건소 (건강증진과)	전부서	○	○				○

□ 정책목표

□경제적 부담 경감으로 아이 낳기 좋은 환경조성

□임산부 및 신생아 건강관리 및 양육지원

□산모·신생아 건강관리사 일자리 창출 기여

□ 사업개요

□ 사업기간: 2018~2022년

□ 사업범위: 임산부 및 신생아

□ 소요예산: 3,129백만 원(국비678, 도비 204, 시비2,247)

□ 사업내용

- 산모신생아 건강관리 지원

- 산후조리 본인부담금 지원(본인부담금 90%)

- 동반자녀 돌봄비 지원: 1인 / 일 / 5,000원

- 지원기간: 5일 ~ 25일

□ 연도별 추진계획

연도별	추진계획
추진계획	2018	2019	2020	2021	2022.6월	임기후
	산후조리 비용지원	산후조리 비용지원	산후조리 비용지원	산후조리 비용지원	산후조리 비용지원	산후조리 비용지원
비율	100%	100%	100%	100%	100%	100%

□ 연도별 예산확보(계획) 현황

(단위: 백만 원)

구 분	계	기투자	연도별 투자계획
			소계	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22.6월	임기 후
계	2,695	140	2,555	259	574	574	574	574
국 비	643	78	565	113	113	113	113	113
도 비	180	10	170	34	34	34	34	34
시 비	1,872	52	1,820	112	427	427	427	427
기 타

□ 그간 추진사항

[2018~2019년]

❍ 건강관리 효율적 추진을 위한 제공기관 간담회 : 4회 / 2개소

❍ 산모·신생아 건강관리사 지원: 460명

❍ 산모신생아 건강관리 동반자녀 돌봄비 지원: 216명

❍ 산모·신생아 건강관리 지원사업 홍보: 소책자 배부 등 / 2,000명

추진실적

※

□ 2020년 상반기 추진계획

❍ 산모·신생아 건강관리 질적 서비스 향상을 위한 제공기관과의 간담회

❍ 관내 모든 임산부들이 지원을 받을 수 있도록 홍보 강화

□ 기대효과

□ 산모의 산후 회복과 신생아의 양육지원 및 경제적 부담경감

□ 산모와 신생아 건강증진 도모 및 아이낳기 좋은 환경 조성

건강증진과장 심기승 / 모자보건팀장 이연일 / 담당자 표오순  ☎ 6861

Ⅴ-9		시민중심 조직개편

완료시기별	유 형 별	예산별		사업기간		사업주체		추진율
임기내 ․ 임기후	신규 ․ 지속	예산 ․ 비예산		2018		국가ㆍ도ㆍ자체		100%
주관부서	협조부서	시민소통 방법
		설명회, 공청회 등	만족도 조사		민간전문가(대표자) 자문		언론 방송보도 기타
자치행정과							○

□ 정책목표

□‘건강한 도시, 행복한 보령’구현을 위한 시민중심 조직개편

□ 사업개요

□ (사업기간) 2018년(연도 내)

□ (소요예산) 비예산

□ (개 편 안) 3국, 25실․과, 2직속, 16읍․면․동

□ (주요내용)

- 시민건강 예방 및 안전대책 분야 강화(대기환경, 감염병관리, 치매관리분야)

- 농산, 축산, 수산 분야 지원기능 강화(농산, 축산, 수산분야)

- 시민생활 편의 관련분야 전문성 강화(도로, 교통분야)

- 여가생활을 통한 웰빙 복지기능 강화(산림휴양분야)

- 읍․면․동 복지기능 강화(맞춤형 복지분야)

□ 연도별 추진계획

연도별	추진계획
추진계획	2018	2019	2020	2021	2022.6월	임기후
	조직개편 완료 (10. 17.)
비율	100%	%	%	%	%	%

□ 연도별 예산확보(계획) 현황

(단위: 백만 원)

구 분	계	기투자	연도별 투자계획
			소계	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22.6월	임기 후
계
국 비	해당없음
도 비
시 비
기 타

□ 그간 추진사항

[2018년]

□ 2018. 10. 17. 조직개편 완료

추진실적

※

※  보도자료

□ 2020년 상반기 추진계획

□ 해당없음

□ 기대효과

□ 원활한 정부정책 및 시책추진을 통한 시민중심 행정서비스 품격 제고

□ 주민접점분야, 민생직결분야 등 활성화로 시민체감 행정서비스 질 제고

자치행정과장 한성희 / 인사팀장 양희주 / 담당자 방영권  ☎ 930-3231

Ⅴ-10		지역안전망 획기적 개선

완료시기별	유 형 별	예산별		사업기간		사업주체		추진율
임기내	신규	비예산		2018 ~ 2020		국가		80%
주관부서	협조부서	시민소통 방법
		설명회, 공청회 등	만족도 조사		민간전문가(대표자) 자문		언론 방송보도 기타
안전총괄과	행정안전부

□ 정책목표

□ 재난 안전 기관 간 안전통신망 구축을 통한 효율적 공동대응으로 시민안전 보호

- 보령시‧경찰(해경)‧소방서  간 통합안전시스템 구축

□ 사업개요

□ 사업기간: 2018 ~ 2020

□ 사업범위: 국가재난관리정보시스템(NDMS) 개선 보완

□ 소요예산: 968백만원(국비)

□ 사업내용

GIS상황판 구축		○ GIS상황판의 사용자 편의성 향상을 위한 화면(UI) 개편 ○ GIS상황판 지도 위에 재난자원 정보 표출
긴급재난문자 및 상황전파메시지 발송		○ 긴급재난문자＋국민행동요령 동시발송을 위한 CBS시스템 개선 ○ 개인별 상황전파메시지 수신설정 기능 개발
NDMS 속도 및 자원보강		○ NDMS 응답속도 및 안정성 개선을 위한 자원보강 ○ 노후장비 교체
연계구조		○ 긴급과 비긴급 재난정보로 나누어 분산처리 연계구조 재설계 ○ 재난정보공동이용시스템 연계처리 모니터링 체계 구축

□ 연도별 추진계획

연도별	추진계획
추진계획	2018	2019	2020	2021	2022.6월	임기후
	계획수립 및 계약	NDMS시스템 개선작업	NDMS 구축완료
비율	10%	50%	100%	%	%	%

□ 연도별 예산확보(계획) 현황

(단위: 백만 원)

구 분	계	기투자	연도별 투자계획
			소계	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22.6월	임기 후
계	968		968	968
국 비	968	-	968	968	-	-
도 비
시 비
기 타

□ 그간 추진사항

[2018년~2019년]

□ 국가재난관리정보시스템(NDMS) 기능개선 보완

- CBS(긴급재난문자) 성능개선

□ 2020년 상반기 추진계획

□ 국가재난관리정보시스템(NDMS) 기능개선 지속적 추진

- 행정+소방+경찰 통합망 구축 완료

- 긴급문자+국민행동요령 동시발송

- GIS 상황판 구축(재난관리자원 현황 표출 등)

□ 기대효과

□ 재난안전 구조 기관 간 신속한 대응으로 시민 생명 및 재산 보호

□ 재난안전 구조 기관 간 협업 거버넌스 구축

안전총괄과장 방대길 / 안전정책팀장 김종환 / 담당자 김미애  ☎ 041-930-3261

Ⅵ. 편리한 사통팔달                 교통거점도시

Ⅵ		편리한 사통팔달 교통거점도시

공약현황

관리 번호	공약사업명	추진상황				추진율 (%)	추진부서
		완 료		추진중	보류
		종료	이행후계속추진
Ⅵ. 편리한 사통팔달 교통거점도시		-	1	7		23
1	ㆍ보령~대전 고속도로 건설			○		10	도로과
2	ㆍ충청산업문화철도(보령선) 건설			○		15	교통과
3	ㆍ미산 도화담~남포읍내~흑포삼거리 연계 도로 건설			○		20	도로과
4	ㆍ국도21호(주산~웅천) 도로 건설			○		10	도로과
5	ㆍ시도9호(해안도로~대천방조제) 교량건설			○		10	도로과
6	ㆍ원산도~효자도 간 연도교 건설			○		-	미래 사업과
7	ㆍ연안여객선 준공영제 도입		○			100	해양 정책과
8	ㆍ시도9호(대천IC~해안도로) 확포장			○		30	도로과

재원계획

(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
계	6,541,104	-	2,862	8,948	13,448	33,548	29,848	6,452,450
국비	6,502,132	-	2,531	8,724	10,424	28,924	26,424	6,425,105
도비	7,379	-	9	37	37	37	37	7,222
시비	31,593	-	322	187	2,987	4,587	3,387	20,123
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

Ⅴ-1		보령~대전 고속도로 건설

완료시기별	유 형 별	예산별		사업기간		사업주체		추진율
임기내 ․ 임기후	신규 ․ 지속	예산 ․ 비예산		2018 ~ 2030		국가ㆍ도ㆍ자체		10%
주관부서	협조부서	시민소통 방법
		설명회, 공청회 등	만족도 조사		민간전문가(대표자) 자문		언론 방송보도 기타
도로과		○	-		-		○

□ 정책목표

□ 내륙과 바다를 동․서로 연결하는 교통 네트워크 구축으로 환황해 경제권으로 교통 교두보 마련, 지역 간 균형발전

□ 사업개요

□ 사업기간: 2018년 ~ 2030년

□ 사업범위: 도로건설

□ 소요예산: 약 3조 7,800억 원(국비)

□ 사업내용: 고속도로건설 L=123km(4차선)

□ 연도별 추진계획

연도별	추진계획
추진계획	2018	2019	2020	2021	2022.6월	임기후
	관련자치단체 실무협의 T/F팀 구성	타당성평가용역 착수 및 중간보고회 개최	관련지자체 간 업무 협약 및 공동 건의	제2차고속도로관리계획(‘21~’25) 반영	사업추진 예산반영	사업완료
비율	5%	10%	15%	30%	50%	100%

□ 연도별 예산확보(계획) 현황

(단위: 백만원)

구 분	계	기투자	연도별 투자계획
			소계	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22.6월	임기 후
계	3,780,000		3,780,000	0	0	0	2,000	10,000	3,768,000
국 비	3,780,000	-	3,780,000	-	-	-	2,000	10,000	3,768,000
도 비
시 비

□ 그간 추진사항

[2018년~2019년]

□ 2018.03. : 사업추진 관련 광역․기초 지자체 의견수렴

□ 2018.10. : 광역․기초 지자체 협의체 구성 및 실무자 회의

□ 2018.11. : 제1차 T/F팀 운영회의 개최(업무협약 일정 조율 등)

□ 2019.03. : 제2차 고속도로 건설계획(‘21~’25)수립 사업건의

□ 2019.04. : 타당성평가용역 착수(대전시에서 추진)

□ 2019.04. : 대전광역시 방문 업무협의(도로과장 외2명)

□ 2019.06. : 타당성평가용역 착수보고회

□ 2019.11. : 타당성평가용역 중간보고회

추진실적

※

※ 보령~대전~보은 고속국도 건설 관계기관 운영회의 참석

보령~대전~보은 고속국도건설 타당성평가 용역을 위한 착수보고회

□ 2020년 상반기 추진계획

□『보령-대전-보은 고속국도 건설』타당성조사 용역 준공(대전시)

□ 관련 광역 및 자치단체 간 업무협약 체결 및 공동건의문 채택

□ 총선출마 후보자 정책 공약사업 선정 추진

□ 기대효과

□ 지역 간 균형발전과 물류비 절감 및 관광효과 증대

도로과장   김영인  /  도로시설팀장 신주선 / 담당자 박정근 ☎ 3912

Ⅵ-2		충청산업문화철도(보령선) 건설

완료시기별	유 형 별	예산별		사업기간		사업주체		추진율
임기후	신규	예산		2019 ~ 2025		국가		15%
주관부서	협조부서	시민소통 방법
		설명회, 공청회 등	만족도 조사		민간전문가(대표자) 자문		언론 방송보도 기타
교통과	기획감사실	○					○

□ 정책목표

□ 전국 균형 있는 산업개발 촉진 및 물류 유통의 효율화에 기여

□ 도내 서북부, 내포, 서해안 등과 격차 해소 및 균형발전 도모

□ 사업개요

□ 사업기간: 2019년 ~ 2025년

□ 사업범위: 보령 ~ 부여 ~ 청양 ~ 공주 ~ 세종(조치원)

□ 사 업 비: 2,249,400백만 원(국비)/(당초: 1,876,000백만 원)

□ 사업내용: L=100.7km(단선전철)/(당초: 89.2km)

□ 연도별 추진계획

연도별	추진계획
추진계획	2018	2019	2020	2021	2022.6월	임기후
	사전타당성 조사 연구용역 착수 (충청권실무협의회)	‧ 중앙부처 (국토부, 기재부) ‧ 예타 추진 건의 제4차 국가철도망 구축사업 신청	‧ 예비 타당성 조사 ‧ 제4차 국가철도망 구축사업 반영	‧ 예비 타당성 조사 ‧ 제4차 국가철도망 구축사업 결정	사업예산 확보	사업 추진
비율	5%	10%	15%	20%	100%

□ 연도별 예산확보(계획) 현황

(단위: 백만 원)

구 분	계	기투자	연도별 투자계획
			소계	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22.6월	임기 후
계	2,249,400	-	2,249,400	-	-	500	-		2,248,900
국 비	2,249,400	-	2,249,400	-		500	-	-	2,248,900
도 비
시 비
기 타

□ 그간 추진사항

□ 제19대 대선 및 민선7기 도지사 공약사항 포함

- 국토교통부 철도건설과 / 충청남도 도로철도항공과

□ 국가철도망 구축계획 사업에 반영토록 중앙정부 및 관련기관 방문건의

□ 충청산업문화철도(보령선) 행정협의회 구성 공조체계 유지

- 5개 지자체: 보령시, 부여군, 청양군, 공주시, 세종시

□ 충청산업문화철도(보령선) 사전연구용역 중간보고 및 종합토의

- 2018. 11. 6./ 부여군청

□ 충청산업문화철도(보령선) 사전타당성조사 연구용역 완료/ 2018. 6.

- 2019. 5./ 서울시립대 산하협력단/ 동해기술공사

□ 제4차 국가철도망 구축사업 신규사업 신청/국토교통부/ 2019. 11. 5.

추진실적

※

※ 충청산업문화철도(보령선) 사전타당성조사 연구용역, 제5차 국토종합계획 반영,        제4차 국가철도망 구축사업 신청

□ 이후 추진계획

□ 제4차 국가철도망 구축사업 반영되도록 기재부, 국토부, KDI 등 방문건의 및 홍보마케팅 추진

□ 기대효과

□ 관광객 접근성 강화 및 국가균형 발전 촉진을 위한 철도교통 인프라 확충

□ 세종 및 경부선․충북선을 연결하여 철도 관광객 유치 및 지역발전 도모

교통과장 허 도 욱  /  담당자 교통시설팀장 박상길   ☎ 3953

Ⅵ-3		미산 도화담~남포읍내~흑포삼거리 연계도로 건설

완료시기별	유 형 별	예산별		사업기간		사업주체		추진율
임기내 ․ 임기후	신규 ․ 지속	예산 ․ 비예산		2018 ~ 2030		국가ㆍ도ㆍ자체		20%
주관부서	협조부서	시민소통 방법
		설명회, 공청회 등	만족도 조사		민간전문가(대표자) 자문		언론 방송보도 기타
도로과		○	-		-		○

□ 정책목표

□ 국도21호(보령~서천), 국도40호, 국도77호(보령~태안)도로공사 완공 후 국도36호를 경유하는 도심 구간의 교통체증이 예상되어 우회도로 개설을 통한 교통량 분산 및 교통 불편 해소

□ 사업개요

□ 사업기간: 2017년 ~ 2030년

□ 사업범위: 도로건설

□ 사 업 비: 1,935억 원(국비)

□ 사업내용: 국도건설 L=12.78Km(성주우회도로 5.28Km, 국도36호우회도로 7.5Km)

□ 연도별 추진계획

연도별	추진계획
추진계획	2018	2019	2020	2021	2022.6월	임기후
	성주-남포 구간 보상 및 공사 착수, 남포-신흑 구간 국도․국지도 5개년 계획 건의	성주-남포 구간 보상 및 공사 착수 남포-신흑 구간 사업성분석 (국토연구원)	성주-남포 구간 보상 및 공사 남포-신흑 구간 국도․ 국지도 5개년계획 반영	성주-남포 구간 보상 및 공사 남포-신흑 구간 사업예산반영	성주-남포 구간 보상 및 공사(80%), 남포-신흑 구간 실시설계 및 보상착수	사업완료
비율	10%	15%	20%	30%	50%	100%

□ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	기투자	연도별 투자계획
			소계	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22.6월	임기 후
계	193,500		193,500			8,800	24,300	9,300	140,000
국 비	193,500	-	193,500	2,500	8,600	8,800	24,300	9,300	140,000
도 비
시 비

□ 그간 추진사항

[2017년~2019년]

□ 2017.12.: 남포읍내~흑포삼거리 구간 / 제5차 국도․국지도건설 5개년

계획(21년~25년)반영 건의

□ 2018.03.: 성주우회도로(미산 도화담~남포 읍내리) 공사착공

□ 2019.04.: 대전지방국토관리청 방문 사업반영을 위한 업무협의

□ 2019.05.: 사업성 검토 중인 국토연구원 방문 업무협의

□ 2019.06.: 성주우회도로 터널공사 착공

추진실적

※

※ 국도․국지도 5개년 사업계획 반영 건의

제5차 국도․국지도 건설 5개년 계획 수립 관련 대상지 제출

※ 언론보도

□ 2020년 추진계획

□ 국회의원, 국토부(대전지방국토관리청)등 관련기관 공조를 통한 국도․국지도 5개년 계획 반영을 위한 역량 집중

□ 2020년 하반기 제5차 국도․국지도 5개년 계획(‘21~’25) 대상사업 반영

□ 기대효과

□ 지역 간 균형발전과 물류비 절감 및 관광효과 증대

도로과장   김 영 인  /  도로시설팀장 신 주 선 / 담당자 박 정 근 ☎ 3912

Ⅵ-4		국도21호(주산~웅천) 도로건설

완료시기별	유 형 별	예산별		사업기간		사업주체		추진율
임기내 ․ 임기후	신규 ․ 지속	예산 ․ 비예산		2018 ~ 2030		국가ㆍ도ㆍ자체		10%
주관부서	협조부서	시민소통 방법
		설명회, 공청회 등	만족도 조사		민간전문가(대표자) 자문		언론 방송보도 기타
도로과		○	-		-		○

□ 정책목표

□ 국도21호(서천-보령) 1, 3공구(4차선) 확장(2017년 준공)구간 사이의 미확장 구간(웅천 두룡리~주산 신구리 L=11.4Km,)으로 교통 병목 현상 해소 및 도로 이용 효율성 증대를 위한 확장 및 선형개량 필요

□ 사업개요

□ 사업기간: 2018년 ~ 2030년

□ 사업범위: 도로건설

□ 사 업 비: 231,900백만 원(국비)

□ 사업내용: 도로확장 및 선형개량 L=11.4Km(4차선)

□ 연도별 추진계획

연도별	추진계획
추진계획	2018	2019	2020	2021	2022.6월	임기후
	국도․ 국지도 5개년계획 반영요청	사전기획조사용역실시 (대전지방 국토관리청)	국도․ 국지도 5개년계획 반영	사업예산반영	실시설계 및 보상착수	사업완료
비율	10%	20%	30%	40%	50%	100%

□ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	기투자	연도별 투자계획
			소계	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22.6월	임기 후
계	231,990		231,900				500	5,000	226,400
국 비	231,990		231,900				500	5,000	226,400
도 비
시 비

□ 그간 추진사항

[2018년~2019년]

□ 2018.03. : 국도21호(2구간) 타당성조사용역 추진(자체-계약해지)

□ 2018.12. : 대전지방국토관리청 사전기획조사용역 추진

- 제5차 국도․국지도 5개년계획 반영 건의(1구간 1,489억 원 2구간 830억 원)

□ 2019.04. : 대전지방국토관리청 방문 사업반영을 위한 업무협의

□ 2019.05. : 사업성 검토 중인 국토연구원 방문 업무협의

추진실적

※

※ 국도․국지도 5개년 사업계획 반영 건의

제5차 국도․국지도 건설 5개년 계획 수립 관련 대상지 제출

※ 언론보도

□ 2020년 추진계획

□ 국회의원, 국토부(대전지방국토관리청)등 관련기관 공조를 통한 국도․국지도 5개년 계획 반영을 위한 역량 집중

□ 2020년 하반기 제5차 국도․국지도 5개년 계획(‘21~’25) 대상사업 반영

□ 기대효과

□ 교통 병목구간 해소를 위한 지역 간 균형발전과 물류비 절감 및 관광효과 증대

도로과장   김 영 인  /  도로시설팀장 신 주 선 / 담당자 박 정 근 ☎ 3912

Ⅵ-5		시도9호(해안도로~대천방조제) 교량 건설

완료시기별	유 형 별	예산별		사업기간		사업주체		추진율
임기내 ․ 임기후	신규 ․ 지속	예산 ․ 비예산		2019 ~ 2024		국가ㆍ도ㆍ자체		10%
주관부서	협조부서	시민소통 방법
		설명회, 공청회 등	만족도 조사		민간전문가(대표자) 자문		언론 방송보도 기타
도로과		○	-		-		-

□ 정책목표

□ 고정국가산업단지와 고속도로(대천IC)와의 접근성 향상을 통한 물류비용 절감 및 도심지 교통 혼잡 해소

□ 사업개요

□ 사업기간: 2019년 ~ 2024년

□ 사업범위: 교량가설

□ 사 업 비: 310억 원(국155 지156)

□ 사업내용: 교량 1개소(L=368m, B=13.0m) 및 접속도로 개설 1식

□ 연도별 추진계획

연도별	추진계획
추진계획	2018	2019	2020	2021	2022.6월	임기후
	추진방향모색	타당성 조사용역 착수 행안부 사전 협의	자연재해위험지구 지정 및 실시설계	실시설계 및 보상	보상 및 공사착수	공사완료
비율	3%	10%	30%	50%	60%

□ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	기투자	연도별 투자계획
			소계	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22.6월	임기 후
계	31,000		31,000		100	1,900	4,000	4,000	21,000
국 비	15,500	-	15,500		-	1,000	2,000	2,000	10,500
도 비
시 비	15,500		15,500		100	900	2,000	2,000	10,500

□ 그간 추진사항

[2018년~2019년]

□ 2018.10. : 공약사항 추진계획 수립

□ 2019.02. : 타당성조사용역 착수

□ 2019.08. : 사업 추진계획 보고(행안부 사전협의)

- 타당성용역 추진결과 B/C값이 낮게 예측되어 중앙투자심가 면제되고 국비 지원이 가능한 자연재해위험지구 지정을 통한 사업추진으로 변경

□ 2020년 추진계획

□ 2020년 06.: 자연재해위험지구 지정 및 국비지원 대상사업 반영

□ 2020년 10.: 기본 및 실시설계용역 착수

□ 기대효과

□ 고정국가산업단지와 고속도로(대천IC)와의 접근성 향상을 통한 물류비용 절감 및 도심지 교통 혼잡 해소

도로과장   김 영 인  /  도로시설팀장 신 주 선 / 담당자 박 정 근 ☎ 3912

Ⅵ-6		원산도~효자도 간 연도교 건설

완료시기별	유 형 별	예산별		사업기간		사업주체		추진율
임기내 ․ 임기후	신규 ․ 지속	예산 ․ 비예산		2023. ~ 2027.		국가ㆍ도ㆍ자체		-
주관부서	협조부서	시민소통 방법
		설명회, 공청회 등	만족도 조사		민간전문가(대표자) 자문		언론 방송보도 기타
미래사업과	도로과	○

□ 정책목표

□ 국도77호 개통에 따른 관광수요대응과 원산도~효자도 간 교량가설을 해양관광자원시설로 개발하여 관광 명소화 실현목표

□ 원산도 연육화에 따른 효자도와의 접근성 강화 및 정주환경 개선을 위해 연도교 설치 필요

□ 사업개요

□ 사업기간: 2023년 ~ 2027년(5년)

□ 사업위치: 보령시 오천면 원산도, 효자도 일원

□ 사 업 비: 48,150백만 원

- 재원별(국비 31,305  도비 7,222  시비 9,623)

□ 사업내용: 연도교 건설 L=950m, B=9.0m

□ 연도별 추진계획

연도별	추진계획
추진계획	2018	2019	2020	2021	2022.6월	임기후
					지역개발사업 신청	국토교통부 재원 협의
비율	%	%	%	%	%	%

□ 연도별 예산확보(계획) 현황

(단위: 백만 원)

구 분	계	기투자	연도별 투자계획
			소계	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22.6월	임기 후
계	48,150	-	48,150	-	-	-	-	-	48,150
국 비	31,305	-	31,305	-	-	-	-	-	31,305
도 비	7,222	-	7,222	-	-	-	-	-	7,222
시 비	9,623	-	9,623	-	-	-	-	-	9,623
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 그 간 추진사항

[2018년 ~ 2019년]

□ 2018. 2.: 원산도 해양관광기반 조성사업 기본구상 및 타당성조사 용역 완료

□ 2018.11.: 중기지방재정계획 반영

□ 2019. 2.: 관계부처(국토교통부, 행정안전부, 기획재정부) 재원 협의

⇒ 국토교통부 지역개발사업으로 추진가능하나 지역개발사업(신규) 반영은 2022년에 가능[“원산도 관광거점 진입도로 사업”중 오천203호(선촌항~원산도해수욕장) 노선에 포함하여 단계별추진 가능]

⇒ 지역개발사업계획(사업위치, 사업비 산출 등) 수립 및 장기사업 추진 여·부 검토 필요(경제성, 효율성 등)

□ 2019. 2.: 양승조 도지사 효자도 주민과의 대화(연도교 건설 설명)

□ 2019.12.: 서해안권 발전종합계획 반영 제출

□ 향후 추진계획

□ 2021. 6. : 기본계획수립 용역 추진(교통량 조사, 관광개발계획 등)

□ 기대효과

□ 연도교 등 해양관광기반시설을 구축하여 섬 지역 접근성 확보 및 관광객 유입을 통한 주민소득 향상 및 지역 균형 발전기여

미래사업과장 이수형 / 국도77호개통팀장 박충신 / 담당자 유완재  ☎ 930-6721

Ⅵ-7		연안여객선 준공영제 도입

완료시기별	유 형 별	예산별		사업기간		사업주체		추진율
임기내 ․ 임기후	신규 ․ 지속	예산 ․ 비예산		2018. ~ 2022.		국가ㆍ도ㆍ자체		100%
주관부서	협조부서	시민소통 방법
		설명회, 공청회 등	만족도 조사		민간전문가(대표자) 자문		언론 방송보도 기타
해양정책과			○				○

□ 정책목표

□ 1일 2왕복 미구축 항로 운영비 지원으로 도서민 편익 증진

□ 사업개요

□ 사업기간: 2018. 10. ~ 계속

□ 사업범위: 1일 2왕복 미구축 항로

□ 소요예산: 1,054백만원

□ 사업내용: 여객선 추가 운항으로 발생한 운항결손액 지원

□ 연도별 추진계획

연도별	추진계획
추진계획	2018	2019	2020	2021	2022.6월	임기후
	공모 선정, 사업 추진	사업 추진	사업 추진	사업 추진	사업 추진	사업 추진
비율	100%	100%	100%	100%	100%	100%

□ 연도별 예산확보(계획) 현황

(단위: 백만 원)

구 분	계	기투자	연도별 투자계획
			소계	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22.6월	임기 후
계	1,054	-	1,054	62	248	248	248	248	-
국 비	527	-	527	31	124	124	124	124	-
도 비	157	-	157	9	37	37	37	37	-
시 비	370	-	370	22	87	87	87	87	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 그간 추진사항

[2018~2019년]

□ 2018.  4. : 대천-외연도 항로 1일 생활권 구축 보조항로 공모 선정

□ 2018. 10. : 여객선 1일 2회 항로 운항

□ 2018. 12. : 2018년 연안여객선 준공영제 보조금 지급

□ 2019.  3. : 2019년 대천-외연도항로 1일 생활권 구축항로 지정

□ 2019.  4. : 2019년 연안여객선 준공영제 확대사업 도비보조금 교부 신청

□ 2019.  9. : 2019년 연안여객선 준공영제 확대 보조금 지급

운 항 기 간	기 존 운 항	변 경 운 항	비 고
6월 ∼ 9월	평일2항차, 주말2항차	평일2항차, 주말2항차
4월,5월,10월	평일1항차, 주말2항차		평일1항차 증가
11월∼익년3월	평일1항차, 주말1항차		평일·주말 각1항차 증가

추진실적

※

□ 2020년 상반기 추진계획

□ 2020.  1. : 2020년도 사업 추진(계속 추진)

□ 기대효과

□ 1일 2왕복 운항으로 여객선 탑승 선택의 폭 넓힘

□ 도서민 교통여건 개선 도모

해양정책과장 한상범 / 섬자원개발팀장 김양집 / 담당자 김여름  ☎6522

Ⅵ-8		시도9호(대천IC~해안도로) 확포장

완료시기별	유 형 별	예산별		사업기간		사업주체		추진율
임기내 ․ 임기후	신규 ․ 지속	예산 ․ 비예산		2018 ~ 2021		국가ㆍ도ㆍ자체		30%
주관부서	협조부서	시민소통 방법
		설명회, 공청회 등	만족도 조사		민간전문가(대표자) 자문		언론 방송보도 기타
도로과		○	-		-		-

□ 정책목표

□ 대천IC와 해안도로를 연결하여 교통량 분산 및 고속도로 접근성을 향상시키고, 장래 대천IC와 고정국가산업단지 간 도로를 연결하여 도심지 교통 혼잡 해소

□ 사업개요

□ 사업기간: 2018년 ~ 2021년

□ 사업범위: 대천IC ~ 해안도로

□ 사 업 비: 6,100백만 원(시비)

□ 사업내용: 도로확장 및 선형개량 L=2.6Km(2차선)

□ 연도별 추진계획

연도별	추진계획
추진계획	2018	2019	2020	2021	2022.6월	임기후
	실시설계착수	인허가 및 실과 협의(실시설계완료)	보상 및 공사 추진(50%)	보상 및 공사 추진	보상 및 공사 추진
비율	10%	30%	50%	80%	100%

□ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	기투자	연도별 투자계획
			소계	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22.6월	임기 후
계	6,100	-	6,100	300	-	2,000	2,500	1,300
국 비
도 비
시 비	6,100	-	6,100	300	-	2,000	2,500	1,300

□ 그간 추진사항

[2018년~2019년]

□ 2018. 02. : 기본 및 실시설계용역 착수

□ 2018. 11. : 소규모환경영향평가용역, 재해영향성검토용역 착수

□ 2019. 02. : 주민설명회 개최

□ 2019. 06. : 지적 분할 등 행정절차 이행

□ 2019. 10. : 농지,산지 등 인 허가 절차 이행

□ 2019. 11. : 보상계획 공고 및 통보

□ 2020년 추진계획

□ 2020. 06.: 보상협의 완료 및 공사 착공

□ 2022. 06.: 공사 준공

□ 기대효과

□ 교통량 분산 및 고속도로 접근성 향상, 장래 대천IC와 고정국가산업단지 간 도로를 연결하여 도심지 교통 불편 및 위험해소

도로과장   김 영 인  /  도로시설팀장 신 주 선 / 담당자 박 정 근 ☎ 3912

Ⅶ. 미래교육을 선도하는             명품교육도시

Ⅶ		미래교육을 선도하는 명품교육도시

공약현황

관리 번호	공약사업명	추진상황				추진율 (%)	추진부서
		완 료		추진중	보류
		종료	이행후계속추진
Ⅶ. 미래교육을 선도하는 명품 교육도시		-	6	-	-	100
1	ㆍ어린이집 무상보육 단계적 확대 시행		○			100	사회 복지과
2	ㆍ고등학교 무상급식 식품비 지원		○			100	농업기술센터 (농업정책과)
3	ㆍ입학생 교복비 확대 지원		○			100	교육 체육과
4	ㆍ보령시 전 학생 학습교구재 지원		○			100	교육 체육과
5	ㆍ고교생 해외문화탐방 지원		○			100	교육 체육과
6	ㆍ대학생 학자금 대출이자 전액 지원		○			100	교육 체육과

재원계획

(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
계	25,617	-	2,428	4,787	5,804	5,788	5,420	1,390
국비	3,675	-	735	735	735	735	735	-
도비	4,085	-	261	817	817	817	817	556
시비	17,857	-	1,432	3,235	4,252	4,236	3,868	834
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

Ⅶ-1		어린이집 무상보육 단계적 확대 시행

완료시기별	유 형 별	예산별		사업기간		사업주체		추진율
임기내 ․ 임기후	신규 ․ 지속	예산 ․ 비예산		2018~2022년		국가ㆍ도ㆍ자체		100%
주관부서	협조부서	시민소통 방법
		설명회, 공청회 등	만족도 조사		민간전문가(대표자) 자문		언론 방송보도 기타
사회복지과							○

□ 정책목표

□ 무상보육을 단계적으로 확대 시행하여 수준 높은 보육서비스 제공

□ 사업개요

□ 사업기간: 2018년 ~ 2022년

□ 사업범위: 어린이집 62개소 (아동 2,314명, 교사 329명)

□ 사 업 비: 14,825백만 원

- 재원별 (국비 3,675  도비 1,305  시비 9,845)

□ 사업내용

- 교재교구비 원아 1인당 월 3만 원 / 보육교사 처우개선비 1인당 월 10만 원

- 어린이집 안전공제회비 어린이집 정원별 차등 지원

□ 연도별 추진계획

연도별	추진계획
추진계획	2018	2019	2020	2021	2022.6월	임기후
	계획수립	안전공제회비, 처우개선비 지원	안전공제회비, 처우개선비, 교재교구비 지원	안전공제회비, 처우개선비, 교재교구비 지원	안전공제회비, 처우개선비, 교재교구비 지원
비율	0%	67%	100%			%

□ 연도별 예산확보(계획) 현황

(단위: 백만 원)

구 분	계	기투자	연도별 투자계획
			소계	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22.6월	임기 후
계	14,825		14,825	2,125	2,575	3,375	3,375	3,375
국 비	3,675		3,675	735	735	735	735	735
도 비	1,305		1,305	261	261	261	261	261
시 비	9,845		9,845	1,129	1,579	2,379	2,379	2,379

□ 그간 추진사항

[2018~2019년]

□ 방침결정 및 2019년 본예산 확보

- 개인별 특성화 교재교구비: 690백만 원, 안전공제회비: 28백만 원

□ 관련 조례ㆍ규칙 개정

□ 제1회 추경 처우개선비 추가 확보

- 담임교사 처우개선비: 160백만 원

□ 2019. 9월 담임교사 처우개선비 지원 사업 시행

추진실적

※

□ 2020년 상반기 추진계획

□ 본 사업 지속 추진

□ 기대효과

□ 교재교구비 지원으로 부모부담 완화, 어린이집 안전공제회비 지원으로 믿고 맡길 수 있는 어린이집 환경조성, 보육교사 처우개선비 지원으로 보육서비스의 질 향상

□ 시 특수시책으로 부모, 어린이집, 보육교사에 대한 지원을 단계적으로 확대하여  만족도 높은 보육서비스를 제공하여 출산 분위기 유도

사회복지과장 김선미 / 여성보육팀장 강춘아 / 담당자 김진아 ․ 오경미  ☎ 930-3623․3622

Ⅶ-2		고등학교 무상급식 식품비 지원

완료시기별	유 형 별	예산별		사업기간		사업주체		추진율
임기내	신규	예산		2019년		자체(도 보조)		100%
주관부서	협조부서	시민소통 방법
		설명회, 공청회 등	만족도 조사		민간전문가(대표자) 자문		언론 방송보도 기타
농업정책과							○

□ 정책목표

□ 고교생의 무상급식으로 학부모 부담경감 등 교육복지 실현

□ 안전한 지역 친환경 농산물 공급으로 지역농가 소득 증대

□ 사업개요

□ 사업기간: 2019. 3월부터

□ 사업범위: 관내 6개 고등학교 2,112명

□ 소요예산: 1,390백만원

□ 사업내용: 1일 1식, 연 190일, 중식 지원

□ 연도별 추진계획

연도별	추진계획
추진계획	2018	2019	2020	2021	2022.6월	임기후
		무상급식	무상급식	무상급식	무상급식	무상급식
비율	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

□ 연도별 예산확보(계획) 현황

(단위: 백만 원)

구 분	계	기투자	연도별 투자계획
			소계	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22.6월	임기 후
계	6,950		6,950		1,,390	1,390	1,390	1,390	1,390
국 비
도 비	2,780		2,780		556	556	556	556	556
시 비	4,170		4,170		834	834	834	834	834
민 간
기 타

□ 그간 추진사항

[2018년~2019년]

□ `18. 7월 : 고등학교 무상급식비 예산확보 검토 보고

□ `18. 7월 : 고등학교 무상급식비 예산 시비 부담 가능 통보 (道)

□ `18. 7월 : 충남도, 충남도교육청간 실무협의 및 의견 수렴 등

□ `19. 3월 : 1차분 고등학교 무상급식비 지급 (646백만원)

□ `19. 5월 : 2차분 고등학교 무상급식비 지급 (411백만원)

□ `19. 10월 : 3차분 고등학교 무상급식비 지급 (333백만원)

추진실적

※

※ 보도자료

- `18. 10. 07 : 보령시, 내년부터 고교 무상급식 실시 등 (news1 뉴스)

□ 2020년 상반기 추진계획

□ 1차분 고등학교 무상급식비 지급

- 대    상 : 관내 6개 고등학교 2,112명

- 지급시기 : 3월 예정

□ 지원조건 : 학교급식지원센터를 이용한 식재료 공급

□ 기대효과

□ 성장기 학생의 차별없는 건강증진과 학부모 교육비 부담 완화

□ 안전한 지역 친환경 농산물 공급으로 지역농가 소득 증대

농업정책과장 윤병완 / 학교급식팀장 박종석 / 담당자 김민지  ☎ 930-7631

Ⅶ-3		입학생 교복비 확대 지원

완료시기별	유 형 별	예산별		사업기간		사업주체		추진율
임기내 ․ 임기후	신규 ․ 지속	예산 ․ 비예산		2018~2022		국가ㆍ도ㆍ자체		100%
주관부서	협조부서	시민소통 방법
		설명회, 공청회 등	만족도 조사		민간전문가(대표자) 자문		언론 방송보도 기타
교육체육과	보령교육 지 원 청						○

□ 정책목표

□ 관내 중·고교 입학생들에게 교복구입비를 지원하여 교육의 공공성 강화 및 보편적 교육복지 실현

□ 사업개요

□ 사업기간: 2018~2022(5년)

□ 사업범위: 관내 고등학교 입학 예정자 약 3,300명(5년 추산)

※ 중학교 신입생 교복구입비는 충남교육청 전액부담

□ 소요예산: 997백만 원(시비 100%)

□ 사업내용: 고교 신입생 교복구입비 지원(동, 하복 각 1벌)

교복 학교주관 구매제도를 통해 학교에 보조금 지원

* 교복 학교주관 구매제도: 학교 주관 품질심사를 통과한 업체를 대상으로,

정해진 출고 가격을 두고 전자 입찰을 통해 학교에서 교복을 구매하는 제도

□ 연도별 추진계획

연도별	추진계획
추진계획	2018	2019	2020	2021	2022.6월	임기후
	계획수립 및 학교별 보조금 지급(3월)	계획수립 및 학교별 보조금 지급(3월)	계획수립 및 학교별 보조금 지급(3월)	계획수립 및 학교별 보조금 지급(3월)	계획수립 및 학교별 보조금 지급(3월)	실효성판단 후 계속 지원여부 결정
비율	100%	100%	100%

□ 연도별 예산확보(계획) 현황

(단위: 백만 원)

구 분	계	기투자	연도별 투자계획
			소계	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22.6월	임기 후
계	997		997	203	200	198	198	198
국 비
도 비
시 비	997		997	203	200	198	198	198	-
기 타

□ 그간 추진사항

[2018 ~ 2019년]

□ 관내 고교신입생 교복비 지급 완료

- 동복 : 2019. 3. 14. / 하복: 2019. 5. 28.

□  관내 6개 고교 신입생 교복지원사업에 대해 정산 중

□ 2020년 상반기 추진계획

□ 2020년도 사업 계획 수립 및 보조금 지급

□ 학기 초 교복 공동구매시기에 맞춰 차질 없이 지원.

□ 기대효과

□ 학부모의 경제적 부담 경감 및 교육복지 실현 증진

교육체육과장 여장현 / 평생교육팀장 황의승 / 담당자 이유석  ☎ 3313

Ⅶ-4		보령시 전 학생 학습교구재 지원

완료시기별	유 형 별	예산별		사업기간		사업주체		추진율
임기내 ․ 임기후	신규 ․ 지속	예산 ․ 비예산		2019~2022		국가ㆍ도ㆍ자체		100%
주관부서	협조부서	시민소통 방법
		설명회, 공청회 등	만족도 조사		민간전문가(대표자) 자문		언론 방송보도 기타
교육체육과	보령교육 지 원 청						○

□ 정책목표

□ 학부모의 교육비 경감및 공평한 교육기회 보장

□ 사업개요

□ 사업기간: 2019~2022(4년)

□ 사업범위: 관내 초·중·고등학교 학생 약 9,300명(매년)

□ 소요예산: 2,325백만 원(시비 100%)

□ 사업내용: 관내 초·중·고 학생들에게 학기 초(연 2회) 학습 준비물 대금 지원

지출항목	산출근거	예 산 액 (백만 원)
학습 교구재비 (실습물품, 교재 등)	ㅇ초등학생 6만원, 중·고교생 10만원 - 2019년 4,700명×6만원 + 4,700명X5만원 - 2020년 4,600명×6만원 + 4,600명X10만원 - 2021년 4,500명×6만원 + 4,500명X10만원 - 2022년 4,400명×6만원 + 4,400명X10만원	2,325

□ 연도별 추진계획

연도별	추진계획
추진계획	2018	2019	2020	2021	2022.6월	임기후
		계획수립 및 학교별 보조금 지급(3월)	계획수립 및 학교별 보조금 지급(3월)	계획수립 및 학교별 보조금 지급(3월)	계획수립 및 학교별 보조금 지급(3월)	실효성판단 후 계속 지원여부 결정
비율		100%	100%

□ 연도별 예산확보(계획) 현황

(단위: 백만 원)

구 분	계	기투자	연도별 투자계획
			소계	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22.6월	임기 후
계	2,325		2,325		517	736	720	352
국 비
도 비
시 비	2,325		2,325		517	736	720	352
기 타

□ 그간 추진사항

[2018 ~ 2019년]

□ 2019년도부 학습교구재비 관내 초,중,고교에 지급 완료 : 501백만원

-1차 : 5. 14. / 2차 : 5. 28.

□ 초중고등학교 학습교구재비 지원사업에 대한 정산

□ 2020년 상반기 추진계획

□ 2020년도 사업 보조금 교부결정 및 보조금 지급

□ 교육청, 학교와 협의후 지원가능 물품 및 수요파악

□ 기대효과

□ 학기 초 개학시기에 맞춰 학습교구재 구입비 지원

□ 학습 준비물 미비로 발생하는 학습 결손을 방지, 학부모의 경제적 부담 경감

교육체육과장 여장현 / 평생교육팀장 황의승 / 담당자 이유석  ☎ 3313

Ⅶ-5		고교생 해외문화탐방 지원

완료시기별	유 형 별	예산별		사업기간		사업주체		추진율
임기내 ․ 임기후	신규 ․ 지속	예산 ․ 비예산		2018~2022		국가ㆍ도ㆍ자체		100%
주관부서	협조부서	시민소통 방법
		설명회, 공청회 등	만족도 조사		민간전문가(대표자) 자문		언론 방송보도 기타
교육체육과	보령교육 지 원 청						○

□ 정책목표

□ 관내 고교 우수 신입생 대상 해외 문화탐방 지원으로 국제화 시대를 선도하는 지역인재 육성

□ 사업개요

□ 사업기간: 2018~2022(5년)

□ 사업범위: 관내 고교 우수 신입생 25명(매년)

□ 소요예산: 500백만 원(시비 100%)

□ 사업내용: 고교 우수 신입생 대상 해외 문화탐방비 지원

□ 연도별 추진계획

연도별	추진계획
추진계획	2018	2019	2020	2021	2022.6월	임기후
		계획수립 및 교육지원청 보조금 지급(1월)	계획수립 및 교육지원청 보조금 지급(1월)	계획수립 및 교육지원청 보조금 지급(1월)	계획수립 및 교육지원청 보조금 지급(1월)	계획수립 및 교육지원청 보조금 지급(1월)
비율		100%	100%

□ 연도별 예산확보(계획) 현황

(단위: 백만 원)

구 분	계	기투자	연도별 투자계획
			소계	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22.6월	임기 후
계	500		500	100	100	100	100	100
국 비
도 비
시 비	500		500	100	100	100	100	100	-
기 타

□ 그간 추진사항

[2018 ~ 2019년]

□ 관내 고교생 해외문화 탐방(2018예산)

- 기간 : 2019. 2. 11. ~ 2. 20.       -장소 : 미국 서부(LA, 샌프란시스코)

- 인원 : 26명(6개교)

추진실적

※

샌프란시스코 금문교	스탠포드대학 방문	그랜드캐년 방문
대한인국민회 방문	그리니치 천문대 방문	유니버셜 스튜디오 방문

【해외문화탐방 관련 사진】

□ 2020년 상반기 추진계획

□ 관내 고교생 해외문화 탐방(2019년 예산)

- 기간 : 2020. 2. 6. ~ 2. 15.       -장소 : 미국 서부(LA, 샌프란시스코)

- 인원 : 26명( 6개교)

□ 관내 고교생 해외문화탐방 실시계획수립 (2020년 예산 : 교육청과 협의)

-대상 : 관내 고교생 (1개학년 : 210명)     -사업비 : 80백만원

□ 기대효과

□ 지역인재 외부 유출 방지로 명문고 육성, 지역 교육경쟁력 강화

□ 학생들의 견문을 넓히는 기회로 학업성취도 향상, 학업 동기부여

교육체육과장 여장현 / 평생교육팀장 황의승 / 담당자 이유석  ☎ 3313

Ⅶ-6		대학생 학자금 대출이자 전액 지원

완료시기별	유 형 별	예산별		사업기간		사업주체		추진율
임기내 ․ 임기후	신규 ․ 지속	예산 ․ 비예산		2019~2022		국가ㆍ도ㆍ자체		100%
주관부서	협조부서	시민소통 방법
		설명회, 공청회 등	만족도 조사		민간전문가(대표자) 자문		언론 방송보도 기타
교육체육과							○

□ 정책목표

□ 경제적 어려움을 겪는 관내 출신 대학생들에게 부담을 덜어줌으로써 평등

교육 기회 제공

□ 사업개요

□ 사업기간: 2019~2022(4년)

□ 사업범위: 한국 장학재단에서 학자금 대출을 받은 본인 또는 직계혈족이

1년 이상 보령시에 주소를 둔 대학생

□ 소요예산: 20백만 원(시비 100%)

지출항목	산출근거	예산액(백만 원)
학자금 대출이자 지원	- 5백만원×4년 * 연간 약 200명 지원, 연이율 2.2%	20

□ 사업내용: 이자 지원 신청접수 학기부터 졸업 시 까지 학자금 대출이자

전액 지원

□ 연도별 추진계획

연도별	추진계획
추진계획	2018	2019	2020	2021	2022.6월	임기후
		연2회 신청접수 후 이자지원	연2회 신청접수 후 이자지원	연2회 신청접수 후 이자지원	연2회 신청접수 후 이자지원	실효성 판단 후 계속지원 여부 결정
비율		100%	100%

□ 연도별 예산확보(계획) 현황

(단위: 백만 원)

구 분	계	기투자	연도별 투자계획
			소계	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22.6월	임기 후
계	20		20		5	5	5	5
국 비
도 비
시 비	20		20		5	5	5	5	-
기 타

□ 그간 추진사항

[2018 ~ 2019년]

□ 7. 8. 학자금 대출 이자 지원 신청 접수

□ 9. 10. 2019년 상반기 학자금 대출 이자 발생분에대한 이자 지원

- 한국장학재단 / 8명 125 천원

추진실적

※

【보도자료】

(출처 : 충남일보)

□ 2020년 상반기 추진계획

□ 2019 하반기 학자금 대출 이자 발생분에대한 이자 지원: 2020년 1월초

□ 기대효과

□ 학자금대출을 받은 대학생들의 경제적, 사회적 부담 경감

□ 대학생 학업전념 환경조성 및 학부모 경제적 부담 경감

교육체육과장 여장현 / 평생교육팀장 황의승 / 담당자 이유석  ☎ 3313